ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2009 г. N 498-ПП
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
	МОСКВЫ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 1105-ПП

	В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 196-ПП "О
	порядке рассмотрения обращений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков и
	инвестиционные контракты (договоры), предусматривающие 	строительство	 (реконструкцию)
	градостроительных объектов, или об их расторжении" и в целях реализации инвестиционного
	проекта 	строительства	 объекта по адресам: 4-я Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и
	стр. 6 Правительство Москвы постановляет:

	1. Продлить срок реализации инвестиционного проекта строительства объекта по адресам: 4-я
	Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и стр. 6 по I очереди строительства до конца I
	квартала 2009 г., по II очереди строительства до конца II квартала 2010 г. без применения к инвестору
	обществу с ограниченной ответственностью "Расчетный организационный совет ЕвроИнвест" (далее
	- ООО "РосЕвроИнвест") штрафных санкций.

	2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. N 1105-ПП
	"О строительстве жилого 	дома	 по адресу: 4-я Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и
	стр. 6 (Восточный административный округ)" (в редакции постановлений Правительства Москвы от
	26 апреля 2005 г. N 256-ПП, от 22 ноября 2005 г. N 927-ПП, от 20 февраля 2007 г. N 120-ПП):

	2.1. В заголовке и тексте постановления слова "жилой 	дом"	 заменить словами "жилой комплекс"
	в соответствующих падежах.

	2.2. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:

	"1.1. Осуществить в 2004-2010 гг. разработку предпроектной и проектной документации и
	строительство жилого комплекса с пристроенными торговыми помещениями и подземным гаражом-
	стоянкой по адресам: 4-я Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и стр. 6 в две очереди:

	I очередь - в срок до 31 марта 2009 г. - строительство 1-го и 2-го корпусов жилого комплекса на
	месте сносимых 	зданий	 по адресу: 4-я Парковая ул., вл. 16, стр. 1-3, принадлежащих ООО
	"РосЕвроИнвест" на праве собственности (свидетельства о государственной регистрации права
	собственности от 24 июня 2002 г. N 77 АА 368658, N 77 АА 368659, N 77 АА 054222, N 77 АА
	054223).

	II очередь - в срок до 30 июня 2010 г. - строительство 3-го и 4-го корпусов жилого комплекса на
	месте сносимых 	зданий	 по адресу: ул. Первомайская, д. 42, стр. 1 и стр. 6, принадлежащих на праве
	оперативного управления Государственному образовательному учреждению специальной
	(коррекционной) образовательной школе-интернату N 49 для детей-сирот и детей, оставшихся без
	попечения родителей, с задержкой психического развития им. Г.И. Россолимо (контракт от 17 мая
	1999 г. N 0-477/99)".

	2.3. В пункте 15 постановления исключить слова "первого заместителя Мэра Москвы в
	Правительстве Москвы Швецову Л.И. и".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	3. Утвердить акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта
	(земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции от 9 ноября 2007 г. N А-
	4672/01 (пролонгирован до 29 июля 2009 г.) согласно приложению (не приводится) для
	осуществления нового строительства жилого комплекса с пристроенными торговыми помещениями
	и подземным гаражом-стоянкой по адресу: 4-я Парковая ул., вл. 16 со следующими допустимыми
	технико-экономическими показателями объекта: площадь земельного участка - 2,152 га; максимальная
	общая площадь объекта - 215212 кв. м, в том числе жилая площадь квартир - 79900 кв. м, наземная
	площадь - 163507 кв. м, подземная площадь - 51705 кв. м; этажность - 30, 37 + технический.

	4. ООО "РосЕвроИнвест" представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы
	договоры аренды земельных участков от 31 января 2005 г. N М-03-506488 и от 29 июня 2007 г. N М-
	03-508343 для внесения в установленном порядке необходимых изменений о продлении сроков
	аренды (п. 1).

	5. ООО "РосЕвроИнвест" в связи с увеличением общей площади квартир в объекте осуществить
	перечисление в бюджет города Москвы денежных средств в размере 300036715 руб. в течение 10
	дней после подписания дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 6.1).

	6. Префектуре Восточного административного округа города Москвы в установленном порядке
	подготовить и в месячный срок с даты выпуска настоящего постановления представить в
	Департамент города Москвы по конкурентной политике для оформления, организации подписания и
	учетной регистрации в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы:

	6.1. Согласованный проект дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 15
	декабря 2004 г. N 11-002465-5301-0013-00001-04 на условиях настоящего постановления,
	содержащий в качестве приложения график выполнения сторонами обязательств по
	инвестиционному контракту с учетом сроков исполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в
	эксплуатацию, с приложением установленного комплекта документов.

	6.2. Согласованный проект акта о результатах реализации инвестиционного проекта после
	сдачи объекта в эксплуатацию и представления инвестором установленного комплекта документов.

	7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на префекта Восточного
	административного округа города Москвы Евтихиева Н.Н.

	И.о. Мэра Москвы

	В.И. Ресин

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.