ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 мая 2009 г. N 1022-РП
	О ЗАВЕРШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
	СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ:
	ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР, ВЛ. 13

	В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 196-ПП "О
	порядке рассмотрения обращений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков и
	инвестиционные контракты (договоры), предусматривающие 	строительство	 (реконструкцию)
	градостроительных объектов, или об их расторжении":

	1. Принять к сведению, что закрытым акционерным обществом "АМ-Билдинг Центр" (далее -
	ЗАО "АМ-Билдинг Центр") за несоблюдение ранее установленного срока реализации
	инвестиционного проекта 	строительства	 коммерческо-делового центра по адресу: Зубовский
	бульвар, вл. 13 (далее - объект) произведена оплата штрафа в размере 731776 руб. 30 коп.

	2. Установить ЗАО "АМ-Билдинг Центр" новый срок окончания строительства объекта до 31
	декабря 2009 г.

	3. За нарушение срока строительства объекта применить к инвестору ЗАО "АМ-Билдинг Центр"
	штрафные санкции в соответствии с условиями договора аренды земельного участка от 3 января 1996
	г. N М-01-003899.

	4. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 21 мая 2008 г. N 1098-РП "О
	строительстве коммерческо-делового центра по адресу: Зубовский бульвар, вл. 13":

	4.1. В пункте 1 распоряжения заменить слова "до 31 декабря 2008 г." словами "до 31 декабря
	2009 г.".

	4.2. В пункте 1 распоряжения исключить слова "с применением штрафных санкций с 1 августа
	2006 г. в соответствии с условиями договора аренды земельного участка от 3 января 1996 г. N М-01-
	003899 без перерасчета платы за заключение договора аренды земельного участка".

	4.3. Пункт 3.7 распоряжения признать утратившим силу.

	5. Префектуре Центрального административного округа города Москвы обеспечить
	оперативный контроль за ходом реализации инвестиционного проекта по адресу: Зубовский бульвар,
	вл. 13 с учетом обязательств, принятых инвестором ЗАО "АМ-Билдинг Центр", согласно графику
	реализации инвестиционного проекта, оформленному в соответствии с постановле32	5.1.2600	1	3	3	0f31404e-1151-4b4c-8b15-9fb112a08a1d			3				false	rambler34475391	00000000-0000-0000-0000-000000000011	83.149.8.107	2013-07-16 23:34:26.511	11	d	00000000-0000-0000-0000-000000000000		2	3					f						00000000-0000-0000-0000-000000000011			3					334475392	00000000-0000-0000-0000-000000000011	176.52.3.14	2013-07-16 23:34:26.574	11	d	00000000-0000-0000-0000-000000000000		3	1					f						00000000-0000-0000-0000-000000000011			3					134475393	00000000-0000-0000-0000-000000000011	95.55.59.124	2013-07-16 23:34:26.591	11	d	00000000-0000-0000-0000-000000000000		2	3					f						00000000-0000-0000-0000-000000000011			3					334475394	00000000-0000-0000-0000-000000000011	78.25.123.160	2013-07-16 23:34:26.845	11	d	00000000-0000-0000-0000-000000000000		2	3					f						00000000-0000-0000-0000-000000000011			3					334475395	2ee17b35-8fc6-46ea-8cb2-45ed6890f176	188.162.167.21	2013-07-16 23:34:26.892	2	dwnJul__6_2013_01_59_05	4500bb2b-030a-44dd-8e15-e86dea9e78c3		3	rambler		pinstall: rambler: free	false		t	2020202020202020202020205235305633303737	6.1.7601			1	2ee17b35-8fc6-46ea-8cb2-45ed6890f176			3				false	rambler34475396	b1a3c11f-60b5-46c2-8b23-9f5a31dad741	93.157.175.101	2013-07-16 23:34:27.16	6	dwnJul__6_2013_01_59_05	c0276c16-3749-4e5a-a51d-14b8deaa3688		3			pinstall: rambler: Download	false		t	5VC2KYY8	6.1.7601				b1a3c11f-60b5-46c2-8b23-9f5a31dad741			3				false	34475397	00000000-0000-0000-0000-000000000011	5.16.132.176	2013-07-16 23:34:27.18	11	d	00000000-0000-0000-0000-000000000000		2	3					f						00000000-0000-0000-0000-000000000011			3					334475398	b69b9cc4-0695-4c8d-bbbd-21f12fcb40ec	95.72.217.207	2013-07-16 23:34:27.186	1	dwnJul__6_2013_01_59_05	9f2881f9-bafd-41e5-b792-3e27987ad274		3	rambler		pinstall: rambler: free			t	W-DXW1A5AH08625	6.1.7601			1	b69b9cc4-0695-4c8d-