ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 мая 2009 г. N 1062-РП
	О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
	ПЕРЕБАЗИРОВАНИЯ НАРКОДИСПАНСЕРА N 9 ИЗ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ:
	ЩЕТИНИНСКИЙ ПЕР., Д. 4, СТР. 2, 3 И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА
	ОСВОБОЖДЕННОМ УЧАСТКЕ ЖИЛОГО ДОМА С ПОДЗЕМНОЙ
	АВТОСТОЯНКОЙ

	В целях завершения реализации инвестиционного проекта, предусматривающего
	перебазирование наркодиспансера N 9 из 	здания	 по адресу: Щетининский пер., д. 4, стр. 3 в
	реконструируемое 	здание	 по адресу: Садовническая ул., д. 73, стр. 19, снос здания по адресу:
	Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3 и 	строительство	 на освобожденном участке жилого 	дома	 с
	подземной автостоянкой:

	1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью "АКВИЛОН-Эстейт" (далее - ООО
	"АКВИЛОН-Эстейт") сроки 	строительства	 жилого 	дома	 по адресу: Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3
	до 31 декабря 2009 г. без применения к инвестору штрафных санкций.

	2. Утвердить акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта
	от 21 октября 2008 г. N А-6454/01 на строительство в рамках применения специальных мер,
	направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды жилого дома с
	подземной автостоянкой по адресу: Щетининский пер., вл. 4, стр. 2, 3, со следующими технико-
	экономическими показателями: площадь земельного участка 0,19 га, общая площадь объекта 6100,0 кв.
	м, в том числе 4481,0 кв. м - наземная часть, 1619 кв. м - подземная часть, этажность 6-8 этажей плюс
	2 подземных уровня, количество машиномест - 29 (приложение - не приводится).

	3. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 28 февраля 2003 г. N 300-РП "О
	перебазировании наркодиспансера N 9 из здания по адресу: Щетининский пер., дом 4, строение 3 и
	строительстве на освобожденном участке жилого дома (Центральный административный округ)",
	заменив в пункте 1 слова "в 2003-2007 гг." словами "в 2003-2009 гг." и в пункте 3 слова "в 2005-2007
	гг." словами "в 2005-2009 гг.".

	4. Префектуре Центрального административного округа города Москвы в установленном
	порядке подготовить и в 4-месячный срок представить в Департамент города Москвы по
	конкурентной политике для оформления, организации подписания и учетной регистрации в Едином
	реестре контрактов и торгов города Москвы (ЕАИСТ) согласованный проект дополнительного
	соглашения к инвестиционному контракту от 23 января 2004 г. N ДЖП.04.ЦАО.00586 (реестровый N
	13-027951-5001-0012-00001-04) на условиях настоящего распоряжения, содержащий в качестве
	приложения график выполнения сторонами обязательств по инвестиционному контракту с учетом
	сроков исполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в эксплуатацию, с приложением
	установленного комплекта документов.

	5. Департаменту города Москвы по конкурентной политике после выполнения пункта 4
	настоящего распоряжения в установленные регламентные сроки оформить, организовать подписание
	сторонами и осуществить учетную регистрацию дополнительного соглашения к инвестиционному
	контракту в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы (ЕАИСТ).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	6. Москомархитектуре обеспечить корректировку границ охранной зоны N 97 в соответствии с
	заключением Комитета по культурному наследию города Москвы и проектом, утвержденным
	Россвязьохранкультурой.

	7. Возложить на ООО "АКВИЛОН-Эстейт" с его согласия обязательства представить в
	Департамент земельных ресурсов города Москвы договор краткосрочной аренды земельного участка
	от 22 июня 2006 г. N М-01-513499 для внесения изменений в соответствии с настоящим
	распоряжением.

	8. Установить, что в целях компенсации городу Москве недополученных нежилых помещений в
	размере 245,4 кв. м в объекте по адресу: Садовническая ул., д. 73, стр. 2 доля города по нежилым
	помещениям в объекте по адресу: Щетининский пер., д. 4, стр. 3 увеличивается на 245,4 кв. м за счет
	уменьшения доли инвестора ООО "АКВИЛОН-Эстейт" в данном объекте на 245,4 кв. м нежилых
	помещений.

	В случае недостаточного для компенсации размера нежилых площадей в объекте по адресу:
	Щетининский пер., д. 4, стр. 3 инвестор оплачивает недостающие площади в денежном выражении
	исходя из рыночной стоимости 1 кв. м площади в объекте.

	9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра
	Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. и первого заместителя Мэра Москвы в
	Правительстве Москвы Ресина В.И.

	И.о. Мэра Москвы

	В.И. Ресин

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.