МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 июля 2010 г. N 456-р
	О ВЫДЕЛЕНИИ ЭТАПОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ IP-354
	ЕКАТЕРИНБУРГ - ШАДРИНСК - КУРГАН НА УЧАСТКЕ КМ 336+000 - КМ
	342+000 В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	1. В целях эффективного использования средств федерального бюджета выделить в составе
	проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги IP-354 Екатеринбург -
	Шадринск - Курган на участке км 336+000 - км 342+000 в Курганской области", разработанной ООО
	Проектная фирма "Уралтрубопроводстройпроект", рассмотренной Екатеринбургским филиалом ФГУ
	"Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 22.04.2009 N 137-09/ЕГЭ-0748/01),
	утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 18.02.2010 N 120-р и
	представленной письмом ФГУ Упрдор "Южный Урал" от 8 июня 2010 г. N АЛ-1741, этапы со
	следующими технико-экономическими показателями:

	                                                    В том числе:

	                                      Всего      I этап       II этап

	                                   по объекту  км 336+000 - км
	338+500 -

	                                               км 338+500   км
	342+000

	вид 	строительства                         	 капитальный ремонт

	категория дороги                      III         III          III

	строительная длина, км                6,0         2,5          3,5

	расчетная скорость движения, км/ч     100         100          100

	число полос движения                  2           2            2

	ширина: земляного полотна, м          12,0        12,0         12,0

	        проезжей части, м             7,0         7,0          7,0

	        обочин, м                     2,5         2,5          2,5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                   асфальтобетон

	расчетные нагрузки, кН                100         100          100

	водопропускные трубы, шт./м           4/78,13     1/19,11     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3/59,02

	пересечения и примыкания, шт.         2           -            2

	продолжительность 	строительства,	 мес. 8           3,5          4,5

	общая сметная стоимость

	капитального ремонта:

	- в базисном уровне цен 2001 г.

	без учета НДС 18%, тыс. руб.          28568,31    12302,73    
	16265,58

	в том числе: СМР, тыс. руб.           27224,49    11343,54    
	15880,95

	             прочие, тыс. руб.        1343,82     959,19       384,63

	- в ценах на I квартал 2009 г.

	с учетом НДС 18%, тыс. руб.           174360,34   62869,85    
	111490,49

	в том числе: СМР, тыс. руб.           169799,52   59673,38    
	110126,14

	             прочие, тыс. руб.        4560,82     3196,47     
	1364,35.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление федеральных автомобильных
	дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства" (А.З. Луцет) по результатам торгов
	представить в Росавтодор уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.