МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2007 г. N 4-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ "АМУР" ЧИТА - ХАБАРОВСК КМ 1682 ДРП П. БУРЕЯ В
	АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Межрегиональная
	дирекция по дорожному 	строительству	 в Дальневосточном регионе России Федерального
	дорожного агентства" проект "Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км
	1682 ДРП п. Бурея в Амурской области", разработанный ОАО "Иркутскгипродорнии" и
	рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России по Хабаровскому краю (сводное экспертное
	заключение от 19.04.2006 N 192-05), со следующими технико-экономическими показателями:

	общая площадь отвода, га                                 3,855

	площадь отвода в постоянное пользование, га              1,689

	площадь временного отвода под ВЛ-10кВ, га                0,025

	площадь территории ДРП (в границах ограждения), га       1,3

	площадь застройки, кв. м

	в том числе:                                            3140

	под 	зданиями	 и 	сооружениями,	 кв. м                      2598

	под открытыми площадками, кв. м                         542

	коэффициент застройки, %                                 24

	площадь проездов и площадок, кв. м                       4900

	площадь озеленения, кв. м                                2700

	коэффициент озеленения, %                                20

	общая численность работающих, чел.                       36

	продолжительность 	строительства,	 мес.                    14

	стоимость строительства в текущих ценах

	на I квартал 2005 г. с учетом НДС 18%, тыс. рублей      101078,16

	в том числе: СМР, тыс. рублей                           76490,23

	              оборудование, тыс. рублей                  9844,01

	              прочие затраты, тыс. рублей                14743,93.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2. Федеральному государственному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному
	строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (В.К.
	Иваненко) по результатам торгов представить в Росавтодор на утверждение уточненную стоимость
	объекта.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.