МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 мая 2007 г. N 125-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" - ОТ МОСКВЫ
	ЧЕРЕЗ РЯЗАНЬ, ПЕНЗУ, САМАРУ, УФУ ДО ЧЕЛЯБИНСКА НА УЧАСТКЕ
	КМ 486 - КМ 605 В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" обоснование
	инвестиций в реконструкцию федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через
	Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 486 - км 605 в Пензенской области,
	разработанное ОАО "Проекттрансстрой" и рассмотренное Управлением Главгосэкспертизы России
	по Пензенской области (положительное заключение от 26.02.2007 N Э-04-42/2007), со следующими
	показателями:

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              119,0

	в том числе:

	реконструкция, км                                   92,5

	новое 	строительство,	 км                             26,5

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные 	сооружения,	 шт.,                 72

	в том числе: двухочковые, шт.                       4

	пересечения и примыкания, шт.,                       41

	в том числе развязки, шт.                           9

	мосты, шт./п.м                                       14/1256,22

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	путепроводы, шт.                                     26

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость 	строительства	 в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей                       19838,70211

	1 участок км 486+000 - км 510+500

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              24,5

	в том числе:

	реконструкция, км                                   24,5

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные 	сооружения,	 шт.,                 18

	двухочковые, шт.                                    0

	пересечения и примыкания, шт.,                       9

	в том числе развязки, шт.                           2

	мосты, шт./п.м                                       2/125,55

	путепроводы, шт.                                     5

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей                       3701,58612

	продолжительность строительства                      3 года 5 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   998,378

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	срок окупаемости (с момента ввода в

	эксплуатацию), лет                                   10

	2 участок км 510+500 - км 534+500

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              24,0

	в том числе:

	реконструкция, км                                   21,0

	новое строительство, км                             3,0

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.,                 18

	двухочковые, шт.                                    3

	пересечения и примыкания, шт.,                       13

	в том числе развязки, шт.                           2

	мосты, шт./п.м                                       1/281,16

	путепроводы, шт.                                     7

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей,                      4157,21232

	продолжительность строительства                      4 года 5 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   228,426

	срок окупаемости (с момента ввода в

	эксплуатацию), лет                                   13

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3 участок км 534+500 - км 555+500

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              21,0

	в том числе:

	реконструкция, км                                   18,0

	новое строительство, км                             3,0

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.,                 8

	двухочковые, шт.                                    0

	пересечения и примыкания, шт.,                       8

	в том числе развязки, шт.                           0

	мосты, шт./п.м                                       2/318,13

	путепроводы, шт.                                     3

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей                       3381,62585

	продолжительность строительства                      2 года 9 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   1117,057

	срок окупаемости (с момента ввода

	в эксплуатацию), лет                                 9

	4 участок км 555+500 - км 571+500

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              16,0

	в том числе:

	реконструкция, км                                   16,0

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.,                 8

	двухочковые, шт.                                    0

	пересечения и примыкания, шт.,                       3

	в том числе развязки, шт.                           2

	мосты, шт./п.м                                       3/117

	путепроводы, шт.                                     3

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей,                      2475,23268

	продолжительность строительства                      2 года 9 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   992,179

	срок окупаемости (с момента ввода

	в эксплуатацию), лет                                 9

	5 участок км 571+500 - км 592+000

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              20,5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	реконструкция, км                                   -

	новое строительство, км                             20,5

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.,                 15

	двухочковые, шт.                                    1

	пересечения и примыкания, шт.,                       2

	в том числе развязки, шт.                           2

	мосты, шт./п.м                                       4/317,2

	путепроводы, шт.                                     5

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I квартал 2006 г., млн. рублей,                  3784,29091

	продолжительность строительства                      2 года 9 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   667,408

	срок окупаемости (с момента ввода в

	эксплуатацию), лет                                   12

	6 участок км 592+000 - км 605+000

	категория дороги                                     Iб

	строительная длина, км,                              13

	в том числе:

	реконструкция, км                                   13

	новое строительство, км                             -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	расчетная скорость, км/ч                            120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.,                 5

	двухочковые, шт.                                    1

	пересечения и примыкания, шт.,                       6

	в том числе развязки, шт.                           1

	мосты, шт./п.м                                       2/97,18

	путепроводы, шт.                                     3

	расчетные нагрузки                                   А14; НК80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2006 г., млн. рублей,                      2338,75423

	продолжительность строительства                      1 года 9 мес.

	суммарный чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                   839,478

	срок окупаемости (с момента ввода в

	эксплуатацию), лет                                   10.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.