ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА РОССИИ
	ПРИКАЗ от 2 апреля 1999 г. N 81
	О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
	В АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
	ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	В целях эффективного осуществления государственной инвестиционной политики по созданию
	на рубеже XXI века сети автомобильных дорог Российской Федерации, отвечающих потребностям
	экономического и социального развития России, и ее интеграции в европейскую и азиатскую
	системы автомобильных дорог, руководствуясь полномочиями, предоставленными Указом
	Президента Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 403 "О дорожной реформе",
	Постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 587 "Вопросы
	Федеральной дорожной службы России" и от 13 августа 1997 г. N 1033 "Об утверждении Положения
	о Федеральной дорожной службе России", решениями коллегии ФДС России (протокол от 19.01.99 N
	1), с учетом отечественного и зарубежного опыта организации инвестиционного процесса,
	приказываю:

	1. Установить, что подготовка и принятие решений по инвестициям в автомобильные дороги из
	Федерального дорожного фонда Российской Федерации осуществляются поэтапно:

	I этап - предынвестиционный, включающий разработку, согласование и утверждение
	(одобрение):

	- прогноза социально - экономического развития дорожного хозяйства Российской Федерации
	на 20-летний период;

	- концепции, схемы, программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог
	Российской Федерации на 10-летний период с прогнозом на 20-летнюю перспективу;

	- программ совершенствования и развития сети федеральных автомобильных дорог на 10-
	летний период с прогнозом на 20-летнюю перспективу, то же территориальных автодорог и
	региональных программ, охватывающих сеть автомобильных дорог субъектов Российской Федерации
	по ассоциациям экономического взаимодействия.

	На основе этих документов подготавливается перечень приоритетных автомобильных дорог и
	участков дорог, по которым должны быть разработаны программы их совершенствования и развития,
	а также программы повышения пропускной способности дорог;

	- программ совершенствования и развития отдельных федеральных автомобильных дорог и
	участков, а также территориальных автомобильных дорог и участков, финансирование которых
	предполагается с долевым участием Федерального дорожного фонда Российской Федерации на 10-
	летний период с прогнозом на полное развитие.

	В составе указанных программ подготавливаются предложения для перечней объектов
	строительства	 на перспективный 5-летний период, включая объекты, реализация которых
	предполагается на коммерческой основе, и перечней объектов ремонта;

	- программ повышения пропускной способности отдельных федеральных автомобильных дорог

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	и участков, а также территориальных автомобильных дорог и участков, финансирование которых
	предполагается с долевым участием Федерального дорожного фонда Российской Федерации, на
	перспективный 10-летний период.

	В составе указанных программ подготавливаются предложения для перечней участков,
	подлежащих ремонту;

	- перечней объектов 	строительства	 на перспективный 5-летний период, включая объекты,
	реализация которых предполагается на коммерческой основе;

	- перечней объектов ремонта на перспективный 5-летний период.

	Разработка документов предынвестиционного этапа производится совместно с федеральными и
	региональными дирекциями и территориальными дорожными органами за счет средств статьи
	"Федеральные расходы" бюджета Федерального дорожного фонда Российской Федерации и средств
	соответствующих статей территориальных дорожных фондов.

	II этап - проектная подготовка инвестиционного процесса, включающая разработку,
	согласование и утверждение:

	по объектам строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог, а также
	территориальных автомобильных дорог, финансируемым с долевым участием Федерального
	дорожного фонда Российской Федерации:

	- перечня объектов, по которым должны разрабатываться обоснования инвестиций (ОИ), на
	очередной год, сформированного в соответствии с перечнем объектов строительства на
	перспективный 5-летний период;

	- перечня объектов, по которым должны разрабатываться инженерные проекты, на очередной
	год;

	- обоснований инвестиций (ОИ), включая вариантные проработки проложения трассы с
	подготовкой материалов для получения акта выбора трассы и разработкой бизнес - планов по
	объектам, реализация которых предполагается на коммерческой основе;

	- инженерных проектов;

	по объектам ремонта федеральных автомобильных дорог, а также территориальных
	автомобильных дорог, финансируемым с долевым участием Федерального дорожного фонда
	Российской Федерации:

	- перечня проектируемых объектов на год, разрабатываемого на основании перечня объектов
	ремонта на перспективный период и диагностики автодорог;

	- инженерных проектов.

	Разработка проектной документации осуществляется за счет средств, выделенных
	соответственно на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог.

	Федеральная дорожная служба России передает в виде исключения в установленном порядке
	федеральным, региональным дирекциям, территориальным дорожным органам полномочия по
	разработке, согласованию и утверждению (одобрению) обоснований инвестиций (ОИ) и
	инженерных проектов по объектам, указанным в утвержденном руководством Федеральной
	дорожной службы России перечне проектируемых объектов на очередной год.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	III этап - принятие решений о финансировании строительства, реконструкции и ремонта
	автомобильных дорог, включающий разработку, согласование и утверждение титульных списков:

	- вновь начинаемых строек;

	- переходящих строек;

	- объектов ремонта.

	Включение объектов в титульные списки осуществляется при наличии утвержденных
	инженерных проектов.

	2. Установить, что разработчики документации предынвестиционного этапа, обоснований
	инвестиций (ОИ) и инженерных проектов определяются на основе проведения соответствующих
	торгов.

	3. Возложить организацию работы по подготовке документации:

	- предынвестиционного этапа - на Управление разработки дорожной политики и развития сети
	автомобильных дорог (Беляков С.А.), Управление инноваций и научно - технической политики
	(Чванов В.В.), Управление привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих
	проектов (Глаголев Ю.Б.), отдел по вопросам развития и функционирования платных автомобильных
	дорог (Макаров Е.А.);

	- этапа проектной подготовки - на Управление методологии 	проектирования	 и организации
	экспертизы проектов (Алексеева Н.С.), Управление строительства и реконструкции автомобильных
	дорог и 	сооружений	 на них (Черкасов И.В.), Управление организации и планирования содержания и
	ремонта автомобильных дорог (Секачева Н.А.), Управление планирования и организации работ по
	содержанию и ремонту искусственных 	сооружений	 на автомобильных дорогах (Горобец Л.И.),
	Управление привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих проектов (Глаголев
	Ю.Б.), отдел по вопросам развития и функционирования платных автомобильных дорог (Макаров
	Е.А.);

	- этапа принятия решений о финансировании строительства, реконструкции и ремонта
	автомобильных дорог - на Управление строительства и реконструкции автомобильных дорог и
	сооружений на них (Черкасов И.В.), Управление организации и планирования содержания и ремонта
	автомобильных дорог (Секачева Н.А.), Управление планирования и организации работ по
	содержанию и ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах (Горобец Л.И.), отдел
	по вопросам развития и функционирования платных автомобильных дорог (Макаров Е.А.) по
	согласованию с Управлением по взаимодействию с субъектами Российской Федерации (Ковалев
	В.П.).

	4. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1999 г. указанный в п. 1 настоящего Приказа порядок
	подготовки и принятия решений по инвестициям в автомобильные дороги из Федерального
	дорожного фонда Российской Федерации.

	Настоящий порядок является обязательным для всех участников инвестиционного процесса
	независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, входящих в комплекс
	"Дорожное хозяйство".

	5. Управлению разработки дорожной политики и развития сети автомобильных дорог (Беляков
	С.А.), Управлению методологии 	проектирования	 и организации экспертизы проектов (Алексеева
	Н.С.), Управлению строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них
	(Черкасов И.В.), Управлению организации и планирования содержания и ремонта автомобильных

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	дорог (Секачева Н.А.), Управлению планирования и организации работ по содержанию и ремонту
	искусственных сооружений на автомобильных дорогах (Горобец Л.И.) с участием заинтересованных
	управлений и отделов ФДС России в 2-недельный срок представить по согласованию с первым
	заместителем руководителя ФДС России Серегиным Н.П. на утверждение регламент действий
	структурных подразделений ФДС России по обеспечению разработки, согласования, экспертизы и
	утверждения документации, включенной в этапы подготовки и принятия решений по инвестициям в
	автомобильные дороги из Федерального дорожного фонда Российской Федерации.

	6. Управлению инноваций и научно - технической политики (Чванов В.В.), Управлению
	разработки дорожной политики и развития сети автомобильных дорог (Беляков С.А.), Управлению
	методологии проектирования и организации экспертизы проектов (Алексеева Н.С.), Юридическому
	управлению (Еникеев Ш.С.) с участием заинтересованных управлений и отделов ФДС России в 2-
	месячный срок обеспечить в соответствии с возложенными на них согласно п. 3 настоящего Приказа
	функциями приведение нормативных документов, регламентирующих состав, порядок разработки,
	согласования, утверждения материалов, необходимых для подготовки и принятия решений по
	инвестициям в автомобильные дороги, в соответствие с законодательными и нормативными актами
	Российской Федерации и другими государственными документами, регулирующими
	прогнозирование, развитие отраслей народного хозяйства и инвестиционную деятельность с
	использованием имеющихся в дорожной отрасли научных разработок и базы данных по оценке
	состояния автомобильных дорог.

	7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
	руководителя Федеральной дорожной службы России Серегина Н.П.

	Руководитель

	В.Г.АРТЮХОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.