Утверждаю

	Заместитель председателя

	Госкомсвязи России

	Н.Ф.ПОЖИТКОВ

	12 ноября 1998 года

	Согласовано

	Начальник управления

	электросвязи

	Госкомсвязи России

	А.Ю.РОКОТЯН

	11 ноября 1998 года

	Директор филиала "СОМЭС"

	ОАО "Ростелеком"

	В.Г.БАКЛАНОВ

	19 мая 1998 года

	Генеральный директор

	ОАО "ССКТБ-ТОМАСС"

	С.П.ШАШЛОВ

	1998 год

	ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОЛП В ПВП КАБЕЛЕВОДАХ И
	СОСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СДАВАЕМЫЕ
	ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	Настоящая "Временная инструкция по приемке в эксплуатацию линейных 	сооружений	 ВОЛП в

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ПВП кабелеводах и составлению исполнительной документации на сдаваемые линейные
	сооружения"	 разработана ОАО "ССКТБ-ТОМАСС" на основе "Временного положения по приемке
	законченных 	строительством	 объектов", введенного в действие письмом Госстроя России от
	09.07.93 N БЕ-19-11/13 и "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной
	связи и проводного вещания", утвержденного Министерством связи СССР 22.01.90 и введенного в
	действие МС СССР Приказом N 40 от 24.01.90, а также руководств по составлению исполнительной
	документации, предъявляемой приемочным комиссиям.

	"Временная инструкция..." определяет порядок приемки в эксплуатацию законченных
	строительством	 линейных сооружений волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП),
	проложенных в ПВП кабелеводах из трубок "SILICORE", а также объем и состав исполнительной
	документации, представляемой строительно-монтажными организациями комиссиям по приемке.

	Выполнение требований "Инструкции..." является обязательным для всех организаций,
	осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приемку в эксплуатацию
	линейных сооружений ВОЛП в ПВП кабелеводах и сдаваемых в эксплуатацию заказчику.

	Предложения и замечания по "Инструкции..." следует направлять в ОАО "ССКТБ-ТОМАСС" по
	адресу: 107066, г. Москва, Б-66, Нижняя Красносельская ул., д. 13.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) линейных
	сооружений волоконно-оптических линий связи (ВОЛП) в ПВП кабелеводах должна осуществляться
	в соответствии с требованиями "Временного положения по приемке законченных строительством
	объектов", СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
	Основные положения", а также с требованиями настоящей инструкции. Приемка линейных
	сооружений после окончания капитального ремонта производится в соответствии с требованиями
	настоящей инструкции.

	1.2. Законченные строительством в соответствии с проектом и подготовленные к эксплуатации
	линейные сооружения подземных в ПВП кабелеводах волоконно-оптических линий передачи
	(ВОЛП), входящих во Взаимоувязанную сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ), заказчик
	должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям.

	1.3. Государственные приемочные комиссии по приемке объектов связи назначаются:

	а) Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации
	(Госкомсвязи России) или органом, им уполномоченным, по объектам, строительство которых
	производилось за счет федерального бюджета или льготного кредитования;

	б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: краев, автономных
	республик, автономных округов, городов Москвы или Санкт-Петербурга или органами, ими
	уполномоченными, по объектам, строительство которых производилось за счет средств местных
	бюджетов;

	в) инвестором по объектам, строительство которых финансировалось за счет собственных
	средств организаций или физических лиц.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1.4. Линейные сооружения связи принимаются в целом, в т.ч. "под ключ" или, по мере
	завершения, отдельными очередями, пусковыми комплексами в объеме, предусмотренном договором
	подряда (контрактом) на строительство и в соответствии с другими условиями договора.

	1.5. Капитально отремонтированные линейные сооружения, после выполнения всех видов
	работ в соответствии с технической документацией, предъявляются исполнителем и принимаются в
	эксплуатацию приемочной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия связи,
	осуществляющего эксплуатацию данных сооружений.

	1.6. Дополнительные работы, не предусмотренные проектом, не могут задержать приемку
	законченных строительством сооружений связи.

	1.7. До предъявления к приемке в эксплуатацию Госкомиссией линейные сооружения должны
	быть проверены и приняты рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиком. Рабочие комиссии
	должны проверить:

	- соответствие объектов и смонтированного оборудования проекту (проектам) на строительство;

	- соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и
	правил;

	- результаты испытаний и комплексного опробования оборудования;

	- подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая
	выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями
	техники безопасности и производственной санитарии, защиты природной среды.

	По результатам проведенных проверок рабочими комиссиями принимается решение о
	готовности и приемке сооружений и предъявлении их к приемке в эксплуатацию государственным
	приемочным комиссиям.

	1.8. Приемку в эксплуатацию законченных строительством несложных объектов с
	незначительным объемом проверок и испытаний допускается проводить приемочными комиссиями
	без промежуточного освидетельствования рабочими комиссиями при наличии у заказчика
	положительных замечаний от Госсвязьнадзора и других госнадзорных органов о соответствии
	предъявляемого объекта требованиям, перечисленным в п. 1.7 настоящего документа.

	1.9. Предъявление линейных сооружений к освидетельствованию и приемке рабочим
	комиссиям производится генподрядчиком, а к приемке в эксплуатацию государственным
	приемочным комиссиям - заказчиком.

	1.10. После подписания акта рабочей комиссией заказчики строительства сооружений связи
	(назначенные эксплуатационные организации) несут ответственность за сохранность всех
	сооружений, включенных в акты рабочих комиссий.

	1.11. При приемке в эксплуатацию линейных сооружений следует руководствоваться правилами
	раздела 2 СНиП 3.01.04-87 об ответственности сторон.

	1.12. Использование сооружений (или их составных элементов), не принятых в эксплуатацию,
	не допускается.

	1.13. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной
	приемочной комиссией.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1.14. Утвержденный акт приемки в эксплуатацию является основанием регистрации
	построенного объекта и выдачи разрешения на его постоянную эксплуатацию.

	2. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

	2.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.) организации-
	заказчика не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения
	генподрядчика о готовности линейных сооружений к приемке.

	2.2. В состав рабочих комиссий включаются представители:

	заказчика - в том числе председатель комиссии; генерального подрядчика; субподрядных,
	эксплуатационной и проектной организаций; органов Госсвязьнадзора, органов государственного
	санитарного, пожарного и экологического надзоров; технической инспекции труда соответствующего
	состава профсоюзов; профсоюзной организации заказчика и эксплуатационной организации.

	2.3. В обязанности рабочих комиссий входит:

	а) проверка исполнительной документации на комплектность, полноту содержания и качество
	исполнения;

	б) проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной
	документации и согласованным отступлениям от проекта;

	в) освидетельствование выполненных работ, проверка их качества, проведение выборочных
	испытаний, проверок, измерение оптических и электрических характеристик кабелей в соответствии
	с помещенной в настоящей "Инструкции..." технической программой приемки данного вида
	сооружения (п. 2.9);

	г) проверка готовности линейных сооружений к эксплуатации;

	д) приемка линейных сооружений от генподрядчика с составлением акта о готовности их для
	предъявления Государственной приемочной комиссии.

	2.4. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком по
	согласованию с генеральным подрядчиком. При этом сроки работы комиссии по сооружениям
	должны быть в следующих ориентировочных пределах:

	а) при приемке магистральных и внутризоновых ВОЛП - 18 км трассы в день;

	б) при приемке ВОЛП ГТС - до 10 дней;

	в) при приемке ВОЛП сельской связи - 20 км трассы в день.

	2.5. Рабочими комиссиями принимаются для предъявления Государственной приемочной
	комиссии следующие законченные сооружения по мере их готовности:

	а) участки ОУП-ОУП магистральных и внутризоновых кабельных линий передачи, участки
	ОУП-НРП (НРП-НРП), соединительные кабельные линии, законченные строительством кабельные
	переходы через водные преграды.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	В случае обслуживания участка ОУП-ОУП несколькими эксплуатационными предприятиями
	или при выполнении на нем работ несколькими субподрядными организациями допускается приемка
	законченных строительством участков ОУП-НРП или НРП-НРП группами в пределах зон
	обслуживания (строительства);

	б) кабельные линии межстанционной и межузловой связи, магистральные кабельные линии вне
	зависимости от готовности питаемых шкафных районов и шкафные районы вне зависимости от
	питающих магистралей;

	в) кабельные линии межстанционной сельской связи, линии абонентских телефонных сетей.

	2.6. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям в одном экземпляре следующую
	документацию:

	а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ с
	указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников,
	непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий
	на осуществление деятельности по оказанию услуг по связи на территории Российской Федерации;

	б) технические сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
	качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве строительно-
	монтажных работ и имеющих сертификаты соответствия техническим требованиям для применения
	на ВСС Российской Федерации;

	в) исполнительную техническую документацию, включающую рабочие чертежи в объеме,
	полученном от заказчика, и откорректированные строительно-монтажной организацией, в
	соответствии с фактически произведенными работами, и документы по монтажным работам,
	оптическим и электрическим измерениям, испытаниям и проверкам.

	2.7. Акты рабочей комиссии о готовности законченных строительством линейных сооружений
	для предъявления Государственной приемочной комиссии составляются по форме, приведенной в
	Приложении 1, в шести экземплярах (три - заказчику, два - генподрядчику, один - эксплуатационной
	организации).

	2.8. Документация, перечисленная в п. 2.6, и акты, указанные в п. 2.7, после окончания работы
	рабочей комиссии должны быть переданы заказчику.

	2.9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИЕМКИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ,
	РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
	ЛИНИЙ ВОЛС В ПВП КАБЕЛЕВОДАХ

	А. Состав и объем проверок

	----T--------------------T----------T------------------------T-------
	-----¬

	¦	 N 	¦	    Наименование    	¦	Количество	¦	  Содержание и методы   	¦
	Примечания 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	п/п	¦	работ и мероприятий,	¦	 проверок 	¦	        проверок       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	     проводимых     	¦	или объем 	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	приемочной комиссией	¦	испытаний 	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	 1 	¦	         2          	¦	    3     	¦	           4            	¦	    
	5      	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	1  	¦	Ознакомление с      	¦	100%      	¦	Производится ознакомле-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	проектной           	¦	          	¦	ние с рабочими
	чертежами	¦	            	¦

	¦	   	¦	документацией       	¦	          	¦	и сметами. Делаются    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	необходимые выписки для
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	проверки работ в натуре
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	2  	¦	Проверка            	¦	100%      	¦	Проверяется представлен-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	исполнительной      	¦	          	¦	ная подрядчиком исполни-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	документации        	¦	          	¦	тельная документация на
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	соответствие ее требова-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ниям настоящей "Инструк-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ции...", полнота содер-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	жания и качество испол-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	нения.                 
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	Анализируются протоколы
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	электрических и        
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	оптических измерений   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и испытаний, содержащие-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ся в исполнительной    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	документации, на
	предмет	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	соответствия их данным 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	нормам. Особое внимание
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	следует уделить рассмот-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	рению актов на скрытые 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	работы, проверяя
	полноту	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	их содержания, наличие 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	подписей представителей
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	заказчика (эксплуата-  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ции), охват актами
	всего	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	объема скрытых работ   
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3  	¦	Осмотр и проверка   	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабельной трассы    	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	3.1	¦	Внешний осмотр      	¦	Не менее  	¦	Проверяется наличие    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	30% трассы	¦	наружных
	опознавательных	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	(сложные  	¦	знаков: замерных       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	участки   	¦	столбиков и КИП, знаков
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	проверять 	¦	в местах пересечения   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	пешком)   	¦	кабелевода с подземными
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	коммуникациями;
	качество	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	надписей на замерных   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	столбиках и знаках,    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	качество засыпки
	траншей	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и котлованов; расчистка
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и планировка трассы,   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	очистка просек         
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.2	¦	Проверка            	¦	5 - 10    	¦	Проверяется наличие     	¦	При
	наличии 	¦

	¦	   	¦	правильности        	¦	точек     	¦	внешних и скрытых в    
	¦	неточных    	¦

	¦	   	¦	привязок            	¦	на длине  	¦	грунтах опознавательных
	¦	привязок    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	регенера- 	¦	устройств подземных    
	¦	производится	¦

	¦	   	¦	                    	¦	ционного  	¦	конструктивных
	элементов	¦	проверка    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	участка   	¦	кабелеводной трассы    
	¦	удвоенного  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	(кабелеводов, трубных  
	¦	количества  	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	муфт, контейнеров      
	¦	точек       	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	оптических муфт,       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	подземных переходов) и 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	правильности их
	привязки	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	на местности           
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.3	¦	Проверка глубины    	¦	100%      	¦	Проверяется по актам   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	прокладки           	¦	          	¦	на скрытые работы.     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелеводов         	¦	          	¦	По решению комиссии    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	могут быть произведены 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	2 - 5 раскопок на
	трассе	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.4	¦	Проверка глубины    	¦	1 - 2     	¦	Проверяется четкость   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	залегания           	¦	контейнера	¦	отыскания места        
	¦	            	¦

	¦	   	¦	контейнеров         	¦	оптических	¦	залегания контейнера,  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	оптических муфт,    	¦	муфт      	¦	качество его монтажа,  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	выкладки кабеля и   	¦	          	¦	укладки оптических
	муфт,	¦	            	¦

	¦	   	¦	смонтированных муфт 	¦	          	¦	запасов кабелей и про- 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	в них без вскрытия  	¦	          	¦	водников КИП, ввод тру-
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	муфт                	¦	          	¦	бок кабелевода в контей-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	нер и уплотнение кабеля
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	на входе в кабелеводы. 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	Проверка производится  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	путем вскрытия
	котлована	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и контейнера           
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.5	¦	Проверка пересечений	¦	100%      	¦	Проверяется по актам   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелеводов         	¦	          	¦	на скрытые работы.     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	с подземными        	¦	          	¦	По решению комиссии    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	коммуникациями,     	¦	          	¦	могут быть сделаны     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	а также с           	¦	          	¦	2 - 3 раскопки в местах
	¦	            	¦

	¦	   	¦	автомобильными      	¦	          	¦	пересечений            
	¦	            	¦

	¦	   	¦	и железными дорогами	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.6	¦	Осмотр и проверка   	¦	Все       	¦	Осматриваются места    
	¦	На          	¦

	¦	   	¦	кабельных переходов 	¦	переходы  	¦	расположения береговых 
	¦	судоходных  	¦

	¦	   	¦	через водные        	¦	          	¦	муфт, места спуска     
	¦	реках       	¦

	¦	   	¦	преграды            	¦	          	¦	кабелеводов к воде,    
	¦	проверка    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	а также оградительные  
	¦	производится	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	створные знаки речных  
	¦	совместно с 	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	переходов с проверкой  
	¦	техническими	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	действия специальных   
	¦	службами    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	устройств, если они    
	¦	управления  	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	предусмотрены рабочими 
	¦	речного     	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	чертежами              
	¦	пароходства 	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.7	¦	Проверка качества   	¦	До 30%    	¦	Проверяется: выкладка  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	прокладки           	¦	кабельных 	¦	кабелеводов в
	транзитных	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелеводов и       	¦	колодцев  	¦	колодцах; выкладка запа-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелей в кабельной 	¦	          	¦	сов кабелей и
	оптических	¦	            	¦

	¦	   	¦	канализации         	¦	          	¦	муфт в колодцах, где   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	произведено сращивание 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	строительных длин кабе-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	лей; заделка отверстий 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	каналов кабельной      
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	канализации и мест
	входа	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабелей  в кабелеводы  
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	3.8	¦	Проверка ввода      	¦	100%      	¦	Проверяется: соответст-
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	кабелеводов в ОУП,  	¦	вводов    	¦	вие выполненных вводов 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	МТС                 	¦	          	¦	рабочим чертежам, герме-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	тизация ввода кабеле-  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	водов и герметизация   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабелей на входе       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	в кабелеводы, выкладка 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабелей и муфт на
	опорах	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	4  	¦	Осмотр и проверка   	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	НРП                 	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	4.1	¦	Качество            	¦	100%      	¦	Проверяется: качество  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	строительных работ  	¦	          	¦	установки НРП, качество
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	стен, полов, дверей,   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	наземной части
	отваловки	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и одерновки            
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	4.2	¦	Качество ввода      	¦	100%      	¦	Проверяется: качество  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелевода в НРП и  	¦	          	¦	монтажа и герметизация 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	монтаж оконечных    	¦	          	¦	ввода кабелевода, герме-
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	кабельных устройств 	¦	          	¦	тизация входа кабеля в 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабелевод, выкладка    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабеля и включение кабе-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ля в оконечные
	кабельные	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	устройства регенерацион-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ного оборудования      
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	4.3	¦	Монтаж цепей        	¦	100%      	¦	Проверка качества      
	¦	            	¦

	¦	   	¦	дистанционного      	¦	          	¦	исполнения внешним     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	питания,            	¦	          	¦	осмотром               
	¦	            	¦

	¦	   	¦	сигнализации,       	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	проводов служебной  	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	связи               	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	4.4	¦	Проверка люков,     	¦	          	¦	Проверяется: безотказ- 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	лестниц, наличие    	¦	          	¦	ность действия
	устройств	¦	            	¦

	¦	   	¦	защитных средств    	¦	          	¦	запирания и
	герметизации	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	люка, крепление
	лестниц,	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	комплектность          
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	электрозащитных средств
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	и действительность
	срока	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	испытания их           
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	5  	¦	Проверка резервных  	¦	100%      	¦	Проверяется качество   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабелеводов         	¦	          	¦	вводов в ОУП, АТС, МТС.
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	Качество линейного     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	монтажа проверяется    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	испытанием на герметич-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ность полностью смонти-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	рованной нитки кабелево-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	да. Проверка на прохо- 
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	димость производится по
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	документам
	операционного	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	контроля. При
	постановке	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	резервных кабелеводов  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	под избыточное давление
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	проверяется соответству-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	ющая система
	обеспечения	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	давлением              
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	6  	¦	Проверка защиты     	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	линейных сооружений 	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	от коррозии         	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	6.1	¦	Электрические       	¦	100%      	¦	Проверка производится  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	дренажи и катодные  	¦	          	¦	по документации на     
	¦	            	¦

	¦	   	¦	станции:            	¦	          	¦	монтаж и протоколам    
	¦	            	¦

	¦	   	¦	- монтаж и          	¦	          	¦	электроизмерений       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	установка;          	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	- контроль          	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	электрических       	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	параметров          	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	6.2	¦	Протекторные        	¦	Выборочно 	¦	Проверяются протоколы  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	установки           	¦	          	¦	электрических измерений
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	эффективности          
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	протекторной защиты.   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	Проверка защитных   	¦	То же     	¦	Проверяются акты на     	¦	По
	решению  	¦

	¦	   	¦	и линейно-защитных  	¦	          	¦	скрытые работы,        
	¦	комиссии    	¦

	¦	   	¦	заземлений на НРП   	¦	          	¦	протоколы электрических
	¦	производятся	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	измерений               	¦	1 -
	2       	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	                       
	¦	раскопки    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	                       
	¦	участков    	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	                       
	¦	заземления  	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	6.3	¦	Проверка            	¦	То же     	¦	Проверяются протоколы  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	эффективности       	¦	          	¦	электроизмерений       
	¦	            	¦

	¦	   	¦	электрохимической   	¦	          	¦	разности потенциалов   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	защиты              	¦	          	¦	"кабель-земля"         
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	6.4	¦	Проверка контрольно-	¦	Выборочно 	¦	Внешний осмотр,
	проверка	¦	            	¦

	¦	   	¦	измерительных       	¦	3 - 10%   	¦	монтажа КИП            
	¦	            	¦

	¦	   	¦	пунктов             	¦	          	¦	                       
	¦	            	¦

	+---+--------------------+----------+------------------------+-------
	-----+

	¦	7  	¦	Проверка защиты     	¦	          	¦	Проверка и анализ актов
	¦	            	¦

	¦	   	¦	кабельных линий     	¦	          	¦	на скрытые работы, в   
	¦	            	¦

	¦	   	¦	от ударов молнии    	¦	          	¦	необходимых случаях про-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	верка на трассе располо-
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	жения  по отношению к  
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кабелю и глубины про-  
	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	                    	¦	          	¦	кладки защитных
	проводов	¦	            	¦

	L---+--------------------+----------+------------------------+-------
	------

	Б. Состав и объем приемо-сдаточных оптических и электрических измерений

	Для приемочной комиссии основными документами, характеризующими состояние оптических
	и электрических параметров линейно-кабельных сооружений ВОЛП, являются подписанные
	представителями заказчика (эксплуатационной организации) протоколы оптических и электрических
	измерений, находящиеся в составе представленной подрядчиком исполнительной документации.

	По решению приемочной комиссии измерения оптических параметров могут проводиться в
	объеме до 100% на всех элементарных кабельных участках (ЭКУ) сдаваемой ВОЛП по следующим
	показателям:

	абсолютное значение оптических потерь (величина затухания в дБ) на ЭКУ;

	относительное значение оптических потерь (километрическое затухание в дБ/км) на ЭКУ;

	распределение потерь в неразъемных соединениях (сростках волокон) на ЭКУ.

	При наличии в конструкции кабеля токоведущих проводников и металлических армирующих
	элементов по решению приемочной комиссии могут проводиться в объеме до 100% также следующие
	электрические измерения:

	а) электрического сопротивления изоляции каждого токоведущего проводника относительно
	остальных проводников и металлических элементов, соединенных вместе;

	б) электрического сопротивления шлейфа жил двухпроводной цепи ДП или СС, приведенного к
	длине 1 км;

	в) асимметрии (разности) электрических сопротивлений проводников цепи ДП или СС,
	приведенной к длине 1 км;

	г) электрического сопротивления наружного диэлектрического шланга между каждым
	металлическим элементом и землей;

	д) испытание напряжением изоляции между каждым проводником и остальными
	проводниками и металлическими элементами, соединенными вместе.

	Измеренные значения оптических и электрических параметров должны соответствовать
	техническим нормам, установленным проектным заданием на кабельную линию, и "Нормам приемо-
	сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных
	волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования", введенным в действие
	Приказом N 97 Госкомсвязи России от 17.12.97.

	3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ПОРЯДОК РАБОТЫ

	3.1. Государственные приемочные комиссии назначаются не позднее чем за три месяца до
	установленного срока ввода объекта в эксплуатацию. При этом должны быть определены даты
	начала и окончания работы комиссий с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

	3.2. Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию
	линейных сооружений связи назначаются руководящие работники госкомитетов, ведомств и органов,
	назначивших эти комиссии, или руководящие работники непосредственно им подчиненных
	предприятий, учреждений и организаций.

	3.3. В состав государственных приемочных комиссий включаются представители: генерального
	подрядчика и субподрядчика, эксплуатационной и проектной организаций, органов Госсвязьнадзора,
	органов санитарного, пожарного и экологического надзоров, технической инспекции труда совета
	профсоюзов, профсоюзного органа эксплуатационной организации, финансирующего банка и других
	заинтересованных организаций.

	3.4. Заказчик представляет Государственной приемочной комиссии всю документацию,
	полученную рабочими комиссиями от генерального подрядчика, а также:

	а) акты рабочих комиссий о готовности законченных строительством сооружений для
	предъявления Государственной приемочной комиссии или заключения госнадзорных органов;

	б) утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-
	экономических показателях принимаемых в эксплуатацию сооружений;

	в) справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями;

	г) справку заказчика или назначенной эксплуатационной организации о подготовленности
	объекта связи, его очереди или пускового комплекса к нормальной эксплуатации и выполнении
	функций, предусмотренных проектом;

	д) перечень проектных организаций, участвовавших в 	проектировании	 объекта;

	е) документы об отводе земельных участков, геодезической разбивке и геологии, согласованные
	с экологическими службами, генеральные планы участков с нанесенными изменениями против
	проекта;

	ж) справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и генподрядчиком
	(кроме "прочих затрат" сводной сметы, уточняемых заказчиком после оплаты объекта по акту
	Государственной комиссии, и последних затрат, компенсируемых подрядчику заказчиком);

	з) справку о соответствии вводимых в действие мощностей мощностям, предусмотренным
	проектом;

	и) другую имеющуюся у заказчика документацию по объекту.

	3.5. В обязанности государственных приемочных комиссий входят:

	а) проверка готовности объекта к приемке в эксплуатацию (в том числе проверка устранения
	недоделок, выявленных рабочей комиссией);

	б) проверка наличия и содержания актов рабочих комиссий на приемку 	зданий	 и сооружений,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	оборудования, линий и каналов связи;

	в) проверка представленных заказчиком справок о вводимых мощностях и фактической
	стоимости строительства в сопоставлении с утвержденной проектно-сметной документацией;

	г) проверка качества выполненных работ и законченного строительства объекта в целом;

	д) составление акта приемки в эксплуатацию объекта связи по форме, указанной в Приложении
	2.

	3.6. Акт о приемке в эксплуатацию линейных сооружений и докладная записка к нему
	составляется в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения следует представить в
	орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два - передать заказчику и один -
	генеральному подрядчику.

	3.7. Для проверки качества принимаемых сооружений Государственная приемочная комиссия в
	необходимых случаях назначает дополнительные испытания и измерения оборудования, линий и
	каналов связи в выборочном порядке.

	3.8. При необходимости Государственная приемочная комиссия организует в своем составе
	специализированные подкомиссии для приемки отдельных сооружений и работ.

	3.9. Приемка объекта связи Государственной приемочной комиссией должна быть закончена в
	срок, установленный органом, назначившим комиссию. В случае необходимости только этим
	органом может быть продлен установленный срок приемки.

	3.10. Акты приемки в эксплуатацию объектов связи рассматриваются и утверждаются органом,
	назначившим Государственную приемочную комиссию, в месячный срок после его подписания.

	3.11. Государственная приемочная комиссия при выявлении непригодности объекта к
	эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, а
	копии направляет заказчику и генеральному подрядчику.

	3.12 Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента
	утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

	4. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО
	РЕМОНТА

	4.1. Приемка в эксплуатацию капитально отремонтированных линейных сооружений
	производится приемочной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия связи,
	которое обслуживает данные сооружения. Комиссия назначается ежегодно в начале ремонтного
	сезона.

	4.2. В состав приемочной комиссии включаются: представитель руководства эксплуатационной
	организации (председатель), представители линейных служб эксплуатационной организации,
	представитель Госсвязьнадзора и представитель организации (подразделения), выполнявшей работы.
	Приемка производится с участием работника, обслуживающего принимаемые сооружения.

	4.3. До предъявления к приемке капитально отремонтированных сооружений главный инженер

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	эксплуатационного предприятия обязан организовать их предварительное освидетельствование с
	целью проверки готовности этих сооружений к приемке с оформлением справки готовности
	капитально отремонтированных сооружений (см. Приложение 3).

	4.4. Приемка капитально отремонтированных линейных сооружений должна быть начата
	приемочной комиссией не позднее чем через пять дней после предъявления их к приемке.

	4.5. На капитально отремонтированные линейные сооружения организация, выполнявшая
	работы, представляет исполнительную документацию.

	4.6. В ходе приемки комиссия осматривает 100% отремонтированных сооружений,
	руководствуясь технической программой на данный вид сооружения. Все характеристики
	сооружений должны соответствовать технической документации на выполнение капитального
	ремонта, действующим нормам, ГОСТ, ТУ.

	4.7. Акт приемки работ по капитальному ремонту линейных сооружений оформляется в трех
	экземплярах по форме, указанной в Приложении 4. Акт утверждается главным инженером
	предприятия, назначившего приемочную комиссию.

	5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	5.1. Исполнительная документация составляется

	подрядной организацией и представляется заказчику для проверки рабочими комиссиями
	готовности к сдаче в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) линейных
	сооружений кабельных линий.

	5.2. Исполнительная документация должна состоять из рабочих чертежей в объеме, полученном
	от заказчика на строительство объекта, скорректированных строительно-монтажной организацией в
	соответствии с фактически приведенными работами, а также из документов на монтажные работы,
	измерений оптических и электрических характеристик, испытаний и проверок.

	5.3. Корректировка рабочих чертежей, а также составление картограммы глубины заложения
	кабелевода должны проводиться в соответствии с требованиями "Руководства по строительству
	линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий", Москва, "Радио и связь",
	1986 г.

	5.4. При выполнении рабочих чертежей следует использовать принятые условные обозначения
	и масштабы, а также нижеследующие дополнительные обозначения для новых элементов,
	применяемых на ВОЛП в ПВП кабелеводе:

	КОМ - контейнер оптических муфт - символ: (рисунок не приводится)

	Мт - муфта трубная - символ: (рисунок не приводится)

	С - сигнализатор (маркер) в грунте - символ: (рисунок не приводится).

	5.5. Исполнительная документация предъявляется в одном экземпляре, в объеме,
	предусмотренном настоящей "Инструкцией...", и комплектуется заполненными формами, входящими

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в состав соответствующих паспортов или монтажной и рабочей документации.

	5.6. Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером организации,
	выполнившей строительно-монтажные работы, а также лицами, ответственными за достоверность
	приведенных в документах данных (соответствие откорректированных чертежей выполненным
	работам в натуре, результаты измерений и испытаний), - старшим прорабом, прорабом, измерителем
	и др.

	5.7. Исполнительная документация комплектуется в принятом порядке, изложенном в
	"Руководстве по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных
	линий" Москва, "Радио и связь", 1986 г., а также с учетом следующих указаний:

	1) При представлении документации на групповую трассу документы комплектуются на каждую
	кабельную линию и каждый резервный кабелевод раздельно.

	2) В головную папку с рабочими чертежами следует вначале включить (подшить) титульные
	листы:

	"Исполнительная документация" (форма 1);

	"Паспорт групповой трассы из ПВП кабелеводов" (форма 2);

	"Паспорт кабельной линии связи в ПВП кабелеводе" (форма 3);

	"Состав документов" (форма 4).

	3) Оптический паспорт линейных сооружений ВОЛП комплектуется из протоколов измерений
	оптических параметров ЭКУ (форма 6) по регенерационным участкам ОУП-НРП, НРП-НРП. Перед
	каждым протоколом измерений помещают оптический паспорт на данный регенерационный участок.
	Для ВОЛП, состоящего из одного элементарного кабельного участка ЭКУ (ОУП-ОУП), допускается
	выпускать оптический паспорт на одном листе с совмещением титула и данных измерения
	оптических волокон.

	5.8. Исполнительная техническая документация по линейным сооружениям ВОЛП в ПВП
	кабелеводах должна представляться рабочим комиссиям в следующем составе:

	паспорт групповой трассы из ПВП кабелеводов;

	паспорт трассы кабельной линии связи в ПВП кабелеводе;

	оптический паспорт кабельной линии связи;

	электрический паспорт оптической кабельной линии связи (кабели с жилами ДП и (или)
	жилами СС и (или) металлическими элементами);

	монтажная документация;

	рабочая документация.

	Примечание: Паспорт групповой трассы из ПВП кабелеводов (форма 2) представляется на
	трассу, включающую несколько кабелеводов или кабелеводы и кабели связи, прокладываемые в
	одной траншее.

	5.9. В состав паспорта трассы кабельной линии связи в ПВП кабелеводе должны входить:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1) титульные листы (формы 3 и 4);

	2) скорректированная рабочая документация проекта (чертежи трассы прокладки кабелевода,
	переходов через реки (водоемы), шоссейные и железные дороги, вводных устройств, защиты кабеля и
	корпусов НРП от коррозии, ударов молнии и внешних электромагнитных влияний, заземляющих
	устройств, строительства НРП) и другая в объеме, полученном от заказчика, с нанесенными на
	чертежах трубными разъемными муфтами, контейнерами оптических муфт, замерными столбиками,
	КИП и т.д.;

	3) картограмма глубины заложения кабелевода в грунте;

	4) схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на регенерационном участке.

	Примеры: исполнения планшета рабочих чертежей, исполнения чертежа перехода трассы через
	водную преграду, исполнения картограммы глубины заложения кабелевода в грунте и схемы
	размещения строительных длин и смонтированных муфт на регенерационном участке показаны на
	рис. 1, 2, 3 и 4 соответственно (рисунки не приводятся).

	5.10. В состав оптического паспорта кабельной линии связи должны входить:

	1) титульные листы (формы 5 и 4);

	2) протокол измерений оптических параметров ЭКУ (форма 6).

	5.11. В состав электрического паспорта оптической кабельной линии связи должны входить:

	1) титульные листы (формы 7 и 4);

	2) протокол электрических измерений постоянным током оптического кабеля с токоведущими
	проводниками и (или) металлическими элементами конструкции (форма 8);

	3) протокол измерения потенциалов на оболочках кабеля, если проектом предусмотрены работы
	по защите от коррозии (форма 9).

	5.12. В состав монтажной документации должны входить:

	1) титульные листы (формы 10 и 4);

	2) протокол проверок качества прокладки и монтажа кабелеводов для оптического кабеля и акты
	сдачи в монтаж (форма 11);

	3) эскиз поперечного разреза кабеля с основными данными его конструктивных элементов
	(только для опытных конструкций кабеля);

	4) паспорт на смонтированную соединительную оптическую муфту N (форма 12/1);

	5) паспорт на смонтированную разветвительную оптическую муфту N (форма 12/2);

	6) протокол оптических измерений смонтированных участков ВОЛП (форма 13);

	7) протокол проверки оптического кабеля с жилами ДП и (или) СС и (или) металлическими
	элементами (форма 14);

	8) заводские паспорта на оборудование для содержания под избыточным давлением (при
	постановке резервных кабелеводов под давление), корпуса НРП, катодные и дренажные установки и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	др.;

	9) протоколы проверки оборудования, указанного в п. 6;

	10) сведения о дренажной установке (форма 15);

	11) сведения о протекторной защите (форма 16);

	12) сведения о катодной установке (форма 17).

	Примечание. Формы 15, 16, 17 представляют в том случае, если эти работы предусмотрены
	проектом и выполнены к началу приемки магистрали рабочей комиссией.

	5.13. В состав рабочей документации должны входить:

	1) титульные листы (формы 18 и 4);

	2) паспорт (сертификат) на строительные длины трубок кабелей и заводские протоколы
	оптических измерений кабеля;

	3) журнал учета строительных длин трубок, поступивших на склад (форма 19);

	4) журнал учета строительных длин кабелей, поступивших на склад (форма 20);

	5) протокол входного контроля ПВП трубок (форма 21);

	6) протокол входного контроля оптических кабелей (форма 22);

	7) укладочная ведомость на строительные длины трубок (форма 23);

	8) укладочная ведомость на строительные длины кабелей (форма 24);

	9) ведомость замеров глубины заложения кабелеводов (форма 25);

	10) акт на скрытые работы по прокладке кабелеводов в грунте и по мостам (форма 26);

	11) акт на скрытые работы по прокладке кабелеводов в городской кабельной канализации
	(форма 27);

	12) акт на скрытые работы по вводу оптических кабелей в ПВП кабелеводы (форма 28);

	13) акт на скрытые работы по закладке контейнеров оптических муфт (форма 29);

	14) акт на скрытые работы по строительству НРП (форма 30);

	15) акт на скрытые работы по устройству контуров заземления (форма 31);

	16) акт на скрытые работы кабельных переходов через автомобильные и железные дороги на
	кабельной магистрали (форма 32);

	17) акт на скрытые работы переходов через водную преграду (форма 33);

	18) акт на скрытые работы по прокладке тросов грозозащиты (форма 34);

	19) ведомость определения физической длины кабелеводов (форма 35);

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	20) ведомость определения физической длины смонтированного кабеля (форма 36).

	Форма 1

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ _________________________________

	СМУ ______________________________________________

	                        ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	                       НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

	                         ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛП

	                     _________________________________

	                     наименование объекта (магистрали)

	                     _________________________________

	ОУП ______________________________________
	ОУП_____________________________

	Период строительства: начало ____________________ окончание
	_______________

	Главный инженер СМУ
	_______________________________________________________

	                                      (фамилия и.о.)

	                          "___" ______________ 199_ г.

	Начальник участка
	_________________________________________________________

	                                      (фамилия и.о.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 2

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ______________

	СМУ ___________________________

	                         ПАСПОРТ ГРУППОВОЙ ТРАССЫ

	                            из ПВП кабелеводов

	Магистраль ____________________

	ОУП ___________________________         ОУП ________________________

	Номер 	Пункт 	Общая	Трубки   	Укладочная длина трубок,	Введенный 	Дата 
	кабе- 	следо-	длина	км           	кабель  	окон-
	левода/	вания 	трассы,	Типо- 	Цвет  	В  	В ка-	Под	По 	Марка	Длина,	чания
	Номер 	при   	км  	размер,	трубки	грунте	бель-	водой	мостам	км 	строи-
	ВОЛП  	ответв-	мм/мм 	и поло-	ном  	тель-
	лении 	сок   	канале	ства 

	Начальник (гл. инженер) СМУ
	_______________________________________________

	                                      (подпись) (фамилия и.о.)

	Ответственный исполнитель  
	_______________________________________________

	                                      (подпись) (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 3

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                              ПАСПОРТ ТРАССЫ

	                  кабельной линии связи в ПВП кабелеводе

	Магистраль _______________________ КАБЕЛЕВОД N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП
	____________________________________

	Общая длина трассы _______________ км

	В грунте	В кабельной	Под водой	По мостам
	канализации
	Длина трассы, км              
	Типоразмер и цвет кабелевода  
	Марка кабеля                  
	Длина кабеля, км              
	Год прокладки                 

	Начальник (гл. инженер) СМУ
	_______________________________________________

	                                      (подпись) (фамилия и.о.)

	Ответственный исполнитель  
	_______________________________________________

	                                      (подпись) (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 4

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	              Состав исполнительной технической документации

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП
	____________________________________

	Участок ОУП ______________________ НРП
	____________________________________

	N	Наименование документов           	Номера папки и страниц
	п/п
	1. Паспорт групповой трассы из ПВП кабелеводов
	2. Паспорт трассы              
	1 
	2 

	3. Оптический паспорт            
	1 
	2 

	4. Электрический паспорт          
	1 
	2 
	5. Монтажная документация          
	1 
	2 

	6. Рабочая документация           
	1 
	2 

	Составил
	__________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                  (должность)      (подпись)       (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 5

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                            ОПТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

	                           кабельной линии связи

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП
	____________________________________

	Марка кабеля А ___________________ Марка кабеля Б
	_________________________

	Длина трассы _____________________ км

	Длина кабеля А ___________________ км

	Длина кабеля Б____________________ км

	Оптические муфты: типа ___________ в кол-ве
	___________________________ шт.

	                  типа ___________ в кол-ве
	___________________________ шт.

	Год прокладки_____________________

	Паспорт составлен ________________

	Начальник (главный инженер) СМУ
	___________________________________________

	                                     (подпись)      (фамилия и.о.)

	Отв. исполнитель

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	__________________________________________________________

	                         (должность) (подпись)      (фамилия и.о.)

	Форма 6

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                            ПРОТОКОЛ N _______

	                         оптических измерений ЭКУ

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП
	_________________

	ОУП _____________________ НРП _______________ Длина участка
	_______________

	Марка кабеля _____________________ Длина кабеля
	___________________________

	----T-----T-----T-----------------------------------------T--------T-
	-----¬

	¦	 N 	¦	  N  	¦	Тип  	¦	          Направление измерения          	¦	Среднее
	¦	Дата  	¦

	¦	п/п	¦	мод./	¦	разъ-	+--------------------T--------------------
	+	значение	¦	прове-	¦

	¦	   	¦	N ОВ 	¦	ема/ 	¦	 Направление А - Б  	¦	 Направление Б - А  	¦	затуха-
	¦	дения 	¦

	¦	   	¦	     	¦	N ро-	+------------T-------+------------T-------+	ния по 
	¦	изме- 	¦

	¦	   	¦	     	¦	зетки	¦	  Мощность  	¦	Резуль-	¦	  Мощность  	¦	Резуль-	¦	двум   
	¦	рений 	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	 излучения  	¦	таты   	¦	 излучения  	¦	таты   	¦	направ-
	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	            	¦	расчета	¦	            	¦	расчета	¦	лениям,
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	+------T-----+-------+------T-----+-------+	дБ     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	P    ,	¦	P   ,	¦	Зату-  	¦	P    ,	¦	P   ,	¦	Зату-  	¦	<*>    
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	 вых. 	¦	 вх. 	¦	хание, 	¦	 вых. 	¦	 вх. 	¦	хание, 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	 ед.  	¦	 ед. 	¦	дБ     	¦	 ед.  	¦	 ед. 	¦	дБ     	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	 мощ.,	¦	мощ.,	¦	       	¦	 мощ.,	¦	мощ.,	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	     	¦	     	¦	 дБм  	¦	 дБм 	¦	       	¦	 дБм  	¦	 дБм 	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	1  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	2  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	3  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	4  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	5  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	6  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	7  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	8  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	9  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	10 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	11 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	12 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	13 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	14 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	15 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	16 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	17 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	18 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	19 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	20 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	21 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	22 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	23 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	+---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	-----+

	¦	24 	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	L---+-----+-----+------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-
	------

	    --------------------------------

	    <*> Графа заполняется при измерении затухания рефлектометром.

	Измерительные приборы (марка, зав. N)
	_____________________________________

	___________________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Измерения проводили (Ф.И.О. измерителей)
	__________________________________

	___________________________________________________________________________

	"___" ______________ 19_ г.

	Представитель СМУ ________________ Представитель заказчика
	________________

	Форма 7

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                           ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

	                     оптической кабельной линии связи

	            (кабели с ДП или СС или металлическими элементами)

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ НРП
	____________________________________

	Марка кабеля А ___________________ Марка кабеля Б
	_________________________

	Длина трассы ____________________________________ км

	Длина кабеля А __________________________________ км

	Длина кабеля Б___________________________________ км

	Год прокладки____________________________________

	Паспорт составлен _______________________________

	                               (дата)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Начальник (главный инженер) СМУ
	___________________________________________

	                                     (подпись)      (фамилия и.о.)

	Отв. исполнитель
	__________________________________________________________

	                         (должность) (подпись)      (фамилия и.о.)

	Форма 8

	                           ПРОТОКОЛ N __________

	       электрических измерений постоянным током оптического кабеля

	           с токоведущими проводниками и (или) металлическими

	                          элементами конструкции

	Магистраль __________________________ ВОЛП N
	______________________________

	Участок измерений ___________________ Марка кабеля
	________________________

	Длина кабеля ________________________ Дата измерения
	______________________

	Измерительные приборы: тип _____________________ зав. N
	___________________

	                       тип _____________________ зав. N
	___________________

	Номер	Номер	Электри-	Электри- 	Асимметрия	Испытательное  	Примечание
	цепи	жилы	ческое  	ческое   	жил, Ом 	напряжение в  
	сопротив-	сопротив-	течение 2 мин., В
	ление   	ление цепи
	изоляции	Ом	Ом/км	Жила -	Пучок жил -
	жил, МОм	пучок	метал.  
	жил 	элементы 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Электрическое сопротивление изоляции защитного шланга кабеля между:

	оболочкой и броней ___________________ МОм _______________________
	МОм x км

	оболочкой и землей ___________________ МОм _______________________
	МОм x км

	броней и землей    ___________________ МОм _______________________
	МОм x км

	оболочкой

	и металлическим

	сердечником        ___________________ МОм _______________________
	МОм x км

	Измерения: проводил представитель подрядчика
	______________________________

	                                               (подпись)  (фамилия
	и.о.)

	           удостоверил представитель заказчика
	____________________________

	                                                 (подпись)  (фамилия
	и.о.)

	Форма 9

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                            ПРОТОКОЛ N _______

	                измерений потенциалов на оболочках кабелей

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ОУП (НРП)_________________________ НРП (ОУП)
	______________________________

	Марка кабеля
	______________________________________________________________

	Номер колодца или контрольно-измерительного пункта
	________________________

	Дата _____________________ 199_ г.

	Адрес пункта измерения
	____________________________________________________

	Время измерения: начало ______________________ конец
	______________________

	Интервал между отсчетами, с
	_______________________________________________

	Тип и номер прибора
	_______________________________________________________

	Тип электрода
	_____________________________________________________________

	                  I. Результаты измерения потенциалов, В

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Измерение проводил
	________________________________________________________

	                     (должность)     (подпись)      (фамилия и.о.)

	                          II. Обработка измерений

	Потенциал 	Число 	Сумма    	Максимальная	Минимальная	Средняя
	измерений	измеренных 	величина, 	величина,	величина,
	величин одного	В     	В    	В   
	знака, В  
	Положительный
	Отрицательный

	Обработку выполнил

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	________________________________________________________

	                      (должность)     (подпись)      (фамилия и.о.)

	Форма 10

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                          МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	                  кабельной линии связи в ПВП кабелеводе

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП (НРП)
	______________________________

	Марка кабеля А ___________________ Марка кабеля Б
	_________________________

	Типоразмер и цвет кабелевода ____________________

	Длина трассы ____________________________________ км

	Длина кабеля А __________________________________ км

	Длина кабеля Б___________________________________ км

	Начальник (гл. инженер) СМУ
	_______________________________________________

	                               (подпись)   (должность, фамилия и.о.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Ответственный исполнитель

	Начальник участка (прораб)
	________________________________________________

	                               (подпись)   (должность, фамилия и.о.)

	Форма 11

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                ПРОТОКОЛ N ____

	                   проверки качества прокладки и монтажа

	                    кабелеводов для оптического кабеля

	Трасса       
	Участок трассы
	Номер линии                                 	1  	2  	3  	4  
	Изготовитель трубок                         
	Типоразмер трубки мм/мм                     
	Цвет трубки, кол-во и цвет полосок          
	Выполнение засыпных работ, %                
	Длина участка, км                           
	Проверка на загрязненность (прочистка)      
	Проверка на проходимость (калибровка)       
	Диаметр x длина калибра                     
	Время прохождения калибра                   
	Дата проверок                               
	Проверки проводил                           
	Результат проверок                          
	Заключение представителя заказчика          
	Проверка герметичности                      
	Дата проверок                               
	Проверки проводил                           
	Длина участка, км                           
	Количество трубных муфт, шт.                
	Тип манометра                               

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Исходное давление, МПа (кг/кв. см)          
	Дата и время                                
	Ориентир. давл. через час, МПа (кг/кв. см)  
	Давление через 24 часа МПа (кг/кв. см)      
	Дата и время                                
	Падение давления за 24 часа, %              
	Заключение представителя заказчика          

	Акт сдачи в монтаж

	"___" __________________ 199_ г., проверенный участок для ввода
	оптического

	кабеля
	____________________________________________________________________

	                           сдан                    не сдан

	Сдал ________________________________ Принял
	______________________________

	Форма 12/1

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                  ПАСПОРТ

	                на смонтированную соединительную оптическую

	                муфту N _____________ типа ________________

	Магистраль ____________________________ ВОЛП N
	____________________________

	Адрес муфты
	_______________________________________________________________

	                          	-----------¬	   	-----------¬

	                          	L-----------	   	L-----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                           <---------     --------->

	                          А                         Б

	О--------------------------------------О-----------------------------
	-----О

	пункт измерения                                             пункт
	измерения

	-----------¬

	L-----------	 - количество волокон по направлениям

	Направления                           	А              	Б              
	Марка кабеля                          
	Метражная 	на входе кабеля в муфту   
	маркировка	на входе трубки в контейнер
	на входе кабеля в трубку  

	Монтажное подразделение
	___________________________________________________

	Монтажники: 1 _________________ 2 __________________ 3
	____________________

	N мод./	Цвет	Цвет	N мод./	Цвет	Цвет	Затухание в сростке, дБ 	Примечание
	N ОВ 	мод.	ОВ	N ОВ 	мод.	ОВ	в направлении	Среднее 
	---->	<----	значение
	Участок А ______	Б _____________ 
	Кабель А        	Кабель Б        	А - Б 	Б - А 

	Измерения проводились приборами: 1
	________________________________________

	(марка пр-ра, зав. N, длина волны, коэф-т преломления) 2
	__________________

	Отв. за монтаж
	____________________________________________________________

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                           (должности)   (подписи)   (фамилии, и.о.)

	Форма 12/2

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                  ПАСПОРТ

	               на смонтированную разветвительную оптическую

	               муфту N _______________ типа _______________

	Магистраль ____________________________ ВОЛП N
	____________________________

	Адрес муфты
	_______________________________________________________________

	                                           	---------¬	 -------> Б

	                                           	L---------

	                	---------¬	     	---¬	   О------------------------------
	-----О

	                	L---------	     	L---	  /	¦

	              А <---------          / 	¦	     	----¬	     	---------¬

	О----------------------------------О  	¦	     	L----	     	L---------

	пункт измерения                     \ 	¦	               -------> В

	                               	---¬	  \	¦

	                               	L---	   О------------------------------
	-----О

	                                                           пункты
	измерения

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	--------¬

	L--------	- количество волокон по направлениям

	Направления                                          	А 	Б  	В 
	Марка кабеля                                         
	Метражная маркировка	на входе кабеля в муфту         
	на входе трубки в контейнер     
	на входе кабеля в трубку        

	Монтажное подразделение
	___________________________________________________

	Монтажники: 1 _________________ 2 __________________ 3
	____________________

	N мод./	Цвет	Цвет	N мод./	Цвет	Цвет	Затухание в сростке, дБ 	Примечание
	N ОВ 	мод.	ОВ	N ОВ 	мод.	ОВ	в направлении	Среднее 
	--->	<--- 	значение
	Участок А ______  Б _____________ 
	Кабель А    	Кабель Б    	А - Б 	Б - А 

	Участок А ______  В _____________ 
	Кабель А    	Кабель В    	А - В 	В - А 

	Участок Б ______	В _____________ 
	Кабель Б    	Кабель В    	Б - В 	В - Б 

	Измерения проводились приборами: 1
	________________________________________

	(марка пр-ра, зав. N, длина волны, коэф-т преломления) 2
	__________________

	Отв. за монтаж
	____________________________________________________________

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                           (должности)   (подписи)   (фамилии и.о.)

	Форма 13

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                             ПРОТОКОЛ N ______

	             оптических измерений смонтированных участков ВОЛП

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Участок __________________________ Марка кабеля
	___________________________

	Длина участка ____________________ Длина кабеля
	___________________________

	Тип оптических муфт ______________ Кол-во оптических муфт
	_________________

	Монтажное подразделение __________ Дата монтажа
	___________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	N	N мод./	Цвет мод./	Затухание,	Среднее значе-	Километрическое	Приме-
	п/п	N ОВ 	Цвет ОВ 	дБ    	ние затухания 	затухание  	чание
	А - Б	Б - А	по двум направ-	смонтированого
	лениям, дБ    	участка, дБ/км
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Измерения проводились приборами: 1.
	_______________________________________

	(марка прибора, заводской N)     2.
	_______________________________________

	Отв. за монтаж
	____________________________________________________________

	                   (должность)      (подпись)      (фамилия и.о.)

	Форма 14

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                ПРОТОКОЛ N

	                      прозвонки оптического кабеля с

	          жилами ДП и (или) СС и (или) металлическими элементами

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ___________________ ОУП __________________ Марка кабеля
	_______________

	Участок ОУП _______________ НРП _________ "___" __________________
	199_ г.

	Номер пары ДП 	Номера жил	Цвет жил	Схема   	Данные  	Примечание
	или СС или тип	соединения	прозвонки 
	метал. элемента

	Измеритель
	________________________________________________________________

	                      (подпись)                 (фамилия и.о.)

	Спайщик
	___________________________________________________________________

	                      (подпись)                 (фамилия и.о.)

	Форма 15

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                      СВЕДЕНИЯ О ДРЕНАЖНОЙ УСТАНОВКЕ

	Дата	Завод-	Разность	Тип	Место   	Величина 	Расстояние от 	Время	Наиме- 
	записи	ской 	потен- 	дре-	присоединения	тока,   	дренажного шкафа,	уста-	нование,
	номер	циалов 	нажа	дренажного 	проходящего	м       	новки	дата,  
	дрена-	между  	кабеля   	в дренаже, А	дре-	номер  
	жа   	кабелем	нажа	докум.,
	и рель-	к защи-	к   	мини-	макси-	до места	до места	по кото-
	сами в 	щаемому	рель-	маль-	маль-	присое-	присое-	рому   
	точке  	кабелю	совой	ная 	ная  	динения	динения	установ-
	присое-	сети	к защи-	к рель-	ка при-
	динения	щаемому	совой  	нята в 
	дренажа	кабелю 	сети   	эксплу-
	атацию 

	Составил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	Проверил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 16

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ _________________________

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                      СВЕДЕНИЯ О ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЕ

	Место 	Дата	Мате- 	Средняя	Расстоя-	Краткая	Потенциал     	Примечание
	уста- 	уста-	риал и	глубина	ние от 	харак-	сооружения    
	новки 	новки	марка 	закопки	протек-	терис-	относительно  
	протек-	протек-	протек-	тора до	тика  	медносульфат- 
	тора  	тора  	тора, м	защищае-	ро,   	ного электрода,
	мого   	Ом x м	В             
	соору- 	до    	после 
	жения, м	вклю- 	вклю- 
	чения 	чения 
	протек-	протек-
	торов 	торов 

	Составил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	Проверил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 17

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                       СВЕДЕНИЯ О КАТОДНОЙ УСТАНОВКЕ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Дата	Завод-	Тип  	Напря-	Напряжение,	Величина	Тип  	Расстоя-	Сопро-	Время 	Наимено-
	записи	ской 	катод-	жение 	В, постоян-	тока, А,	зазем-	ние от  	тивле-	обору-	вание,  
	номер	ной  	пере- 	ного тока на	потреб-	ления	катодной	ние  	дования	дата    
	катод-	уста-	менного	зажимах  	ляемого	установки	зазем-	и вклю-	и номер 
	ной  	новки	тока на	катодной 	катодной	до зазем-	ления,	чения 	докумен-
	уста-	зажимах	установки,	уста-  	ления, м	м    	катод-	та, по  
	новки	катод-	когда   	новкой 	ной   	которому
	ной   	защищаемый	уста- 	катодная
	уста- 	кабель  	новки 	установка
	новки 	выклю-	вклю-	принята в
	чен  	чен 	эксплуа-
	тацию   

	Составил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	Проверил
	__________________________________________________________________

	                    (должность)     (подпись)     (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 18

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                           РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	                  кабельной линии связи в ПВП кабелеводе

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП (НРП)
	______________________________

	Марка кабеля А ___________________ Марка кабеля Б
	_________________________

	Типоразмер и цвет кабелевода ____________________

	Длина трассы ____________________________________ км

	Длина кабеля А __________________________________ км

	Длина кабеля Б___________________________________ км

	Начальник (гл. инженер) СМУ
	_______________________________________________

	                               (подпись)   (фамилия и.о.)

	Ответственный исполнитель

	Начальник участка (прораб)
	________________________________________________

	                               (подпись)   (фамилия и.о.)

	Форма 19

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                Журнал учета строительных длин ПВП трубок,

	                           поступивших на склад

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	N	Дата  	Номер 	Типо- 	Длина	Фирма-	Номер	Дата  	Номер	Тип 	Проверка 	Отправление	Под-
	п/п	поступ-	трансп.	размер	трубки,	изгото-	заказа	произ-	бара-	бара-	на трассу	пись
	ления 	докум.	трубки,	м  	витель	(лота)	водства	бана	бана	Номер	Дата	Дата	Регене-	учет-
	(нак- 	мм/мм 	прото-	рацион-	чика
	ладной)	кола 	ный   
	участок

	Форма 20

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               Журнал учета

	              строительных длин кабеля, поступивших на склад

	N	Дата  	Номер  	Марка	Фирма-	Тип 	Номер	Проверка 	Отправле-	Под-
	п/п	поступ-	трансп.	кабеля	изгото-	бара-	бара-	ние на   	пись
	ления 	докум. 	витель	бана	бана	трассу   	учет-
	(наклад-	Номер	Дата	Дата	Реге-	чика
	ной)   	прото-	нера-
	кола 	цион-
	ный 
	учас-
	ток 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 21

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	             Протокол входного контроля ПВП трубок N ________

	N   	Типо- 	Длина	Визуальный	Проверка	Про-	Дата	Заклю-	Проверку
	бара-	размер	трубки,	осмотр  	на гер-	верка	про-	чение о	произвел
	бана	трубки,	м  	метич- 	на  	верки	пригод-
	мм/мм 	Упа-	Трубок	ность  	про-	ности 	Под-	Дата
	ковки	ходи-	трубки	пись
	мость

	Форма 22

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                           ПРОТОКОЛ N __________

	                 входного контроля и проверки строительной

	                         длины оптического кабеля

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Заводской	Марка	Фирма-  	Длина, м	Коэф-т   	Место 	Температура
	номер 	кабеля	изготовитель	затухания 	хранения	кабеля при
	барабана	оптического	проверке 
	волокна по ТУ
	или контракту

	I. Внешний осмотр

	Номер  	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние  	Прочие	Осмотр
	заводского	барабана	обшивки	концов 	наружного  	сведения	проводил
	паспорта	кабеля 	покрова   
	верхних витков

	II. Проверка коэффициента затухания волокон

	N мод./	Цвет	Паспорт-	Направление 	Среднее 	Коэф-т 	Отклонение
	N вол.	модуля/	ные     	измерения  	значение	затухания,	коэф-та 
	Цвет	данные по	затухания	дБ   	затухания,
	А - Б	Б - А

	волокон	коэф-ту 	по двум 	дБ/км  
	затуха- 	затуха-	затуха-	направ- 
	ния,    	ние, дБ	ние, дБ	лениям, 
	дБ/км   	дБ      
	1     
	2     
	3     
	4     
	5     
	6     
	7     
	8     
	9     
	10    
	11    
	12    
	13    
	14    
	15    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	16    
	17    
	18    
	19    
	20    
	21    
	22    
	23    
	24    

	Измерительные приборы: 1.
	_________________________________________________

	(марка, заводской N)   2.
	_________________________________________________

	Измерения проводил
	________________________________________________________

	                       (должность)      (подпись)       (фамилия
	и.о.)

	Форма 23

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                           Укладочная ведомость

	                 строительных длин трубок для кабелеводов

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	N	Номер 	Длина 	Типо- 	Цвет 	Участок  	Дата	Факти-	Приме-
	п/п	барабана	трубки на	размер	трубки/	трассы  	прок-	ческая	чание 
	или  	барабане	трубки,	цвет 	укладки  	ладки	длина 
	бухты 	или  	мм/мм 	полосок	проло-
	в бухте,	Начало	Конец	женной
	м   	трубки,
	м     

	Старший мастер (прораб) СМУ
	_______________________________________________

	                                (подпись)          (фамилия и.о.)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                (подпись)          (фамилия и.о.)

	Форма 24

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                           Укладочная ведомость

	                         строительных длин кабелей

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	N	Заводской	Марка	Длина 	Фактическая	Участок трас-	Дата  	Приме-
	п/п	номер 	кабеля	кабеля на	длина   	сы укладки  	про-  	чание
	барабана	барабане,	проложенного	Начало	Конец	кладки
	м   	кабеля, м 

	Старший мастер (прораб) СМУ
	_______________________________________________

	                                (подпись)          (фамилия и.о.)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                (подпись)          (фамилия и.о.)

	Форма 25

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                 ВЕДОМОСТЬ

	              замеров глубины заложения кабелеводов в грунте

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП (НРП)_________________________ НРП (ОУП)
	______________________________

	Прибор ___________________________ Глубина по проекту
	___________________ м

	          (тип, заводской N)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Дата	Поряд-	Номер   	Участок	Номер 	Расстояние, 	Факти- 	Метод 
	замера	ковый	строи-  	между	планшета	м, от   	ческая 	проверки
	номер	тельной 	муфтами	рабочих	начала	преды-	глубина,
	замера	длины   	N - N	чертежей	строи-	дущего	м      
	трубки по	тельной	места
	укладоч-	длины 	замера
	ной ведо-	муфты 
	мости   

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	                           (должности)   (подписи)   (фамилии и.о.)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                           (должности)   (подписи)   (фамилии и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 26

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	   на скрытые работы по прокладке кабелеводов в грунте

	         и по мостам на магистрали _______________    "____" ______
	19__ г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель СМУ в лице
	___________________________

	                                                  должность, фамилия
	и.о.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	и представитель заказчика в лице ________________________________
	составили

	                                      должность, фамилия и.о.

	настоящий акт о том, что СМУ выполнены  работы  по  прокладке 
	кабелеводной

	трассы (планшеты __________) с _________ 19__ г. по _______________
	19__ г.

	                     N

	на участке _____________________________ протяженностью
	_______________ км.

	Глубина прокладки по проекту: не менее ___________ м, факт.
	_____________ м

	(картограммы N
	___________________________________________________________)

	Кабелеводы	Трубка  	Укладочная длина 	Соедини-	Выпол-	Качество 	Приме-
	трубок, км    	тельные	нение	прокладки 	чание
	муфты  	засып-	и монтажа 
	Общее	Номер	Типо- 	Цвет	В  	Под	По 	Тип	Кол-	ных  	Номера	Дата
	кол-во	размер,	грунте	водой	мостам	во 	работ,	актов	про-
	мм/мм 	%    	верки

	    Все работы выполнены в соответствии с техническим проектом,
	"Указаниями

	по строительству междугородных линий" и "Инструкцией по прокладке и
	монтажу

	оптического кабеля в ПВП трубках "SILICORE".

	Представитель СМУ __________________ Представитель заказчика
	______________

	Форма 27

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	                на скрытые работы по прокладке кабелеводов

	            в кабельной канализации на магистрали ____________

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель СМУ в лице
	___________________________

	                                                 (должность) (фамилия
	и.о.)

	и представитель заказчика в лице
	__________________________________________

	                                      (должность)         (фамилия
	и.о.)

	составили настоящий  акт  о  том,  что  СМУ  выполнены  работы по
	прокладке

	кабелеводов в городской канализации с ____________________________
	199__ г.

	по ____________________________ 199__ г.

	Номер 	Участок      	Трубка   	Трубные	Качество 	Приме-
	кабеле-	муфты 	прокладки 	чание
	вода  	и монтажа 
	Начало,	Конец,	Про- 	Типо-	Цвет  	Тип	Кол-	Номера	Дата
	коло- 	коло-	тяжен-	размер	трубки	во,	актов	про-
	дец N 	дец N	ность,	мм/мм	и поло-	шт.	верки
	м    	сок   

	    Все работы выполнены в соответствии с техническим проектом,
	"Указаниями

	по строительству междугородных линий" и "Инструкцией по прокладке и
	монтажу

	оптического кабеля в ПЭ трубках "SILICORE"

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Представитель СМУ __________________ Представитель заказчика
	______________

	Форма 28

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                АКТ N _____

	                   на скрытые работы по вводу оптических

	                          кабелей в ПВП кабелевод

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Участок __________________________ Дата ___________________________
	199_ г.

	     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
	_______________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	и производитель работ в лице (представитель СМУ)
	__________________________

	_________________________________________________________________
	составили

	                (должность, фамилия и.о.)

	настоящий акт о том, что с "___" ________ 199_ г. по "___" ________
	199_ г.

	на участке ________________________ протяженностью
	_____________________ км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1. Введен кабель: марки _________________ общей длиной
	_________________ км

	                  марки _________________ общей длиной
	_________________ км

	2. Смонтированы муфты: типа _____________ в кол-ве
	____________________ шт.

	                       типа _____________ в кол-ве
	____________________ шт.

	3. Установлены контейнеры оптических муфт:

	                       типа _____________ в кол-ве
	____________________ шт.

	                       типа _____________ в кол-ве
	____________________ шт.

	1. Смонтированные трубные муфты типа ___________ в кол-ве
	_____________ шт.

	2. Проведены испытания оптических и электрических параметров.

	3. Засыпные работы выполнены в объеме 100%.

	Все  работы выполнены в соответствии с техническим проектом,
	"Указаниями по

	строительству междугородных   линий  связи"  и  "Инструкцией  по 
	прокладке

	и монтажу оптического кабеля в ПВП трубках "SILICORE".

	Приложение: укладочные ведомости кабелей
	__________________________________

	                                                        (N)

	паспорта оптических муфт
	__________________________________________________

	                                                (N)

	акты на скрытые работы по закладке контейнеров оптических муфт
	____________

	___________________________________________________________________________

	                                    (N)

	протоколы  измерений  оптических параметров при последовательном
	соединении

	строительных длин кабеля
	__________________________________________________

	                                                (N)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Форма 29

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                АКТ N ____

	         на скрытые работы по закладке контейнеров оптических муфт

	Магистраль ___________________________ ВОЛП N
	_____________________________

	Акт составлен представителем СМУ в лице
	___________________________________

	и представителем заказчика в лице
	_________________________________________

	о  том, что  ими осмотрены  установленные СМУ контейнеры оптических
	муфт на

	участке _______________ согласно рабочим чертежам N
	_______________________

	Контей-	Кабельная	Запас	Способ	Проводни-	Качество	Глуб. 	Дренажный	Обваловка	Гидро-   	Маркер 	Засыпка 	Преду-	Дата 	Приме-
	нер   	муфта 	кабе-	гермет.	ки к КИП	укладки	зало- 	слой   	изоляция 	предит.	завер-	чание
	N	Тип	Тип	Кол-	ля, м	входа	Мар-	За-	кабеля и	жения 	Мате-	Тол-	Мате-	Тол-	Мате-	Кол-	Тип	Глуб.	Мате-	Высо-	лента,	шения
	во  	кабеля	ка 	пас,	провод-	подошвы	риал	щина,	риал	щина,	риал	во 	зало-	риал	та, м	глуб. 	работ
	в  	м  	ников  	контей-	м   	м   	сло-	жения,	залож.,
	трубку	нера, м	ев 	м    	м     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	    Осмотренные  сооружения  выполнены   в  соответствии  с 
	проектом  и  с

	действующими требованиями.

	Представитель СМУ __________________ Представитель заказчика
	______________

	Форма 30

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	                  на скрытые работы по строительству НРП

	Магистраль _______________________ ВОЛП N
	_________________________________

	Участок __________________________ Дата ___________________________
	199_ г.

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
	________________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	представитель СМУ в лице
	__________________________________________________

	                                    (должность, фамилия и.о.)

	произвели осмотр выполненных работ по устройству
	__________________________

	В ходе осмотра установлено:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1. Основание под корпус выполнено из
	______________________________________

	2. Анкеровка корпуса выполнена посредством анкеров и тяжей из
	_____________

	___________________________________________________________________________

	3. Корпус повреждений не имеет

	4. Крепление кабелеводов на вводе в НРП выполнено способом
	________________

	___________________________________________________________________________

	5. Работы выполнены в соответствии с рабочими чертежами N
	_________________

	___________________________________________________________________________

	6. Качество работ
	_________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Форма 31

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	            на скрытые работы по устройству контуров заземления

	Магистраль _______________________ ВОЛП N
	_________________________________

	Участок __________________________ Дата ___________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	199_ г.

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
	________________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	представитель СМУ в лице
	__________________________________________________

	                                    (должность, фамилия и.о.)

	произвели осмотр выполненных работ по устройству контуров заземления
	______

	___________________________________________________________________________

	                              (указать, где)

	    В ходе осмотра установлено:

	Рабочее заземление           	Защитное заземление     
	Количество	Материал	Длина  	Электри-	Количество	Материал	Электри-
	электродов	шин  	подающего	ческое  	электродов	шин  	ческое  
	кабеля  	сопротив-	сопротив-
	ление   	ление   

	Глубина забивки электродов
	________________________________________________

	Прокладки шин
	_____________________________________________________________

	Способ соединения электродов с шинами
	_____________________________________

	    Осмотренные  контуры заземления выполнены в соответствии с
	техническими

	условиями и проектом.

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Примечание: по данной форме составляются акты на скрытые работы, а также на защитные
	заземления вокруг деревьев и опор воздушных линий связи или электропередачи.

	Форма 32

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                АКТ N _____

	            на скрытые работы по устройству кабельных переходов

	                   через автомобильные и железные дороги

	Магистраль _____________________________

	Участок ________________________________ Дата _____________________
	199_ г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика в лице
	_____________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	представитель СМУ в лице
	__________________________________________________

	                                          (должность, фамилия и.о.)

	и представитель субподрядчика в лице
	______________________________________

	                                          (должность, фамилия и.о.)

	произвели  освидетельствование  работ   по устройству  кабельных 
	переходов

	через автомобильные, железные (ненужное зачеркнуть) дороги и
	установили:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1. Общие данные

	N	Наимено-	Место  	Способ 	Длина 	Глубина	Типо- 	Коли-	Способ
	п/п	вание  	уст-   	уст-   	перехода	заложения	размер	чество	стыковки
	перехода	ройства	ройства	(труб),	труб, м	и мате-	труб 	труб 
	перехода	перехода	м   	риал  
	труб  

	2. Проверка проходимости каналов
	__________________________________________

	3.   Трубы    покрыты   битумной  мастикой  (для  труб    на  
	пересечениях

	электрофицированных дорог)

	4. Стыки труб заделаны способом
	___________________________________________

	5. Концы труб заделаны способом
	___________________________________________

	6. Установка столбиков около концов труб
	__________________________________

	7. Восстановление откосов и кюветов
	_______________________________________

	8.
	________________________________________________________________________

	9.
	________________________________________________________________________

	Осмотренные  переходы  выполнены   в соответствии  с рабочими 
	чертежами  и

	"Указаниями по строительству междугородных кабельных линий связи".

	Представитель СМУ
	_________________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Представитель субподрядчика
	_______________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 33

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	                на скрытые работы по устройству кабельного

	                      перехода через водную преграду

	Магистраль __________________________________

	Участок _____________________________________

	Тип преграды ________________________________

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика в лице
	_____________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	представитель СМУ в лице
	__________________________________________________

	                                          (должность, фамилия и.о.)

	и представитель субподрядчика в лице
	______________________________________

	                                          (должность, фамилия и.о.)

	произвели освидетельствование работ по устройству кабельного перехода
	через

	___________________________________________________________________________

	и установили:

	1. Общие данные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Способ 	Длина	Кол-во	Характеристика труб	Глубина заложения 	Приме-
	выполнения	пере-	каналов	труб, м, не менее 	чание
	перехода	хода,	труб 	Типо- 	Мате-	Длина,	В подвод-	В берего-
	м   	размер,	риал	м  	ной части	вой части
	мм/мм 

	2. Проверка проходимости и герметизации каналов (протокол N от
	___________)

	3. Глубина заложения кабеля во всех контрольных  точках  (местах 
	проверки)

	соответствует проекту
	_____________________________________________________

	                              (если не соответствует - указать
	участок

	_______________________ (см. картограммы перехода)

	и величину отклонения)

	4. Концы труб заделаны способом
	___________________________________________

	5.
	________________________________________________________________________

	6.
	________________________________________________________________________

	Работы выполнены в соответствии с проектами и действующими правилами.

	Представитель СМУ ________________________________

	Представитель заказчика __________________________

	Представитель субподрядчика ______________________

	Форма 34

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СМУ ________________________________________

	                               АКТ N ______

	                   на скрытые работы по прокладке тросов

	                          (проводов) грозозащиты

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	ОУП ______________________________ ОУП
	____________________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
	________________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должность, фамилия и.о.)

	представитель СМУ в лице
	__________________________________________________

	                                          (должность, фамилия и.о.)

	составили настоящий акт о том, что на участках:

	4. _________________________________ протяженностью 
	______________________

	5. _________________________________ протяженностью 
	______________________

	6. _________________________________ протяженностью 
	______________________

	положен трос (провод) грозозащиты марки __________ на глубину
	_____________

	    Все  работы выполнены в соответствии с техническим проектом
	"Указаниями

	по строительству междугородных линий связи".

	Представитель СМУ _________________________________

	Представитель заказчика ___________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Форма 35

	(с примером заполнения)

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ _________________________

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                 ВЕДОМОСТЬ

	                 определения физической длины кабелеводов

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Участок
	___________________________________________________________________

	Типоразмер трубки__________________ Цвет трубки и полосок
	_________________

	Номера 	Метражные данные	Проложенная	Номер   	Длина по	Примечание
	трубных	на трубке, м 	длина  	строительн.	паспорту,
	муфт  	трубки, 	длины по  	м   
	N - N 	начало	конец	м    	укладочной 
	ведомости 
	0 - 1 <*>	2000   	0019  	1981      	1           	2000    
	1 - 2   
	2 - 3   
	3 - 4   

	... - 0 
	Итого 

	    ----------------------------

	    <*> Вместо цифры "0" проставляется номер ОУП или НРП.

	Составил

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	__________________________________________________________________

	                        (должность) (подпись) (фамилия и.о.)

	Проверил
	__________________________________________________________________

	                        (должность) (подпись) (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Форма 36

	(с примером заполнения)

	ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ

	СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ___________________________

	СМУ ________________________________________

	                                 ВЕДОМОСТЬ

	                       определения физической длины

	                          смонтированного кабеля

	Магистраль _______________________ Кабелевод N _____/ВОЛП N
	_______________

	Участок __________________________

	Марка кабеля _____________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Участок 	Метражные  	Проложенная	Номер   	Длина по	Примечание
	между  	данные на  	длина   	строительн.	паспорту,
	номерами 	кабеле, м  	кабеля,  	длины по 	м   
	оптических	начало	конец	м <*>   	укладочной
	муфт   	ведомости 
	ОУП - М1  	4012 	0025  	3988       	1          	4012    
	М1 - М2   

	Итого 

	    ----------------------------

	    <*> Проложенная длина кабеля  должна включать требуемый
	технологический

	запас для монтажа муфт.

	Составил
	__________________________________________________________________

	                        (должность) (подпись) (фамилия и.о.)

	Проверил
	__________________________________________________________________

	                        (должность) (подпись) (фамилия и.о.)

	"___" ______________ 199_ г.

	Приложение 1

	                                    АКТ

	                рабочей комиссии о готовности законченного

	                    строительством линейного сооружения

	                     для предъявления Государственной

	                            приемочной комиссии

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	г. _________________________________           "___" ______________
	199_ г.

	    Рабочая комиссия, назначенная
	_________________________________________

	___________________________________________________________________________

	            (наименование организации-заказчика (застройщика),

	                      назначившей рабочую комиссию)

	решением от "___" ______________ 199_ г. N
	________________________________

	в составе: председателя - представителя заказчика (застройщика)
	___________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	членов комиссии - представителей:

	генерального подрядчика
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	субподрядных (монтажных) организаций
	______________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	эксплуатационной организации
	______________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	генерального проектировщика
	_______________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов Госсвязьнадзора
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов государственного санитарного надзора
	______________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов государственного пожарного надзора
	________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	территориальных органов Государственного комитета РФ по  охране 
	окружающей

	среды (Госкомэкологии России) (по объектам производственного
	назначения) __

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов
	______________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации
	________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	других заинтересованных органов надзора и организаций
	_____________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

	УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

	предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством
	___________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	___________________________________________________________________________

	                     (наименование 	здания,	 сооружения)

	входящего в состав
	________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                          (наименование объекта)

	2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
	______

	___________________________________________________________________________

	                               (виды работ)

	и его субподрядными организациями
	_________________________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организации и их ведомственная подчиненность)

	выполнившими
	______________________________________________________________

	                                     (виды работ)

	3. Проектно-сметная документация на  строительство  разработана 
	проектными

	организациями
	_____________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

	4. Строительство осуществлялось по проекту
	________________________________

	___________________________________________________________________________

	            (номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

	5. Проектно-сметная документация утверждена
	_______________________________

	___________________________________________________________________________

	    (наименование органа, утвердившего документацию на объект в
	целом)

	"___" ______________ 199_ г.                   N
	__________________________

	6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало работ ________________________; окончание работ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	____________________

	                   (месяц и год)                          (месяц и
	год)

	7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
	__________________

	___________________________________________________________________________

	       (перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87

	___________________________________________________________________________

	                       или номер приложения к акту)

	указанные документы являются обязательным приложением  к  настоящему 
	акту.

	8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:
	_________________________

	___________________________________________________________________________

	  (мощность, производительность, производственная площадь,
	протяженность,

	___________________________________________________________________________

	                            вместимость и т.п.)

	9. Технологические  и   архитектурно-строительные   решения   по   
	зданию,

	сооружению характеризуются следующими данными:
	____________________________

	___________________________________________________________________________

	  (краткие технические характеристики по планировке, этажности,
	основным

	  материалам и конструкциям, инженерному и технологическому
	оборудованию)

	10. Оборудование  установлено   согласно   актам   о   его  приемке  
	после

	индивидуального испытания и комплексного  опробывания  рабочими 
	комиссиями

	(перечень актов приведен в приложении ____ к настоящему акту) в
	количестве:

	по проекту _______________________ единиц;

	фактически _______________________ единиц.

	11. Мероприятия   по охране    труда,    обеспечению   
	взрывобезопасности,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	пожаробезопасности, охране окружающей  природной среды  и 
	антисейсмические

	мероприятия, предусмотренные проектом
	_____________________________________

	                                             (сведения о выполнении)

	характеристика мероприятий приведена в приложении _________________ к
	акту.

	12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки,
	указанные

	в приложении ______________________________________________________ к
	акту.

	13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

	всего _______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ
	__________

	тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ________________
	тыс. руб.

	Решение рабочей комиссии:

	___________________________________________________________________________

	                     (наименование здания, сооружения)

	СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ  от   генерального  подрядчика  и готовым для
	предъявления

	Государственной приемочной комиссии.

	Председатель рабочей комиссии
	_____________________________________________

	                                                   (подпись)

	Члены рабочей комиссии:      
	_____________________________________________

	_____________________________________________

	                                                   (подпись)

	Сдали                                 Приняли

	представители генерального            представители заказчика
	(застройщика)

	и субподрядных организаций:

	____________________________________ 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	_____________________________________

	            (подписи)                              (подписи)

	Приложение 2

	Обязательное

	                                                      УТВЕРЖДЕН

	_______________________________

	_______________________________

	                                            (дата и номер решения
	(приказа,

	                                            постановления и др.),
	фамилия,

	                                            имя, отчество и должность
	лица,

	                                            подписавшего решение
	(приказ,

	                                            постановление и др.))

	                                    АКТ

	               государственной приемочной комиссии о приемке

	            в эксплуатацию законченного строительством объекта

	"___" ______________ 199_ г.      
	________________________________________

	                                          (местонахождение объекта)

	Государственная  приемочная  комиссия,   назначенная   решением 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	(приказом,

	постановлением и др.) от "___" ______________ 199_ г. N
	___________________

	___________________________________________________________________________

	               (наименование органа, назначившего комиссию)

	в составе: председателя
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	членов комиссии - представителей:

	заказчика - застройщика
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	эксплуатационной организации
	______________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	генерального подрядчика
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	генерального проектировщика
	_______________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов Госсвязьнадзора
	___________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов государственного пожарного надзора
	________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	территориальных органов Государственного комитета РФ по  охране 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	окружающей

	среды (Госкомэкологии России) (по объектам производственного
	назначения) __

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	местных административных органов (по объектам производственного
	назначения)

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	технической  инспекции  труда  соответствующего  ЦК  или  совета
	профсоюзов

	(по объектам производственного назначения)
	________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	профсоюзной  организации  заказчика   (застройщика)   или 
	эксплуатационной

	организации  (по  объектам  производственного  назначения), или
	профсоюзной

	организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета
	профсоюзов

	(по объектам жилищно-гражданского назначения)
	_____________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	финансирующего банка (по объектам производственного назначения)
	___________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	органов  по  регулированию  использования  и охране  вод системы
	Роскомвода

	(по объектам производственного назначения)
	________________________________

	___________________________________________________________________________

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	других  заинтересованных  органов  и  организаций (согласно  пп.
	4.13, 4.14

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СНиП 3.01.04-87)
	__________________________________________________________

	                            (фамилия, имя, отчество, должность)

	руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

	УСТАНОВИЛА:

	1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
	________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

	предъявлен к приемке в эксплуатацию
	_______________________________________

	___________________________________________________________________________

	       (наименование объекта и вид строительства: новое, расширение,

	                реконструкция, техническое перевооружение)

	по адресу:
	________________________________________________________________

	             (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
	улица,

	___________________________________________________________________________

	                           номер 	дома,	 корпуса)

	2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, 
	постановления

	и др.) от "___" ______________ 199_ г. N
	__________________________________

	___________________________________________________________________________

	                (наименование органа, выдавшего разрешение)

	3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
	_____________________

	___________________________________________________________________________

	       (наименование организации и его ведомственная подчиненность)

	выполнившим
	_______________________________________________________________

	                                     (виды работ)

	и субподрядными организациями
	_____________________________________________

	                               (наименование организаций и их

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ведомственная

	___________________________________________________________________________

	   подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при
	числе

	___________________________________________________________________________

	организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении _____ к
	акту))

	___________________________________________________________________________

	4. Проектно-сметная  документация  на строительство разработана
	генеральным

	проектировщиком
	___________________________________________________________

	                (наименование организации и ее ведомственная
	подчиненность)

	___________________________________________________________________________

	выполнившим
	_______________________________________________________________

	                   (наименование частей или разделов документации)

	и субподрядными организациями
	_____________________________________________

	                                (наименование организаций, их
	ведомственная

	___________________________________________________________________________

	    подчиненность и выполненные части и разделы документации (при
	числе

	___________________________________________________________________________

	организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении _____ к
	акту))

	5. Исходные данные для 	проектирования	 выданы
	______________________________

	___________________________________________________________________________

	   (наименования научно-исследовательских и изыскательских
	организаций,

	___________________________________________________________________________

	    их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при
	числе

	организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении _____ к
	акту))

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	6. Строительство  осуществлялось  по  проекту  (типовому, 
	индивидуальному,

	повторно применяемому)
	____________________________________________________

	                       (номер проекта, номер серии (по типовым
	проектам)

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	7. Проектно-сметная документация утверждена
	_______________________________

	                                         (наименование органа,
	утвердившего

	___________________________________________________________________________

	   (переутвердившего) документацию на объект, очередь, пусковой
	комплекс)

	"___" ______________ 199_ г.                   N
	__________________________

	8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало работ ________________________; окончание работ
	____________________

	                   (месяц и год)                          (месяц и
	год)

	при продолжительности строительства, мес.:

	по норме или по ПОС ______________________; фактически
	____________________

	9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая
	документация:

	___________________________________________________________________________

	      (перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04-87)

	Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему
	акту.

	10.  Предъявленный   к  приемке   в  эксплуатацию  объект  имеет 
	следующие

	основные показатели мощности, производительности, производственной
	площади,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	протяженности,   вместимости,  объема,  пропускной  способности, 
	провозной

	способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам
	(кроме

	жилых  	домов	 )  в  единицах  измерения  соответственно целевой
	продукции или

	основным видам услуг):

	Мощность,    	Единица 	По проекту     	Фактически     
	производительность	измерения	общая  	в том  	общая  	в том  
	и т.д.     	(с учетом	числе  	(с учетом	числе  
	ранее  	пускового	ранее  	пускового
	принятых)	комплекса	принятых)	комплекса
	или   	или   
	очереди 	очереди 

	Выпуск  продукции  (оказание услуг),  предусмотренной программой в 
	объеме,

	соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
	период ____

	___________________________________________________________________________

	            (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

	Предъявленное в эксплуатацию здание имеет следующие показатели:

	-----------------------------------------T---------T----------T------
	----¬

	¦	               Показатели               	¦	 Единица 	¦	По
	проекту	¦	Фактически	¦

	¦	                                        	¦	измерения	¦	         
	¦	          	¦

	+----------------------------------------+---------+----------+------
	----+

	¦	Общая площадь                           	¦	кв. м    	¦	         
	¦	          	¦

	+----------------------------------------+---------+----------+------
	----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	Число этажей                            	¦	этаж     	¦	         
	¦	          	¦

	+----------------------------------------+---------+----------+------
	----+

	¦	Общий строительный объем,               	¦	куб. м   	¦	         
	¦	          	¦

	¦	в том числе подземной части             	¦	-"-      	¦	         
	¦	          	¦

	+----------------------------------------+---------+----------+------
	----+

	¦	Площадь встроенных,                     	¦	кв. м    	¦	         
	¦	          	¦

	¦	встроено-пристроенных помещений         	¦	         	¦	         
	¦	          	¦

	L----------------------------------------+---------+----------+------
	-----

	11. Технологические   и   архитектурно-строительные   решения   по 
	объекту

	характеризуются следующими данными:
	_______________________________________

	                                        (краткие технические
	характеристики

	___________________________________________________________________________

	    по особенностям его размещения, по планировке, этажности,
	основным

	___________________________________________________________________________

	  материалам и конструкциям, инженерному и технологическому
	оборудованию)

	12. На   объекте   установлено   предусмотренное   проектом   
	оборудование

	в количестве согласно актам о его приемке после  индивидуального 
	испытания

	и комплексного опробывания (перечень указанных актов  приведен в
	приложении

	____________ к настоящему акту).

	13. Мероприятия   по   охране   труда,    обеспечению  
	взрывобезопасности,

	пожаробезопасности, охране окружающей  природной среды  и 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	антисейсмические

	мероприятия, предусмотренные проектом
	_____________________________________

	                                            (сведения о выполнении)

	характеристика мероприятий приведена в приложении _________________ к
	акту.

	14. Внешние  наружные  коммуникации холодного  и   горячего 
	водоснабжения,

	канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и 
	связи

	обеспечивают  нормальную   эксплуатацию   объекта   и  приняты  
	городскими

	эксплуатационными    организациями.      Перечень     справок    
	городских

	эксплуатационных организаций приведен в приложении ________________ к
	акту.

	15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

	16. Работы по озеленению, устройству  верхнего  покрытия  подъездных 
	дорог

	к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а
	также

	отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

	Виды работ  	Единица измерения	Объем работы  	Срок выполнения 

	17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

	всего _______ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ
	_________

	тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ________________
	тыс. руб.

	18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
	_________

	тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
	_____________

	тыс. руб., стоимость оборудования, инвентаря и инструмента _____ тыс.
	руб.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Решение Государственной приемочной комиссии:

	Предъявленный к приемке
	___________________________________________________

	                                      (наименование объекта)

	ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

	Председатель Государственной

	приемочной комиссии            
	___________________________________________

	                                                (подпись)

	Члены Государственной

	приемочной комиссии            
	___________________________________________

	___________________________________________

	                                                (подписи)

	Приложение 3

	                                  СПРАВКА

	            ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ

	               ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ГОТОВНОСТИ ИХ К ПРИЕМКЕ

	"___" ______________ 199_ г.       г.
	_____________________________________

	Составлена
	________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	     (должности, фамилии и.о. лиц, производивших освидетельствование)

	в том, ими в период _________________________ проведено
	освидетельствование

	законченных капитальным ремонтом следующих линейных сооружений:

	1.
	________________________________________________________________________

	2.
	________________________________________________________________________

	3.
	________________________________________________________________________

	4.
	________________________________________________________________________

	5.
	________________________________________________________________________

	В результате  освидетельствования  установлено,  что  указанные 
	сооружения

	могут   быть   готовы   к  приемке  после  устранения  следующих 
	недоделок

	и дефектов:

	1.
	________________________________________________________________________

	2.
	________________________________________________________________________

	3.
	________________________________________________________________________

	4.
	________________________________________________________________________

	5.
	________________________________________________________________________

	    Подписи

	Приложение 4

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                                                            &n bsp; 
	УТВЕРЖДАЮ

	_______________

	                                                            &n bsp;
	(должность)

	_______________

	                                                             (фамилия
	и.о.)

	                                    АКТ

	                 ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ

	                ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОЛП В ПВП КАБЕЛЕВОДАХ

	Гор. _______________________________           "___" ______________
	199_ г.

	Приемочная комиссия, назначенная
	__________________________________________

	___________________________________________________________________________

	             (наименование организации, назначившей комиссию)

	в составе:

	председателя
	______________________________________________________________

	                                (должность, фамилия и.о.)

	членов комиссии
	___________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	                         (должности, фамилии и.о.)

	произвели приемку работ по капитальному ремонту линейных сооружений
	_______

	___________________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                    (наименование линейных сооружений)

	и установила:

	1. Работы выполнены
	_______________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	          (наименование организации, выполнившей работы, фамилия

	                           производителя работ)

	2. Объем выполненных работ

	N 	Наименование конструктивных	Единица   	Физические объемы работ
	п/п	элементов работ      	измерения  	по проекту	фактически

	Оценка выполненных работ
	__________________________________________________

	Сметная стоимость выполненных работ _____________________________
	тыс. руб.

	Фактически израсходовано ________________________________________
	тыс. руб.

	Линейные сооружения
	_______________________________________________________

	Принимаются в эксплуатацию
	________________________________________________

	                                      (наименование организации)

	Приложения к акту:

	1. Исполнительная документация.

	2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к
	приемке.

	Председатель комиссии
	_____________________________________________________

	Члены комиссии       
	_____________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                     
	_____________________________________________________

	_____________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.