Принято

	решением

	Наблюдательного совета

	Единой системы оценки

	соответствия в области

	промышленной, экологической

	безопасности, безопасности

	в энергетике и 	строительстве

	от 20 июля 2009 г. N 30-БНС

	ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
	ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	СДОС-03-2009

	Положение по проведению строительного контроля при 	строительстве,	 реконструкции,
	капитальном ремонте объектов капитального строительства разработано НТЦ "Промышленная
	безопасность".

	Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции,
	капитальном ремонте объектов капитального строительства принято решением Наблюдательного
	совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,
	безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС.

	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции,
	капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее - Положение) формирует
	процедуры в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической
	безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее - Единая Система Оценки
	Соответствия) организации и проведения строительного контроля на объектах капитального
	строительства застройщиком (заказчиком), лицом, осуществляющим строительство на основании
	договора с застройщиком (заказчиком), либо подрядчиком в целях обеспечения качества
	строительных, монтажных и ремонтных работ, предупреждения, выявления и пресечения
	допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, иных нормативных
	правовых актов и проектной документации и подготовки заключения о соответствии построенного,
	реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

	2. Настоящее Положение распространяется на виды строительной деятельности, связанные с
	контролем показателей соответствия требованиям технических регламентов, иных нормативных и
	правовых документов, а также проектным решениям по строительству, реконструкции и ремонту
	объектов капитального строительства, контролю показателей проектных решений, технологических
	процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и
	оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства строительной
	продукции в целом.

	3. Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия
	выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и
	правил), результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного
	участка в течение всего периода строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
	капитального строительства.

	4. Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью определения
	соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных
	материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в
	процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям
	технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной
	документации.

	5. Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для взаимодействия с
	органами государственного строительного надзора и местного самоуправления застройщик (заказчик)
	может привлечь в качестве подрядной организации инспекционную организацию, аккредитованную
	в Единой Системе Оценки Соответствия. Передача застройщиком (заказчиком) своих функций и
	соответствующей ответственности привлеченной организации оформляется договором между ними.

	Специалисты инспекционной организации, осуществляющие строительный контроль при
	строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, должны
	быть аттестованы в качестве экспертов в Единой Системе Оценки Соответствия в соответствии с
	Требованиями к экспертам по промышленной безопасности (СДА-23-2008).

	6. К основным функциям организаций, проводящих строительный контроль, относятся:

	- проверка качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов,
	строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе
	строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сроков
	строительства, строительной продукции в целом;

	- проверка готовности строительных организаций к ведению строительства;

	- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ,
	участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии
	законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и
	правовых документов, проектно-сметной документации;

	- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение
	брака и выявленных несоответствий;

	- предоставление своевременной информации заказчику (застройщику) и территориальным
	органам Ростехнадзора обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе строительства,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

	7. На особо опасных, технологически сложных и уникальных объектах капитального
	строительства строительный контроль, как правило, осуществляется инспекционными
	организациями, аккредитованными в Единой Системе Оценки Соответствия.

	II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

	8. Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой и включает в
	себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех этапах (стадиях)
	строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

	9. Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчика),
	лабораторного контроля, геодезического контроля, производственного контроля, авторского надзора,
	контроля по вопросам инженерных изысканий.

	Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться
	посредством мониторинга технического состояния 	зданий	 и 	сооружений,	 отдельных конструкций и
	конструкционных систем, мониторинга окружающей застройки и экологической обстановки.

	10. Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует
	своевременное оформление разрешительной документации на строительство и подготовительные
	работы, осуществляет контроль выноса границ отвода земельного участка под строительство,
	участвует в проверке и приемке детальной разбивки осей 	зданий,	 инженерных сетей и
	коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует качество проектно-сметной документации,
	постоянно проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных
	материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных
	анализов и испытаний, требует от лиц, осуществляющих строительство, своевременного и
	правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации,
	ведения общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по
	организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в
	эксплуатацию.

	Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщика (заказчика),
	обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои
	замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать устранение выявленных
	недостатков.

	11. Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории лиц,
	осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных
	организаций. Испытательные (строительные) лаборатории аккредитовываются в Единой Системе
	Оценки Соответствия.

	На испытательные (строительные) лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо
	испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается контроль за
	соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве
	строительно-монтажных работ; за соответствием выполнения строительных и монтажных работ
	проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля;
	проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий; контроль за дозировкой
	составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и др. материалов; определение набора
	прочности бетона, контроль испытания сварных соединений, контроль состояния грунтов в
	основаниях фундаментов.

	Испытательные лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо испытательные
	лаборатории подрядных организаций обязаны вести журналы регистрации осуществленного
	контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, подготавливать акты о
	соответствии (несоответствии) строительных материалов, поступающих на объект капитального
	строительства, требованиям проекта, стандартам и техническим условиям.

	12. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических работ, в том
	числе инструментального контроля, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
	объекта капитального строительства.

	В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят создание
	геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических разбивочных
	работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия геометрических параметров
	объекта капитального строительства проекту, геодезические изменения деформации оснований,
	несущих конструкций зданий ( 	сооружений	 ) и их частей.

	Создание геодезической разбивочной основы для строительства, геодезические изменения
	деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей являются
	обязанностью застройщика (заказчика).

	Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий журнал
	работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной документации по
	результатам исполнительной съемки.

	13. Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной документации,
	конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
	строительных процессов или производственных операций, приемочный контроль строительно-
	монтажных работ. При входном контроле проектно-сметной документации производится проверка ее
	комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства
	работ.

	Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на стройку,
	должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной документации,
	стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество
	изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. При необходимости материалы и
	изделия испытывают в испытательной лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо в
	испытательной лаборатории специализированных независимых подрядных организаций.

	Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов
	или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их
	возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в
	соответствии со схемами операционного контроля на выполнение соответствующего вида работ.

	Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с указанием
	допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала или
	конструкции, перечень контролируемых операций или процессов, данные о составе, сроках и
	способах контроля, перечень скрытых работ.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов работ,
	готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального
	строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль проводит лицо, осуществляющее
	строительство, застройщик (заказчик), а также привлеченное по инициативе застройщика (заказчика)
	лицо, осуществляющее разработку проектной документации.

	При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной приемке работ
	и конструкций лицо, осуществляющее строительство, предъявляет представителю строительного
	контроля следующую производственно-техническую документацию: общий журнал работ, журналы
	производства отдельных видов работ, журналы (акты) осуществления лабораторного контроля,
	паспорта и сертификаты на материалы и изделия, исполнительную документацию.

	14. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал
	авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и передается
	застройщику (заказчику). Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор,
	заключаются в проведении выборочной проверки соответствия выполняемых работ рабочей
	документации и требованиям технических регламентов, выборочного контроля качества и
	технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и
	долговечности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования,
	своевременном решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую
	документацию, информировании заказчика (застройщика) о несвоевременном и некачественном
	выполнении лицом, осуществляющим строительство, указаний специалистов авторского надзора для
	принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и
	нарушений требований технических регламентов.

	15. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и
	конструкционных систем проводится в соответствии с нормативно-техническими документами и
	представляет собой систему наблюдения и контроля, проводится по определенной программе для
	своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-
	деформационного состояния конструкций и грунтов основания, которые могут повлечь переход
	объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта в аварийное состояние.

	Система мониторинга технического состояния строительных конструкций реализуется
	застройщиком (заказчиком) или лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с заранее
	разработанным проектом.

	Система мониторинга технического состояния развертывается на объекте на этапе
	строительства (капитального ремонта, реконструкции) для осуществления сбора информации о
	напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций во временном диспетчерском
	пункте и продолжает работать на этапе эксплуатации для осуществления сбора информации о
	напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций в диспетчерском пункте
	объекта с возможностью передачи информации в соответствующие службы.

	16. Ответственность организаций, осуществляющих строительный контроль, должна быть
	застрахована на основе независимой оценки рисков. В целях обеспечения оптимального
	взаимодействия лиц, осуществляющих строительство, с органами государственного строительного
	надзора целесообразно в договоры между застройщиками и организациями, осуществляющими
	строительный контроль, включать обязанность последних представлять интересы застройщиков
	перед органами государственного строительного надзора, а также предоставлять всю необходимую
	информацию о ходе проведения строительного контроля органам государственного строительного
	надзора.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

	17. Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, ведет свою деятельность
	на основе договора с застройщиком (заказчиком) в соответствии с действующим законодательством
	Российской Федерации.

	Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, контролирует ход и качество
	выполняемых работ, соблюдение их сроков, качество и правильность использования применяемых
	материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность
	исполнителя работ.

	Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, должна иметь
	организационную структуру, которая позволит обеспечить квалифицированное управление и
	выполнение возложенных на нее технических функций.

	Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, в своей деятельности
	руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной
	документацией, утвержденными (согласованными) застройщиком (заказчиком), внутренними
	регламентами, документами Единой Системы Оценки Соответствия.

	IV. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

	18. Строительный контроль осуществляется в соответствии с договором с момента получения
	от заказчика проектно-сметной и рабочей документации. Передача технической документации
	оформляется актом, который является документом начала осуществления функций строительного
	контроля.

	19. В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный контроль,
	возлагаются следующие задачи:

	- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных
	случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов
	входного контроля и лабораторных испытаний;

	- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых
	материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено
	применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

	- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля
	требованиям;

	- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной
	документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных
	конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе
	строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и
	документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

	- контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного
	строительного контроля и местного самоуправления;

	- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного
	состояния на объекте строительства;

	- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и
	календарному плану строительства;

	- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций,
	участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;
	контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения
	последующих работ до подписания указанных актов;

	- заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного
	строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и
	нормативной документации.

	Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его безопасности,
	установленным техническими регламентами, иными нормативными и правовыми документами,
	проектно-сметной документацией, являющимися доказательной базой соблюдения требований
	технических регламентов, выполняется и удостоверяется итоговым заключением органа
	государственного строительного надзора, выдаваемым застройщику (заказчику) и подтверждающим
	возможность безопасной эксплуатации объекта.

	20. Лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик) и подрядная организация по
	строительному контролю несут ответственность в соответствии с законодательством за
	неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:

	- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии
	с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными
	условиями;

	- за качество и приемку выполненных работ;

	- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным
	формам и в установленные сроки;

	- за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного
	выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих технических регламентов,
	иных правовых и нормативных документов, проектной документации.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приложение

	(справочное)

	ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков
	проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в
	целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым
	строительно-монтажным работам на объекте.

	Государственный строительный надзор - проверка соответствия выполняемых работ
	требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной
	документации, осуществляемая уполномоченными органами исполнительной федеральной власти.

	Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в
	обращение продукции требованиям технических регламентов; контроль (надзор) за соблюдением
	требований технических регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или
	индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам
	производства, строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и
	принятие мер по результатам проверки.

	Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям
	технических регламентов.

	Договор - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их
	права и обязанности. Распорядительный документ (приказ) - основной документ для осуществления
	работ при 	проектировании,	 инвестировании и строительстве, реконструкции и ремонте объекта.

	Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее финансирование разработок проектной
	документации строительства и технического надзора за строительством (здесь и далее по тексту
	понятие строительство также включает капитальный ремонт, реконструкцию и техническое
	перевооружение) и/или осуществляющее эксплуатацию объектов.

	Законченный строительством объект - объект строительства в составе, допускающем
	возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в
	соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты
	несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности
	прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный
	режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды.

	Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
	земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
	строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
	для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

	Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или)
	деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Качество - совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности удовлетворить
	установленные и предполагаемые потребности.

	Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или
	оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с
	установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих
	характеристик.

	Нормативный документ - документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или
	характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

	Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
	которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
	построек.

	Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований,
	предъявляемых к объекту.

	Подрядчик - строительно-монтажная организация, являющаяся юридическим лицом,
	осуществляющая строительство объектов капитального строительства в соответствии с требованиями
	нормативной технической и проектной документации.

	Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение
	и ограниченное строительными конструкциями.

	Проектант - юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию заказчика разработку
	проектной документации на строительство и авторский надзор за строительством.

	Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца,
	арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка,
	строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.

	Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
	(высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества
	инженерно-технического обеспечения.

	Ремонт - комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с восстановлением
	отдельных частей, узлов, деталей, конструкций, инженерно-технического оборудования или их
	заменой в связи с физическим износом, или разрушением для восстановления проектных,
	технических и эксплуатационных характеристик объектов без изменения параметров объектов
	капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
	производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

	Стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным
	органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила,
	руководящие принципы и характеристики различных видов деятельности или их результатов и
	который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

	Строительная конструкция - часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая
	определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

	Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого
	объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования
	строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Строительная продукция - законченные строительством здания и другие строительные
	сооружения, а также их комплексы.

	Строительное изделие (изделие) - изделие, предназначенное для применения в качестве
	элемента строительных конструкций зданий и сооружений.

	Строительное сооружение (сооружение) - единичный результат строительной деятельности,
	предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

	Строительный контроль - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального
	ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ
	проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных
	изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение
	измерений экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик
	технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального
	строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных
	работ и подготовку заключения о соответствии.

	Строительная лаборатория - испытательная лаборатория, которая проводит испытания
	строительных материалов, конструкций в рамках своей аккредитации (аттестации) в соответствии с
	требованиями Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической
	безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

	Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный), предназначенный для
	создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

	Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
	объектов капитального строительства).

	Третья сторона - лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в
	рассматриваемом вопросе.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.