ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 октября 2009 г. N 1429-р

	Утвердить прилагаемый паспорт регионального инвестиционного проекта "Строительство
	объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан",
	реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного
	фонда Российской Федерации.

	Председатель Правительства

	Российской Федерации

	В.ПУТИН

	Утвержден

	распоряжением Правительства

	Российской Федерации

	от 2 октября 2009 г. N 1429-р

	ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
	ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА УФЫ
	РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
	ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	1. Наименование регионального инвестиционного проекта - "Строительство объектов
	социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан".

	Срок реализации - 2008 - 2010 годы.

	2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - администрация
	городского округа город Уфа, Правительство Республики Башкортостан.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3. Участники регионального инвестиционного проекта:

	главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития
	Российской Федерации;

	инвестор - общество с ограниченной ответственностью "Уфимская строительная компания".

	4. Цели регионального инвестиционного проекта - создание и дальнейшее развитие на
	принципах государственно-частного партнерства объектов коммунальной инфраструктуры,
	способствующих увеличению объемов жилищного 	строительства,	 а также направленных на
	снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду.

	5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

	3372,23 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС),

	3827,19 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

	6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации -

	заключение государственной вневедомственной экспертизы Республики Башкортостан от 6
	марта 2001 г. N Э-58-2000;

	положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Республике
	Башкортостан от 6 марта 2007 г. N Э-342/06 (п);

	положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Республике
	Башкортостан от 16 марта 2007 г. N Э-67/06;

	положительное заключение государственного учреждения Управление государственной
	экспертизы Республики Башкортостан от 11 декабря 2007 г. N Э-44/07;

	положительное заключение государственного учреждения Управление государственной
	экспертизы Республики Башкортостан от 11 декабря 2007 г. N Э-45/07 (п);

	положительное заключение государственного учреждения Управление государственной
	экспертизы Республики Башкортостан от 17 июня 2008 г. N 02-1-4-0273-08;

	положительное заключение государственного учреждения Управление государственной
	экспертизы Республики Башкортостан от 14 августа 2008 г. N 02-1-5-0378-08;

	положительное заключение государственного учреждения Управление государственной
	экспертизы Республики Башкортостан от 26 августа 2008 г. N 02-1-5-0405-08.

	7. Сведения об инвестиционном консультанте - общество с ограниченной ответственностью
	"Райффайзен Инвестмент", 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А.

	8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету
	субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта
	Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального
	строительства	 муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются
	из местных бюджетов.

	Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской
	Федерации:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	841,11 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС),

	1003,81 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

	9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 6,84 года с начала реализации проекта.

	10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта
	определяются согласно Приложению N 1.

	11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на
	результаты его реализации:

	по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета
	городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - 100 процентов права собственности
	муниципального образования городской округ город Уфа Республики Башкортостан;

	по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100
	процентов права собственности инвестора.

	12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются
	согласно Приложению N 2.

	Приложение N 1

	к паспорту регионального

	инвестиционного проекта

	"Строительство объектов социальной

	и инженерной инфраструктуры города

	Уфы Республики Башкортостан"

	ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
	ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
	ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

	(млн. рублей, с НДС)

	------------------T----------------T---------------------------------
	--------------------------------- ------------------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	Этапы реализации 	¦	    Сметная     	¦	          Источники
	финансирования регионального инвестиционного проекта            	¦

	¦	  регионального  	¦	   стоимость    	+----------------T----------------
	T----------------T----------------T----------------+

	¦	 инвестиционного 	¦	 регионального  	¦	  собственные   	¦	    заемные    
	¦	    средства    	¦	    средства    	¦	    средства    	¦

	¦	     проекта     	¦	инвестиционного 	¦	    средства    	¦	    средства   
	¦	     бюджета    	¦	    бюджета     	¦	Инвестиционного 	¦

	¦	                 	¦	    проекта     	¦	   инвестора    	¦	 инвестора (по 
	¦	   Республики   	¦	   городского   	¦	фонда Российской	¦

	¦	                 	¦	                	¦	                	¦	   источникам  
	¦	  Башкортостан  	¦	  округа город  	¦	   Федерации    	¦

	¦	                 	¦	                	¦	                	¦	   получения)  
	¦	                	¦	 Уфа Республики 	¦	                	¦

	¦	                 	¦	                	¦	                	¦	               
	¦	                	¦	  Башкортостан  	¦	                	¦

	¦	                 	+-------T--------+-------T--------+-------T--------
	+-------T--------+-------T--------+-------T--------+

	¦	                 	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦	в ценах	¦	в ценах
	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦

	¦	                 	¦	  на 1 	¦	на 1    	¦	  на 1 	¦	на 1    	¦	  на 1 	¦	на 1   
	¦	  на 1 	¦	на 1    	¦	  на 1 	¦	на 1    	¦	  на 1 	¦	на 1    	¦

	¦	                 	¦	января 	¦	января  	¦	января 	¦	января  	¦	января 	¦	января 
	¦	января 	¦	января  	¦	января 	¦	января  	¦	января 	¦	января  	¦

	¦	                 	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦	2008 г.	¦	прогноз-
	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦

	¦	                 	¦	       	¦	ного    	¦	       	¦	ного    	¦	       	¦	ного   
	¦	       	¦	ного    	¦	       	¦	ного    	¦	       	¦	ного    	¦

	¦	                 	¦	       	¦	года    	¦	       	¦	года    	¦	       	¦	года   
	¦	       	¦	года    	¦	       	¦	года    	¦	       	¦	года    	¦

	   I этап - 2008    302,52  302,52   302,52 302,52      -       -
	        -        -       -       -        -       -

	   год

	   II этап -       1621,47 1759,88  1018,86 1064,75   470,61
	540,03      -        -       -       -       132    155,1

	   всего

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	   2008 год         830,55  830,55   756,62 756,62    73,93  
	73,93      -        -       -       -        -       -

	   2009 год         790,92  929,33   262,24 308,13    396,68 
	466,1      -        -       -       -       132    155,1

	   III этап -      1448,24 1764,79   366,73 427,98    28,85   33,9   
	279,56   369,62   63,99   84,58   709,11   848,71

	   всего

	в том числе:

	   2008 год         133,86  133,86   131,86 131,86      -       -
	       1,6      1,6     0,4     0,4       -       -

	   2009 год         690,71  802,84   103,01 121,04    28,85  
	33,9     6,81       8      1,7      2     550,34   637,9

	   2010 год         623,67  828,09   131,86 175,08      -       -    
	271,15   360,02   61,89   82,18   158,77   210,81

	Итого             3372,23 3827,19  1688,11 1795,25   499,46 573,93  
	279,56   369,62   63,99   84,58   841,11  1003,81

	(2008 - 2010

	годы)

	в том числе:

	   2008 год        1266,93 1266,93    1191   1191     73,93  
	73,93     1,6      1,6     0,4     0,4       -       -

	   2009 год        1481,63 1732,17   365,25 429,17    425,53  
	500     6,81       8      1,7      2     682,34    793

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	   2010 год         623,67  828,09   131,86 175,08      -       -    
	271,15   360,02   61,89   82,18   158,77   210,81

	Приложение N 2

	к паспорту регионального

	инвестиционного проекта

	"Строительство объектов социальной

	и инженерной инфраструктуры города

	Уфы Республики Башкортостан"

	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
	"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
	УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

	------------------------T--------------------------------------------
	-----¬

	¦	    Этапы реализации   	¦	      Основные результаты реализации
	этапа       	¦

	¦	     регионального     	¦	      регионального инвестиционного
	проекта      	¦

	¦	инвестиционного
	проекта	¦	                                                 	¦

	¦	 (начиная с года
	подачи	¦	                                                 	¦

	¦	        заявки)       
	¦	                                                 	¦

	L-----------------------+--------------------------------------------
	------

	                                  I этап

	2008 год                ввод в эксплуатацию жилого 	дома	 общей
	площадью

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                         21310,2 кв. м по ул. Дагестанской
	(микрорайон

	                         N 8), литер 8, в Демском районе городского
	округа

	                         город Уфа

	                                 II этап

	2009 год                ввод в эксплуатацию жилого 	дома	 общей
	площадью

	                         26524,6 кв. м по ул. Дагестанской
	(микрорайон

	                         N 8), N 3, в Демском районе городского
	округа

	                         город Уфа;

	                         ввод в эксплуатацию жилого дома общей
	площадью

	                         26710,3 кв. м по ул. Дагестанской
	(микрорайон

	                         N 8), N 4, в Демском районе городского
	округа

	                         город Уфа;

	                         ввод в эксплуатацию жилого дома общей
	площадью

	                         35558,1 кв. м по ул. Дагестанской
	(микрорайон

	                         N 8), литер 7, в Демском районе городского
	округа

	                         город Уфа;

	                         ввод в эксплуатацию 	сооружения	 сгущения

	                         избыточного ила на правом берегу реки Белая

	                         производительностью 9214 куб. м/сут.

	                                 III этап

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2010 год                ввод в эксплуатацию жилого дома (I очередь)

	                         общей площадью 23795,5 кв. м по ул.
	Дагестанской

	                         (микрорайон N 8), литер 5, в Демском районе

	                         городского округа город Уфа;

	                         ввод в эксплуатацию блока емкостей N 4 со

	                         вспомогательными 	сооружениями

	                         производительностью 130 тыс. куб. м/сут.

	                         (корректировка проекта 6-го пускового
	комплекса

	                         канализации г. Уфы (расширение и
	реконструкция,

	                         III очередь))

	---------------------------------------------------------------------
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.