ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 августа 2009 г. N 1250-р

	Утвердить прилагаемый паспорт регионального инвестиционного проекта "Создание первой
	очереди промышленной зоны "Заволжье", реализуемого при государственной поддержке за счет
	бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

	Председатель Правительства

	Российской Федерации

	В.ПУТИН

	Утвержден

	распоряжением Правительства

	Российской Федерации

	от 28 августа 2009 г. N 1250-р

	ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ
	ОЧЕРЕДИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЗАВОЛЖЬЕ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
	ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
	ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	1. Наименование регионального инвестиционного проекта - "Создание первой очереди
	промышленной зоны "Заволжье".

	Срок реализации - 2009 - 2011 годы.

	2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - правительство
	Ульяновской области, мэрия г. Ульяновска.

	3. Участники регионального инвестиционного проекта:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития
	Российской Федерации;

	инвестор - общество с ограниченной ответственностью "САБМиллер РУС".

	4. Цель регионального инвестиционного проекта - создание объектов инженерной и
	транспортной инфраструктуры промышленной зоны "Заволжье", 	строительство	 на ее территории
	пивоваренного завода "САБМиллер".

	5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

	3501,74 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

	4151,62 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

	6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

	положительное заключение областного автономного учреждения "Ульяновскгосэкспертиза" от
	12 ноября 2008 г. N 73-1-5-0355-08;

	положительное заключение федерального государственного учреждения "Главное управление
	государственной экспертизы" от 20 ноября 2008 г. N 751-08/ГГЭ-5755/03.

	7. Сведения об инвестиционном консультанте - Ульяновский региональный филиал открытого
	акционерного общества "Россельхозбанк", 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15.

	8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету
	субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта
	Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального
	строительства	 муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются
	за счет средств местного бюджета.

	Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
	Российской Федерации:

	237,93 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

	279,56 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

	9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9 лет с начала реализации проекта.

	10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта
	определяются согласно Приложению N 1.

	11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на
	результаты его реализации:

	по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета г.
	Ульяновска, - 100 процентов права собственности г. Ульяновска;

	по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100
	процентов права собственности инвестора.

	12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются
	согласно Приложению N 2.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приложение N 1

	к паспорту регионального

	инвестиционного проекта

	"Создание первой очереди

	промышленной зоны "Заволжье"

	ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
	ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЗАВОЛЖЬЕ"

	(млн. рублей, с НДС)

	---------------T----------------T------------------------------------
	--------------------------------- --------------------¬

	¦	Этапы         	¦	    Сметная     	¦	             Источники
	финансирования регионального инвестиционного проекта              	¦

	¦	реализации    	¦	   стоимость    	+-----------------T-----------------
	T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	регионального 	¦	 регионального  	¦	   собственные   	¦	заемные средства
	¦	средства бюджета 	¦	    средства     	¦	    средства     	¦

	¦	инвестиционно-	¦	инвестиционного 	¦	    средства     	¦	  инвестора (по 
	¦	    субъекта     	¦	местного бюджета 	¦	 Инвестиционного 	¦

	¦	го проекта    	¦	    проекта     	¦	    инвестора    	¦	   источникам   
	¦	   Российской    	¦	                 	¦	фонда Российской 	¦

	¦	              	¦	                	¦	                 	¦	   получения)   
	¦	    Федерации    	¦	                 	¦	    Федерации    	¦

	¦	              	¦	              	¦	в ценах	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в
	ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах 	¦	в ценах
	¦

	¦	              	¦	 на 1  	¦	на 1    	¦	  на 1  	¦	на 1    	¦	  на 1  	¦	на 1   
	¦	  на 1  	¦	на 1    	¦	  на 1  	¦	на 1    	¦	  на 1  	¦	на 1    	¦

	¦	              	¦	января 	¦	января  	¦	 января 	¦	января  	¦	 января 	¦	января  	¦
	января 	¦	января  	¦	 января 	¦	января  	¦	 января 	¦	января  	¦

	¦	              	¦	2008 г.	¦	прогноз-	¦	2008 г. 	¦	прогноз-	¦	2008 г. 	¦	прогноз-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	2008 г. 	¦	прогноз-	¦	2008 г. 	¦	прогноз-	¦	2008 г. 	¦	прогноз-	¦

	¦	              	¦	       	¦	ного    	¦	        	¦	ного    	¦	        	¦	ного   
	¦	        	¦	ного    	¦	        	¦	ного    	¦	        	¦	ного    	¦

	¦	              	¦	       	¦	года    	¦	        	¦	года    	¦	        	¦	года   
	¦	        	¦	года    	¦	        	¦	года    	¦	        	¦	года    	¦

	L--------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------
	+--------+--------+--------+-------- +--------+---------

	Региональный   3501,74 4151,62    3068    3604,9     -        -     
	178,44   246,75   17,37    20,41    237,93   279,56

	инвестиционный

	проект - всего

	   в том числе:

	   2009 год     3373,04 3963,31    3068    3604,9     -        -     
	49,74    58,44    17,37    20,41    237,93   279,56

	   2011 год      128,7   188,31     -        -        -        -     
	128,7    188,31     -        -        -        -

	                                            I этап. Создание объектов
	инвестора

	Всего - 2009    3068    3604,9    3068    3604,9     -        -
	        -        -        -        -        -        -

	год

	                                 II этап. Создание объектов
	инфраструктуры, вторая очередь

	Всего - 2009   305,04   358,41     -        -        -        -     
	49,74    58,44    17,37    20,41    237,93   279,56

	год

	                                III этап. Создание объектов
	инфраструктуры, третья очередь

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Всего - 2011    128,7   188,31     -        -        -        -     
	128,7    188,31     -        -        -        -

	год

	Приложение N 2

	к паспорту регионального

	инвестиционного проекта

	"Создание первой очереди

	промышленной зоны "Заволжье"

	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
	ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЗАВОЛЖЬЕ"

	-----------------T---------------------------------------------------
	-----¬

	¦	Этапы реализации	¦	   Основные результаты реализации этапа
	регионального   	¦

	¦	 регионального  	¦	                 инвестиционного
	проекта                	¦

	¦	инвестиционного
	¦	                                                        	¦

	¦	    проекта    
	¦	                                                        	¦

	L----------------+---------------------------------------------------
	------

	                                  I этап

	2009 год         окончание строительства и запуск пивоваренного
	завода

	                  "САБМиллер" производительностью 3 млн. гектолитров

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в

	                  год со складскими мощностями (собственность
	открытого

	                  акционерного общества "САБМиллер РУС"),

	                  располагающегося на земельном участке площадью 38
	га,

	                  7-й проезд Инженерный (восточнее 44-го проезда

	                  Инженерного), Заволжский район г. Ульяновска

	                                  II этап

	2009 год         строительство второй очереди инфраструктуры

	                  промышленной зоны "Заволжье":

	                  автомобильная дорога "44-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 1,04 км (строительство второй
	очереди);

	                  автомобильная дорога "11-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 1,9 км;

	                  автомобильная дорога "42-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 1,27 км;

	                  автомобильная дорога "46-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 0,68 км (строительство первой
	очереди);

	                  автомобильная дорога "7-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 0,963 км;

	                  водопровод-1 (строительство второй очереди);

	                  ливневая канализация К2-1;

	                  ливневая канализация К2-2;

	                  ливневая канализация 42;

	                  строительство канализационной насосной станции;

	                  наружное освещение

	                                 III этап

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2011 год         строительство второй очереди инфраструктуры

	                  промышленной зоны "Заволжье":

	                  автомобильная дорога "7-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 0,998 км;

	                  автомобильная дорога "46-й проезд Инженерный"

	                  протяженностью 0,32 км (строительство второй
	очереди);

	                  водопровод-2;

	                  газопровод-1 и газопровод-2 давлением 0,6 МПа
	диаметром

	                  400 мм (строительство третьей очереди)

	---------------------------------------------------------------------
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.