МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 августа 2009 г. N 278-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-6 "КАСПИЙ" КМ 219+000
	- КМ 234+540, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление
	автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" проект
	"Капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" км 219+000 - км 234+540,
	Рязанская область", разработанный ООО "Инжсервис" и рассмотренный Саратовским филиалом ФГУ
	"Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 10.01.2008 N 7-08/СГЭ-0528/02), со
	следующими технико-экономическими показателями:

	длина участка дороги, км                                      15,3887

	ширина земляного полотна, м                                   15,0

	ширина проезжей части, м                                      7,5

	ширина обочин, м                                              3,75

	расчетная скорость, км/ч                                      120

	категория                                                     II

	тип покрытия                                                 
	асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                            А-II

	мосты и путепроводы                                           -

	общая сметная стоимость в базисных ценах, введенных

	с 01.01.2001, - всего, тыс. рублей                           
	88705,07

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                     85983,91

	оборудования, тыс. рублей                                    55,85

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                           2665,31

	стоимость 1 км кап. ремонта дороги в базисных ценах,

	введенных с 01.01.2001, - рублей                              5764299

	общая сметная стоимость в текущих ценах 4 квартала 2007 г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	с учетом НДС - всего, тыс. рублей                            
	460452,80

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                    
	446428,46

	оборудования, тыс. рублей                                    159,49

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                           13864,85

	стоимость 1 км кап. ремонта дороги в текущих ценах

	4 квартала 2007 г. с учетом НДС, рублей                      
	29921488

	продолжительность ремонта, мес.                               7.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали
	Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" (Т.В. Габуев) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.