МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 июля 2009 г. N 248-р
	О ВЫДЕЛЕНИИ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
	"СТРОИТЕЛЬСТВО (УСТРОЙСТВО) ИСКУССТВЕННОГО
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-4 "ДОН" ОТ
	МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО
	НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКАХ ПОДЪЕЗДА К Г. ВОРОНЕЖ КМ 6+000 -
	КМ 13+800, Г. ВОРОНЕЖ КМ 516+100 - КМ 521+720, КМ 540+800 - КМ
	543+100 С. РОГАЧЕВКА, КМ 600+100 - КМ 600+840 П. ПОДСОБНОЕ
	ХОЗЯЙСТВО, КМ 709+400 - КМ 710+850 С. В. МАМОН, ВОРОНЕЖСКАЯ
	ОБЛАСТЬ"

	В целях эффективного использования средств федерального бюджета выделить в составе
	проекта "Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-
	4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках
	подъезда к г. Воронеж км 6+000 - км 13+800, г. Воронеж км 516+100 - км 521+720, км 540+800 - км
	543+100 с. Рогачевка, км 600+100 - км 600+840 п. Подсобное хозяйство, км 709+400 - км 710+850 с. В.
	Мамон, Воронежская область", разработанного ООО "Спецэнергодорсервис" и рассмотренного
	Саратовским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 16.03.2009
	N 0147-09/СГЭ-0793/03), и утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от
	15.04.2009 N 105-р, пусковые комплексы со следующими технико-экономическими показателями:

	I пусковой комплекс в составе:

	Проекта "Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной
	дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
	участках подъезда к г. Воронеж км 6+000 - км 13+800, г. Воронеж км 516+100 - км 521+720, км
	540+800 - км 543+100 с. Рогачевка, км 600+100 - км 600+840 п. Подсобное хозяйство, км 709+400 - км
	710+850 с. В. Мамон, Воронежская область" в текущем уровне цен 1 квартала 2009 г. - 95099,93 тыс.
	рублей с учетом НДС.

	Мощность ввода I первого пускового комплекса 	строительства	 (устройства) линий
	искусственного электроосвещения - 7,8 км.

	категория дороги                                                  1б

	протяженность участка, км                                         7,8

	общая сметная стоимость электроосвещения дороги в базисных

	ценах, введенных с 01.01.2001, всего, тыс. рублей                
	12627,03

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                         
	10571,33

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	оборудование, тыс. рублей                                        
	363,18

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                               
	1692,52

	стоимость 1 км электроосвещения в базисных ценах, введенных с

	01.01.2001, тыс. рублей                                          
	1618,85

	общая сметная стоимость электроосвещения дороги в текущих

	ценах с учетом НДС на 1 квартал 2009 г., всего, тыс. рублей      
	95099,93

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                         
	87568,66

	оборудование, тыс. рублей                                        
	1071,37

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                               
	6459,90

	стоимость 1 км электроосвещения дороги в текущих ценах на 1

	квартал 2009 г. с учетом НДС, тыс. рублей                        
	12192,30.

	II пусковой комплекс в составе:

	Проекта "Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной
	дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
	участках подъезда к г. Воронеж км 6+000 - км 13+800, г. Воронеж км 516+100 - км 521+720, км
	540+800 - км 543+100 с. Рогачевка, км 600+100 - км 600+840 п. Подсобное хозяйство, км 709+400 - км
	710+850 с. В. Мамон, Воронежская область" в текущем уровне цен 1 квартала 2009 г. - 115171,43 тыс.
	рублей с учетом НДС.

	Мощность ввода 	строительства	 (устройства) линий искусственного электроосвещения - 10,11
	км.

	категория дороги                                                  1б

	протяженность участка, км                                        
	10,11

	общая сметная стоимость электроосвещения дороги в базисных

	ценах, введенных с 01.01.2001, всего, тыс. рублей                
	14266,30

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                         
	13515,74

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	оборудование, тыс. рублей                                        
	285,47

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                               
	465,09

	стоимость 1 км электроосвещения в базисных ценах, введенных с

	01.01.2001, тыс. рублей                                          
	1411,11

	общая сметная стоимость электроосвещения дороги в текущих

	ценах с учетом НДС на 1 квартал 2009 г., всего, тыс. рублей      
	115171,43

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                         
	111958,99

	оборудование, тыс. рублей                                        
	842,15

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                               
	2370,29

	стоимость 1 км электроосвещения дороги в текущих ценах на 1

	квартал 2009 г. с учетом НДС, тыс. рублей                        
	11391,83.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.