МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 сентября 2009 г. N 349-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ М-56 "ЛЕНА" ОТ НЕВЕРА ДО ЯКУТСКА КМ 980 - КМ 985,
	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Межрегиональная
	дирекция по дорожному 	строительству	 в Дальневосточном регионе России Федерального
	дорожного агентства" проект "Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до
	Якутска км 980 - км 985, Республика Саха (Якутия)", разработанный ОАО "Иркутскгипродорнии" и
	рассмотренный Хабаровским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное
	заключение от 04.08.2009 N 172-09/ХГЭ-0644/06), со следующими технико-экономическими
	показателями:

	техническая категория дороги                                  III

	протяженность участка, км                                     4,758

	основная расчетная скорость, км/ч                             100

	число полос движения                                          2

	ширина земляного полотна, м                                   12

	ширина проезжей части, м                                      7

	ширина обочин, м                                              2x2,5

	тип дорожной одежды                                          
	капитальный

	вид покрытия                                                 
	асфальтобетон

	продолжительность реконструкции, мес.                         21

	стоимостные показатели:

	в базисных ценах 2001 года без НДС, тыс. рублей              
	63243,18

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                             59219,30

	прочие затраты, тыс. рублей                                  4023,88

	(в том числе ПИР)  тыс. рублей                               2302,55

	(возвратные суммы)  тыс. рублей                              381,85

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в текущем уровне цен по состоянию на I кв. 2009 года

	с учетом НДС, тыс. рублей                                    
	335835,84

	(в том числе НДС)  тыс. рублей                               
	50853,10

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                            
	317249,66

	прочие затраты, тыс. рублей                                  18586,18

	(в том числе ПИР)  тыс. рублей                               7212,32

	(возвратные суммы)  тыс. рублей                              2045,65.

	2. Федеральному государственному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному
	строительству	 в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (В.А.
	Швецов) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную
	стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.