МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июля 2009 г. N 264-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" НА УЧАСТКЕ
	КМ 547+800 - КМ 555+900 В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" проект
	"Капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 547+800 - км
	555+900 в Пензенской области", разработанный ФГУП "РосдорНИИ" и рассмотренный Саратовским
	филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение государственной
	экспертизы от 15.12.2008 N 0657-08/СГЭ-0478/02 - не приводится), со следующими технико-
	экономическими показателями:

	техническая категория дороги                                  II

	протяженность дороги (участка), км                            8,1

	основная расчетная скорость, км/час                           120

	число полос движения                                          2

	ширина земляного полотна, м                                   15,0

	ширина проезжей части, м                                      7,5

	ширина обочин, м                                              3,75

	тип дорожной одежды                                          
	капитальный

	вид покрытия                                                 
	асфальтобетон

	расчетные нагрузки, кН                                        115

	мосты и путепроводы, шт./п.м                                  2/128

	водопропускные трубы, шт./п.м                                 3/63,5

	продолжительность капитального ремонта, мес.                  6

	стоимость 1 км капитального ремонта дороги в базисных

	ценах, введенных с 01.01.2001, рублей                         4532286

	стоимость 1 км капитального ремонта дороги в текущих

	ценах на 4 квартал 2008 г. с учетом НДС, рублей              
	25905348

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	общая сметная стоимость капитального ремонта дороги

	в базисных ценах, введенных с 01.01.2001 (без НДС),

	всего, тыс. рублей                                           
	36711,52

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                     36148,14

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                           563,38

	общая сметная стоимость капитального ремонта в

	текущих ценах с учетом НДС на 4 квартал 2008 г.,

	всего, тыс. рублей                                           
	209833,32

	в том числе:

	строительно-монтажных работ, тыс. рублей                    
	207728,88

	прочих работ и затрат, тыс. рублей                           2104,44.

	2. Федеральному государственному учреждению "Федеральное управление автомобильных
	дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" (А.С. Калашников) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.