Приложение

	к Приказу

	Министерства связи СССР

	от 24 января 1990 г. N 40

	Утверждаю

	Первый заместитель

	Министра связи СССР

	Г.Г.КУДРЯВЦЕВ

	22 января 1990 года

	Согласовано

	Заместитель начальника

	Главного управления

	"Электросвязь"

	А.Е.КРУПНОВ

	21 декабря 1989 года

	Заместитель начальника

	Главного управления 	проектирования

	и капитального 	строительства

	В.И.МАКСИМОВ

	21 декабря 1989 года

	Заместитель начальника

	Главного управления

	космической и радиосвязи

	А.М.ВАРБАНСКИЙ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	21 декабря 1989 года

	РУКОВОДСТВО ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ
	СООРУЖЕНИЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

	Руководство по приемке в эксплуатацию законченных 	строительством	 (реконструкцией и
	ремонтом) линейных 	сооружений	 проводной связи и проводного вещания разработано ССКТБ в
	связи с выходом в свет СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством
	объектов. Основные положения".

	В Руководстве учтен опыт строительно-монтажных и эксплуатационных организаций по
	применению на практике "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных 	сооружений
	проводной связи и проводного вещания" (М., "Радио и связь", 1985), а также учтены их замечания и
	предложения по совершенствованию Руководства.

	Руководство определяет порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством,
	реконструкцией и капитальным ремонтом линейных сооружений кабельных линий магистральных и
	внутризоновых первичных сетей, кабельных линий и воздушных линий местных первичных сетей
	(ГТС и СТС), внутрипроизводственной телефонной связи на предприятиях сельского хозяйства
	(ВПТС), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также сетей проводного вещания.

	Руководство согласовано с Главным управлением "Электросвязь", ГУПиКС и ГКРУ
	Министерства связи СССР.

	Выполнение требований Руководства является обязательным для всех организаций
	Министерства связи СССР, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
	приемку в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания, а также для
	организаций других ведомств, линейные сооружения проводной связи которых передаются для
	эксплуатации Министерству связи СССР.

	С введением в действие настоящего Руководства утрачивает силу "Руководство по приемке в
	эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М., "Радио и связь",
	1985).

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) <*> линейных
	сооружений проводной связи и проводного вещания <**> должна осуществляться в соответствии с
	требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
	Основные положения", п. п. 5.10 - 5.12 "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи,
	радиовещания и телевидения, ВСН-600-81" (см. Прилож. 1) и настоящего Руководства.

	--------------------------------

	<*> Далее - "строительство".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	<**> Далее - "линейные сооружения".

	Приемка линейных сооружений после окончания капитального ремонта производится в
	соответствии с требованиями настоящего Руководства.

	1.2. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Подготовленные в эксплуатацию
	объекты, законченные строительством, в соответствии с утвержденным проектом заказчик
	(застройщик) должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям.

	До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии,
	назначаемые заказчиком (застройщиком), должны проверить: соответствие объектов и
	смонтированного оборудования проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных работ
	требованиям строительных норм и правил, результаты испытаний и комплексного опробования
	оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг),
	включая выполненные мероприятия по обеспечению на них условий труда в соответствии с
	требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защиты природной среды и
	только после этого принять объекты".

	1.3. Законченные строительством в соответствии с проектом и подготовленные к эксплуатации
	линейные сооружения принимаются Государственными приемочными комиссиями в следующем
	составе:

	а) кабельные линии магистральных и внутризоновых первичных сетей;

	б) кабельные и воздушные линии связи городской и сельской телефонных сетей, а также
	линейные сооружения, построенные по плану расширения или реконструкции сетей действующих
	телефонных станций;

	в) внутрипроизводственная связь предприятий сельского хозяйства.

	1.4. Капитально отремонтированные линейные сооружения после выполнения всех видов
	работ в соответствии с технической документацией предъявляются исполнителем и принимаются в
	эксплуатацию приемочной комиссией, назначаемой приказом начальника предприятия связи,
	осуществляющего эксплуатацию данных сооружений.

	1.5. После подписания акта рабочей комиссией заказчики строительства сооружений связи
	(назначенные эксплуатационные организации) несут ответственность за сохранность всех
	сооружений, включенных в акты рабочих комиссий.

	1.6. При приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного
	вещания следует руководствоваться указаниями раздела 2 СНиП 3.01.04-87 об ответственности
	сторон.

	1.7. Дополнительные работы, не предусмотренные проектом, не могут задержать приемку
	законченных строительством сооружений связи.

	1.8. Эксплуатация сооружений (или их составных элементов), не принятых Государственной
	приемочной комиссией, не допускается.

	1.9. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной
	приемочной комиссией.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

	2.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.) организации-
	заказчика не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения
	генподрядчика и готовности линейных сооружений к приемке.

	2.2. В состав рабочих комиссий включаются представители: заказчика - председатель комиссии,
	генерального подрядчика, субподрядных, эксплуатационной и проектной организаций, органов
	государственного санитарного и пожарного надзоров, технической инспекции труда
	соответствующего состава профсоюзов, профсоюзной организации заказчика и эксплуатационной
	организации.

	2.3. В обязанности рабочих комиссий входит:

	а) проверка исполнительной документации на комплектность, полноту содержания и качество
	исполнения;

	б) проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной
	документации и согласованным отступлениям от проекта;

	в) освидетельствование выполненных работ, проверка их качества, проведение выборочных
	испытаний, проверок и электрических измерений в соответствии с помещенной в настоящем
	Руководстве технической программой приемки данного вида сооружения;

	г) проверка готовности линейных сооружений к эксплуатации;

	д) приемка линейных сооружений от генподрядчика с составлением акта о готовности их для
	предъявления Государственной приемочной комиссии.

	2.4. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком по
	согласованию с генеральным подрядчиком. При этом сроки работы комиссии по сооружениям
	должны быть в следующих ориентировочных пределах:

	а) при приемке магистральных и внутризоновых линий связи для коаксиальных кабелей - 12 км
	трассы в день, для симметричных кабелей - 20 км трассы в день;

	б) при приемке линейных сооружений ГТС общей емкостью магистралей: до 2000 пар - 5 дней,
	от 2000 до 4000 пар - 8 дней, от 4000 до 6000 пар - 10 дней, от 6000 до 10000 пар - 12 дней.

	При приемке линейных сооружений очередями:

	кабелей межстанционной связи - до 10 дней;

	магистральных кабелей - до 10 дней;

	шкафного района распределительной и абонентской сети - до 1 дня.

	Кабельной канализации протяженностью 1 км трассы при емкости блока: до 12 каналов - не
	более 2 дней, до 24 каналов - не более 3 дней, до 36 каналов - не более 4 дней, до 48 каналов - не
	более 5 дней;

	в) при приемке линейных сооружений сельской связи:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	соединительных линий - 25 км трассы линии в 2 дня;

	абонентских линий - согласно срокам, указанным в п. "б";

	внутрипроизводственной связи - до 3 дней;

	сети проводного вещания на один магистральный фидер с распределительными абонентскими
	линиями - до 3 дней;

	г) при приемке воздушных линий связи - 25 км линии в день;

	д) при приемке оптических кабелей связи руководствоваться сроками, указанными в п. п. "а" и
	"б".

	2.5. Рабочими комиссиями принимаются для предъявления Государственной комиссии
	следующие отдельные законченные сооружения по мере их готовности:

	а) участки ОУП-ОУП магистральных и внутризоновых кабельных линий связи, участки НУП-
	НУП (НРП-НРП), соединительные кабельные линии различного назначения; законченные
	строительством кабельные переходы через водные преграды.

	В случае обслуживания участка ОУП-ОУП несколькими эксплуатационными предприятиями
	или при выполнении на нем работ несколькими субподрядными организациями допускается приемка
	законченных строительством участков НУП-НУП (НРП-НРП) группами в пределах зон обслуживания
	(строительства);

	б) кабельные линии межстанционной и межузловой связи, магистральные кабельные линии вне
	зависимости от готовности питаемых шкафных районов и шкафные районы вне зависимости от
	питающих магистралей;

	в) кабельные и воздушные линии межстанционной сельской связи, кабельные и воздушные
	линии абонентских телефонных сетей; кабельные и воздушные линии внутрипроизводственной
	связи сельскохозяйственных предприятий;

	г) сети проводного вещания или законченные строительством их линейные участки;

	д) законченные строительством (реконструкцией) усилительные участки воздушных линий
	связи.

	2.6. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям исполнительную документацию.
	Она должна состоять из рабочих чертежей в объеме, полученном от заказчика, откорректированных
	строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, а
	также из документов по монтажным работам, электрическим измерениям, испытаниям и проверкам.

	Исполнительная документация предъявляется в одном экземпляре.

	2.7. Акты рабочей комиссии о готовности законченных строительством линейных сооружений
	для предъявления Государственной приемочной комиссии составляются по форме, приведенной в
	Прилож. 2, в шести экземплярах (три - заказчику, два - генподрядчику, один - эксплуатационной
	организации).

	2.8. Исполнительная документация и акты, указанные в п. 2.7, после окончания работы рабочей
	комиссии должны быть переданы заказчику.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
	ПОРЯДОК РАБОТЫ

	3.1. Приемка в эксплуатацию объектов сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также
	экспериментальных объектов независимо от их сметной стоимости производится государственными
	комиссиями, назначаемыми:

	а) Министерством связи СССР по объектам, входящим в его систему, если капитальные
	вложения на строительство выделялись Министерством связи СССР;

	б) Советом Министров союзной республики по объектам республиканских министерств связи,
	если капитальные вложения на строительство выделялись Советом Министров союзной республики.

	3.2. Приемка в эксплуатацию объектов сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится
	государственными приемочными комиссиями, назначаемыми органами, утвердившими проект
	строительства и сводно-финансовый расчет.

	3.3. Государственные приемочные комиссии назначаются не позднее чем за три месяца до
	установленного срока ввода объекта в эксплуатацию. При этом должны быть определены даты
	начала и окончания работы комиссий с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

	3.4. Председателями государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию
	объектов, указанных в п. 3.1, назначаются руководящие работники министерств и ведомств-
	заказчиков, а также непосредственно подчиненных им предприятий, учреждений и организаций.

	Председателями государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию
	линейных сооружений, указанных в п. 3.2, назначаются руководящие работники предприятий
	органов, назначивших эти комиссии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и
	организаций, непосредственно подчиненных этим органам.

	В состав государственных приемочных комиссий включаются представители: генерального
	подрядчика и субподрядчика, эксплуатационной и проектной организаций, органов санитарного и
	пожарного надзора, технической инспекции труда совета профсоюзов, профсоюзного органа
	эксплуатационной организации, финансирующего банка и других заинтересованных организаций.

	3.5. Заказчик представляет Государственной приемочной комиссии всю документацию,
	полученную рабочими комиссиями от генерального подрядчика, а также:

	а) акты рабочих комиссий о готовности законченных строительством сооружений для
	предъявления Государственной приемочной комиссии;

	б) утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-
	экономических показателях принимаемых в эксплуатацию сооружений;

	в) справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями;

	г) справку заказчика или назначенной эксплуатационной организации о подготовленности
	объекта связи, его очереди или пускового комплекса к нормальной эксплуатации и выполнении
	функций, предусмотренных проектом;

	д) перечень проектных организаций, участвовавших в 	проектировании	 объекта;

	е) документы об отводе земельных участков, геодезической разбивке и геологии, согласованные
	с экологическими службами, генеральные планы участков с нанесенными изменениями против

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	проекта;

	ж) справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и генподрядчиком
	(кроме "прочих затрат" сводной сметы, уточняемых заказчиком после оплаты объекта по акту
	Государственной комиссии, и последних затрат, компенсируемых подрядчику заказчиком);

	з) справку о соответствии вводимых в действие мощностей мощностям, предусмотренным
	проектом;

	и) другую имеющуюся у заказчика документацию по объекту.

	3.6. В обязанности государственных приемочных комиссий входят:

	а) проверка готовности объекта к приемке в эксплуатацию (в том числе проверка устранения
	недоделок, выявленных рабочей комиссией);

	б) проверка наличия и содержания актов рабочих комиссий на приемку 	зданий,	 сооружений,
	оборудования, линий и каналов связи;

	в) проверка представленных заказчиком справок о вводимых мощностях и фактической
	стоимости строительства в сопоставлении с утвержденной проектно-сметной документацией;

	г) проверка качества выполненных работ и законченного строительством объекта в целом;

	д) составление акта приемки в эксплуатацию объекта связи по форме, указанной в Прилож. 3.

	3.7. Акт о приемке в эксплуатацию линейных сооружений и докладная записка к нему
	составляются в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения следует представить в
	орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два передать заказчику и один -
	генеральному подрядчику.

	3.8. Для проверки качества принимаемых сооружений Государственная приемочная комиссия в
	необходимых случаях назначает дополнительные испытания и измерения оборудования, линий и
	каналов связи в выборочном порядке.

	3.9. При необходимости Государственная приемочная комиссия организует в своем составе
	специализированные подкомиссии для приемки отдельных сооружений и работ.

	3.10. Приемка объекта связи Государственной приемочной комиссией должна быть закончена в
	срок, установленный органом, назначившим комиссию. В случае необходимости только этим
	органом может быть продлен установленный срок приемки.

	3.11. Акты приемки в эксплуатацию объектов связи рассматриваются и утверждаются органом,
	назначившим Государственную приемочную комиссию, в месячный срок после его подписания.

	3.12. Государственная приемочная комиссия при выявлении непригодности объекта к
	эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, а
	копии направляет заказчику и генеральному подрядчику.

	3.13. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента
	утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

	4. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	РЕМОНТА

	4.1. Приемка в эксплуатацию капитально отремонтированных линейных сооружений
	производится приемочной комиссией, назначаемой приказом начальника предприятия связи,
	которое обслуживает данные сооружения. Комиссия назначается ежегодно в начале ремонтного
	сезона.

	4.2. В состав приемочной комиссии включаются: представитель руководства эксплуатационной
	организации (председатель), представители линейных служб эксплуатационной организации и
	представитель организации (подразделения), выполнявшей работы. Приемка производится с
	участием работника, обслуживающего принимаемые сооружения.

	4.3. До предъявления к приемке капитально отремонтированных сооружений главный инженер
	эксплуатационного предприятия обязан организовать их предварительное освидетельствование с
	целью проверки готовности этих сооружений к приемке с оформлением справки готовности
	капитально отремонтированных сооружений (см. Прилож. 4).

	4.4. Приемка капитально отремонтированных линейных сооружений должна быть начата
	приемочной комиссией не позднее чем через пять дней после предъявления их к приемке.

	4.5. На капитально отремонтированные линейные сооружения организация, выполнявшая
	работы, представляет исполнительную документацию.

	4.6. В ходе приемки комиссия осматривает 100% отремонтированных сооружений,
	руководствуясь технической программой на данный вид сооружения. Все характеристики
	сооружений должны соответствовать технической документации на выполнение капитального
	ремонта, действующим нормам, ГОСТ, ТУ.

	4.7. Акт приемки работ по капитальному ремонту линейных сооружений оформляется в трех
	экземплярах по форме, указанной в Прилож. 5. Акт утверждается главным инженером предприятия,
	назначившего приемочную комиссию.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИЕМКИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ,
	РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
	ЛИНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ
	ВОЛС)
	А. Состав и объем проверок

	-----T-------------T------------T--------------------------T---------
	-----¬

	¦	 N  	¦	Наименование 	¦	   Число    	¦	   Содержание и методы    	¦	 
	Примечания  	¦

	¦	п/п 	¦	   работ и   	¦	проверок или	¦	         проверок        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	мероприятий, 	¦	   объем    	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	 проводимых  	¦	 испытаний  	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	 приемочной  	¦	    <*>     	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	  комиссией  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	+----+-------------+------------+--------------------------+---------
	-----+

	¦	 1  	¦	      2      	¦	     3      	¦	            4             	¦	     
	5       	¦

	+----+-------------+------------+--------------------------+---------
	-----+

	¦	1.  	¦	Ознакомление 	¦	100%        	¦	Производится ознакомление
	¦	              	¦

	¦	    	¦	с проектной  	¦	            	¦	с рабочими чертежами и   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	документацией	¦	            	¦	сметами. Делаются необхо-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	димые выписки для
	проверки	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	выполненных работ в
	натуре	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	2.  	¦	Проверка ис- 	¦	То же       	¦	Проверяется
	представленная	¦	              	¦

	¦	    	¦	полнительной 	¦	            	¦	подрядчиком
	исполнительная	¦	              	¦

	¦	    	¦	документации 	¦	            	¦	документация на соответст-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вие ее требованиям дейст-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вующего Руководства по   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	составлению
	исполнительной	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	документации, полноту    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	содержания и качество    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	исполнения. Анализируются
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	протоколы электрических  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	измерений и испытаний,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	содержащиеся в исполни-  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	тельной документации, на 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	предмет соответствия их  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	данных нормам. Особое    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	внимание следует уделить 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	рассмотрению актов на    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	скрытые работы, проверяя 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	полноту их содержания,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие подписей предста-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вителей заказчика (эксплу-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	атации), охват актами    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	всего объема скрытых
	работ	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.  	¦	Осмотр и про-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	верка кабель-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ной трассы   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.1.	¦	Внешний      	¦	30% трассы  	¦	Проверяется: наличие     
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	осмотр       	¦	(сложные    	¦	замерных столбиков и КИП,
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	участки     	¦	знаков в местах пересече-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	проверить   	¦	ния кабеля с подземными  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	пешком)     	¦	коммуникациями; качество 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	надписей на замерных стол-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	биках и знаках, качество 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	засыпки траншей и котлова-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	нов; расчистка и планиров-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ка трассы, очистка просек
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.2.	¦	Проверка     	¦	2 - 5 точек 	¦	Проверяется наличие и     	¦	При
	наличии   	¦

	¦	    	¦	правильности 	¦	на длине    	¦	правильность привязок     	¦	неточных
	при- 	¦

	¦	    	¦	привязки     	¦	усилительно-	¦	подземных конструктивных  	¦	вязок
	произво-	¦

	¦	    	¦	             	¦	го участка  	¦	элементов кабельной трассы	¦	дится
	проверка	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	(кабеля, муфт, подземных 
	¦	удвоенного ко-	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	переходов)                	¦	личества
	точек	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.3.	¦	Проверка     	¦	1 - 2       	¦	Проверяется качество     
	¦	Особое        	¦

	¦	    	¦	глубины зале-	¦	котлована   	¦	установки замерных       
	¦	внимание      	¦

	¦	    	¦	гания муфт,  	¦	            	¦	столбиков у муфт, монтажа
	¦	следует       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	выкладки     	¦	            	¦	чугунных муфт и проводов  	¦	обратить
	на   	¦

	¦	    	¦	кабеля в     	¦	            	¦	КИП, выкладки кабеля.     	¦	выкладку
	муфт 	¦

	¦	    	¦	котлованах и 	¦	            	¦	Проверка производится    
	¦	оптических    	¦

	¦	    	¦	осмотр смон- 	¦	            	¦	путем вскрытия котлована 
	¦	кабелей       	¦

	¦	    	¦	тированных   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	муфт без их  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	вскрытия     	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.4.	¦	Осмотр и     	¦	Все переходы	¦	Осматриваются места распо-	¦	На
	судоходных 	¦

	¦	    	¦	проверка     	¦	            	¦	ложения разветвительных  
	¦	реках         	¦

	¦	    	¦	кабельных    	¦	            	¦	муфт на речных переходах
	и	¦	проверка      	¦

	¦	    	¦	переходов    	¦	            	¦	местах спуска кабеля к во-
	¦	производится  	¦

	¦	    	¦	через водные 	¦	            	¦	де, а также оградительные 	¦	совместно
	с   	¦

	¦	    	¦	преграды     	¦	            	¦	створные знаки речных пе-
	¦	техническими  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	реходов с проверкой дейст-
	¦	участками     	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вия специальных
	устройств,	¦	управления    	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	если таковые
	предусмотрены	¦	речного       	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	рабочими чертежами       
	¦	пароходства   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.5.	¦	Проверка     	¦	30%         	¦	Проверяется: выкладка    
	¦	Особое        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	качества     	¦	смотровых   	¦	кабелей и муфт в
	смотровых	¦	внимание      	¦

	¦	    	¦	прокладки    	¦	устройств   	¦	устройствах; состояние ка-	¦	обратить
	на   	¦

	¦	    	¦	кабелей в    	¦	            	¦	белей (наличие вмятин, пе-
	¦	выкладку      	¦

	¦	    	¦	кабельной    	¦	            	¦	режимов, недопустимых из- 	¦	запасов и
	муфт	¦

	¦	    	¦	канализации  	¦	            	¦	гибов, задиров оболочки); 	¦	кабелей
	ВОЛС  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	заделка отверстий каналов
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.6.	¦	Проверка     	¦	100% вводов 	¦	Проверяется: соответствие
	¦	              	¦

	¦	    	¦	устройства   	¦	в ОУП и МТС 	¦	выполненных вводов
	рабочим	¦	              	¦

	¦	    	¦	вводов в МТС,	¦	            	¦	чертежам, устройство     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ОУП          	¦	            	¦	герметичного блока труб и
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	герметизация каналов,    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	выкладка кабелей и муфт
	на	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	консолях в шахтах.       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	Проверка осуществляется  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	внешним осмотром вводов  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	внутри помещений         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.  	¦	Проверка     	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабельной    	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	канализации  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.1.	¦	Проходимость 	¦	Выборочно,  	¦	Проверяется протягивание 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	свободных    	¦	по 1 - 3    	¦	по каналам пробного      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	каналов      	¦	канала на   	¦	цилиндра                 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	трубопровода 	¦	трассе      	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.2.	¦	Проверка     	¦	30%         	¦	Проверяется: соответствие
	¦	Проверка      	¦

	¦	    	¦	смотровых    	¦	смотровых   	¦	типов смотровых устройств
	¦	проводится    	¦

	¦	    	¦	устройств    	¦	устройств   	¦	рабочим чертежам, их      	¦	совместно
	с   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	размеров; количество     
	¦	проверкой     	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	каналов по направлениям;  	¦	п.
	3.5        	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	оборудование смотровых   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	устройств ершами,        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кронштейнами, консолями, 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	приспособлением для
	запора	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.  	¦	Осмотр и про-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	верка НУП и  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	унифицирован-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	ных грунтовых	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	контейнеров  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.1.	¦	Качество     	¦	10%         	¦	Проверяется: правильность
	¦	              	¦

	¦	    	¦	строительных 	¦	            	¦	установки цистерны НУП;  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	работ        	¦	            	¦	качество стен, полов,    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	дверей, наземной части   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	обваловки и одерновки; ка-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	чество установки НРП ВОЛС
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.2.	¦	Качество     	¦	2 - 3 НУП   	¦	Проверяется: качество мон-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	устройства   	¦	(НРП) на    	¦	тажа ввода кабелей; креп-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	вводов       	¦	секции ОУП- 	¦	ление оконечных устройств
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабелей и    	¦	ОУП         	¦	УОК и КАЕ, муфт ГМС в цис-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	монтаж       	¦	            	¦	тернах НУП и унифицирован-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	оконечных    	¦	            	¦	ных грунтовых
	контейнерах;	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабельных    	¦	            	¦	правильность расположения
	¦	              	¦

	¦	    	¦	устройств,   	¦	            	¦	стоек ВКС и боксов на
	них;	¦	              	¦

	¦	    	¦	муфт АРУ     	¦	            	¦	монтаж муфт АРУ; ввод    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабелей в НРП ВОЛС       
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.3.	¦	Монтаж цепей 	¦	То же       	¦	Проверка внешним осмотром
	¦	              	¦

	¦	    	¦	сигнализации,	¦	            	¦	на качество исполнения   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабелей слу- 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	жебной связи 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	телеуправле- 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ния          	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.4.	¦	Проверка лю- 	¦	-"-         	¦	Проверяется:
	безотказность	¦	              	¦

	¦	    	¦	ков, лестниц,	¦	            	¦	действия устройства
	запора	¦	              	¦

	¦	    	¦	наличия      	¦	            	¦	и герметизации люка, креп-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	защитных     	¦	            	¦	ление лестниц, комплект- 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	средств      	¦	            	¦	ность электрозащитных    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	средств и
	действительность	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	срока испытания их       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.  	¦	Проверка сис-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	темы содержа-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ния кабелей и	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	унифицирован-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	ных грунтовых	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	контейнеров  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	под          	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	постоянным   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	избыточным   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	давлением    	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.1.	¦	Монтаж       	¦	10% НУП     	¦	Производится внешний     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	контрольно-  	¦	            	¦	осмотр и анализ
	протоколов	¦	              	¦

	¦	    	¦	осушительных 	¦	            	¦	проверок оборудования,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	установок и  	¦	            	¦	осмотр смонтированного   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	воздуховодов 	¦	            	¦	оборудования, проверка
	его	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	работы, внешний осмотр   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вводно-кабельных         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	устройств,               
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	газонепроницаемых муфт   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.2.	¦	Проверка     	¦	Все кабели  	¦	Анализ протоколов испыта-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	герметичности	¦	            	¦	ний и сопоставление
	данных	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабелей      	¦	            	¦	с установленными нормами 
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	7.  	¦	Проверка за- 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	щиты линейных	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	сооружений от	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	коррозии     	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	7.1.	¦	Электрические	¦	100%        	¦	Проверка производится по 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	дренажи и    	¦	            	¦	документации на монтаж и 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	катодные     	¦	            	¦	протоколам               
	¦	              	¦

	¦	    	¦	станции:     	¦	            	¦	электроизмерений         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	- монтаж и   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	установка    	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	- контроль   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	электрических	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	параметров   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	7.2.	¦	Протекторные 	¦	Выборочно   	¦	Проверяются протоколы    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	установки    	¦	            	¦	электрических измерений  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	эффективности
	протекторной	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	защиты                   
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	Проверка     	¦	То же       	¦	Проверяются акты на       	¦	По
	решению    	¦

	¦	    	¦	защитных и   	¦	            	¦	скрытые работы, протоколы
	¦	комиссии      	¦

	¦	    	¦	линейно-     	¦	            	¦	электрических измерений  
	¦	производятся  	¦

	¦	    	¦	защитных     	¦	            	¦	                          	¦	1 - 2
	раскопки	¦

	¦	    	¦	заземлений на	¦	            	¦	                         
	¦	участков      	¦

	¦	    	¦	НУП (НРП)    	¦	            	¦	                         
	¦	заземлений    	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	7.3.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	Проверяются протоколы    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	эффективности	¦	            	¦	электроизмерений разности
	¦	              	¦

	¦	    	¦	электрохими- 	¦	            	¦	потенциалов "кабель-
	земля"	¦	              	¦

	¦	    	¦	ческой защиты	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	7.4.	¦	Проверка     	¦	Выборочно   	¦	Внешний осмотр, проверка 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	контрольно-  	¦	3 - 10%     	¦	монтажа КИП              
	¦	              	¦

	¦	    	¦	измерительных	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	пунктов      	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	8.  	¦	Проверка     	¦	То же       	¦	Проверка и анализ актов  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	защиты       	¦	            	¦	на скрытые работы, в необ-
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	кабельных    	¦	            	¦	ходимых случаях проверка 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	линий от     	¦	            	¦	на трассе расположения по
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ударов молний	¦	            	¦	отношению к кабелю и     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	глубины прокладки
	защитных	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проводов                 
	¦	              	¦

	L----+-------------+------------+--------------------------+---------
	------

	--------------------------------

	<*> В графе 3 указано минимальное число проверок. При обнаружении дефектов число
	проверок увеличивается до выяснения степени дефектности выполненных работ.

	Б. Состав и объем приемосдаточных электрических измерений

	Для приемочной комиссии основными документами, характеризующими электрическое
	состояние линейно-кабельных сооружений кабельных линий магистральных, внутризоновых
	первичных сетей и ВОЛС, являются протоколы электрических измерений, подписанные
	представителями заказчика (эксплуатационной организации), находящиеся в составе представленной
	подрядчиком исполнительной документации.

	По решению приемочной комиссии могут быть проведены выборочные измерения и испытания
	в количестве 5 - 10% от объемов, приведенных в действующем ОСТе 45.01-86 "Линии передачи
	кабельные первичной сети ЕАСС. Нормы электрические на элементарные кабельные участки и
	кабельные секции аналоговых и цифровых систем передачи ОКСТУ 5290".

	На ВОЛС по решению комиссии могут быть проведены выборочные электрические измерения
	затухания оптических волокон кабеля на регенерационных участках (100% от общего объема
	измерений).

	При наличии в конструкции кабеля медных жил и металлических армирующих элементов по
	решению комиссии могут производиться также следующие электрические измерения в объеме 100%
	от общего объема измерений:

	а) электрического сопротивления каждой медной жилы относительно остальных медных жил,
	соединенных металлическими элементами;

	б) электрического сопротивления изоляции наружной полиэтиленовой оболочки, измеренного
	между всеми металлическими элементами и землей;

	в) испытательного напряжения между медными жилами;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	г) испытательного напряжения между любой жилой и армирующими элементами,
	соединенными вместе.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИЕМКИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ,
	РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ЛИНЕЙНЫХ
	СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ (ГТС И СТС) И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
	А. Состав и объем проверок

	-----T-------------T------------T--------------------------T---------
	-----¬

	¦	 N  	¦	Наименование 	¦	   Число    	¦	   Содержание и методы    	¦	 
	Примечания  	¦

	¦	п/п 	¦	   работ и   	¦	проверок или	¦	         проверок        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	мероприятий, 	¦	   объем    	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	 проводимых  	¦	 испытаний  	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	   рабочей   	¦	    <*>     	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	 приемочной  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	  комиссией  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	+----+-------------+------------+--------------------------+---------
	-----+

	¦	 1  	¦	      2      	¦	     3      	¦	            4             	¦	     
	5       	¦

	+----+-------------+------------+--------------------------+---------
	-----+

	¦	1.  	¦	Ознакомление 	¦	100%        	¦	Производится ознакомление
	¦	              	¦

	¦	    	¦	с проектной  	¦	            	¦	с рабочими чертежами и   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	документацией	¦	            	¦	сметами. Делаются        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	необходимые выписки для  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проверки соответствия    
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	выполненных работ в
	натуре	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	2.  	¦	Проверка ис- 	¦	То же       	¦	Проверяется
	представленная	¦	              	¦

	¦	    	¦	полнительной 	¦	            	¦	подрядчиком
	исполнительная	¦	              	¦

	¦	    	¦	документации 	¦	            	¦	документация на соответст-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вие ее действующему Руко-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	водству по составлению   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	исполнительной документа-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ции, полноту содержания и
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	качество исполнения. Све-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ряется с натурой соответ-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ствие картограмм
	кабельной	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	сети, схем шкафных
	районов	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	и карточек вводов. Особое
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	внимание следует уделить 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	рассмотрению актов на    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	скрытые работы, проверяя 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	охват ими всего объема   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	работ, полноту
	содержания,	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие подписей         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	представителей заказчика 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	(эксплуатации)           
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.  	¦	Кабельная    	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	канализация  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.1.	¦	Внешний      	¦	20%         	¦	Проверяется: техническое 
	¦	Гидроизоляция 	¦

	¦	    	¦	осмотр       	¦	            	¦	состояние смотровых      
	¦	смотровых     	¦

	¦	    	¦	смотровых    	¦	            	¦	устройств, качество      
	¦	устройств     	¦

	¦	    	¦	устройств    	¦	            	¦	заделки швов и штукатурки
	¦	проверяется   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	стен, перекрытий,         	¦	по актам
	на   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	горловины; правильность  
	¦	скрытые       	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	расположения кронштейнов
	и	¦	работы        	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	консолей и качество их   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	окраски; количество      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	каналов по направлениям; 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ввод блока кабельной     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	канализации; заделка     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	концов труб в смотровых  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	устройствах, прочность   
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	заделки ершей; состояние 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	люков, крышек; наличие   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	приспособлений для запора
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	смотровых устройств;     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие гидроизоляции    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	(если она предусмотрена  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проектом)                
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.2.	¦	Внешний      	¦	100%        	¦	Проверяется: правильность
	¦	              	¦

	¦	    	¦	осмотр шахт, 	¦	            	¦	устройства               
	¦	              	¦

	¦	    	¦	коллекторов  	¦	            	¦	металлоконструкций,      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вводного блока каналов;  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	пригодность каналов для  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	герметизации с помощью   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	герметизирующих устройств
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	3.3.	¦	Проверка     	¦	10% из числа	¦	Проверяется протягиванием
	¦	              	¦

	¦	    	¦	проходимости 	¦	свободных   	¦	по каналам контрольных   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	каналов      	¦	каналов, но 	¦	цилиндров                
	¦	              	¦

	¦	    	¦	трубопроводов	¦	не менее од-	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	ного канала 	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.  	¦	Кабельные    	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	линии        	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.1.	¦	Внешний      	¦	100% кабелей	¦	Проверяется: распределение	¦	При
	осмотре   	¦

	¦	    	¦	осмотр       	¦	и муфт в    	¦	кабелей по направлениям и
	¦	особое        	¦

	¦	    	¦	кабелей и    	¦	колодцах,   	¦	их емкость по нумерацион-
	¦	внимание      	¦

	¦	    	¦	муфт, смонти-	¦	проверяемых 	¦	ным кольцам, правильность
	¦	обращается на 	¦

	¦	    	¦	рованных в   	¦	по п. 3.1   	¦	выкладки кабеля и размеще-
	¦	выкладку      	¦

	¦	    	¦	смотровых    	¦	            	¦	ния его на консолях, нали-	¦	кабелей
	и     	¦

	¦	    	¦	устройствах  	¦	            	¦	чие прокладок; перепайка 
	¦	муфт          	¦

	¦	    	¦	кабельной    	¦	            	¦	металлических оболочек,  
	¦	оптических    	¦

	¦	    	¦	канализации, 	¦	            	¦	наличие предупредительных
	¦	кабелей       	¦

	¦	    	¦	коллекторах, 	¦	            	¦	знаков на кабелях, по    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	шахтах,      	¦	            	¦	которым подается дистанци-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кроссе,      	¦	            	¦	онное питание; отсутствие
	¦	              	¦

	¦	    	¦	тоннелях;    	¦	            	¦	вмятин, пережимов, трещин
	¦	              	¦

	¦	    	¦	установка НРП	¦	            	¦	на оболочках; качество   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	в колодцах на	¦	            	¦	пайки (сварки) муфт;     
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	соединитель- 	¦	            	¦	размещение и установка   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ных линиях   	¦	            	¦	НРП, выкладка кабелей,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	включенных в НРП         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.2.	¦	Осмотр трассы	¦	30% длины   	¦	Проверяется: соответствие 	¦	Комиссия
	про- 	¦

	¦	    	¦	кабелей,     	¦	трассы, 2 - 	¦	трассы рабочим чертежам,  	¦	изводит
	две-  	¦

	¦	    	¦	проложенных в	¦	3 котлована 	¦	наличие замерных          	¦	три
	контроль- 	¦

	¦	    	¦	грунте       	¦	с муфтами   	¦	столбиков, качество       	¦	ные
	раскопки  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	надписей на них,          	¦	на
	трассе     	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	расположение и состояние 
	¦	прокладки     	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	муфт в котловане,        
	¦	бронированного	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	правильность заливки      	¦	кабеля с
	целью	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	чугунных муфт кабельной   	¦	проверки
	каче-	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	массой и полиэтиленовых   	¦	ства
	засыпки  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	компаундом на кабелях СТС 	¦	траншей,
	глу- 	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	и ПВ; выкладка запасов    	¦	бины
	прокладки	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабеля в котловане,      
	¦	кабеля,       	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	качество засыпки траншей
	и	¦	правильности  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	котлованов;               	¦	его
	укладки,  	¦

	¦	    	¦	             	¦	1 - 2       	¦	проверка кабельных перехо-	¦	наличия
	защиты	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	перехода на 	¦	дов через автомобильные, 
	¦	от            	¦

	¦	    	¦	             	¦	трассе      	¦	железные дороги и мосты,
	и	¦	механических  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	подземные коммуникации   
	¦	повреждений   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.3.	¦	Осмотр и     	¦	100%        	¦	Осматриваются места      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	проверка     	¦	переходов   	¦	расположения муфт на     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабельных    	¦	            	¦	береговых концах речных  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	переходов    	¦	            	¦	переходов. Осматриваются 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	через водные 	¦	            	¦	оградительные створные   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	преграды     	¦	            	¦	знаки речных переходов с 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проверкой действия       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	специальных устройств,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	если таковые
	предусмотрены	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	рабочими чертежами       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.4.	¦	Проверка     	¦	100%        	¦	Проверяется: габариты под-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	внешним      	¦	            	¦	вески кабеля;
	соответствие	¦	              	¦

	¦	    	¦	осмотром     	¦	            	¦	диаметра проволоки или   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	подвесных    	¦	            	¦	стального каната емкости 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабельных    	¦	            	¦	подвешенного кабеля, нали-
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	линий        	¦	            	¦	чие заземлений каната, ка-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	беля; правильность крепле-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ния каната и кабеля на   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	оконечных, промежуточных 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	опорах; соответствие     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	стрелы провеса нормам;   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	правильность установки   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	подвесов и соответствие
	их	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	диаметрам подвешенного ка-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	беля; отсутствие дефектов
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	на оболочке кабеля; качес-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	тво монтажа муфт и пра-  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вильность их
	расположения;	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие обмотки кабеля   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	просмоленной бечевой при 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	выводе на кабельные опоры
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	и на запасах у           
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	промежуточных опор       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.5.	¦	Кабельные    	¦	То же       	¦	Проверяется:
	протяженность	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	сети внутри  	¦	            	¦	и емкость кабелей на     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	 	зданий	 и     	¦	            	¦	соответствие данным,     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	вводы в них  	¦	            	¦	указанным в карточках    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	вводов; прокладка кабеля 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	по стенам зданий и на    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	лестничных клетках и креп-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ление его; защита кабелей
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	от механических          
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	повреждений; устройства  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	выводов кабеля на стены  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	зданий, а также кабельные
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	столбы и стойки. При     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличии скрытых проводок 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	осматриваются: проходные 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	поворотные и смотровые   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ниши и установленные в
	них	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	распределительные коробки
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.6.	¦	Проверка     	¦	100%        	¦	Проверяется соответствие 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	устройств    	¦	            	¦	устройств защиты
	проектным	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	защиты кабеля	¦	            	¦	решениям по документации 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	от коррозии: 	¦	            	¦	на монтаж и по протоколам
	¦	              	¦

	¦	    	¦	а) электри-  	¦	            	¦	электроизмерений         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ческие дрена-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	жи и катодные	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	станции:     	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	- установка и	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	монтаж       	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	- контроль   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	электрических	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	параметров   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	б) протектор-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ная защита   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.7.	¦	Осмотр и про-	¦	То же       	¦	Проверяется: правильность
	¦	При           	¦

	¦	    	¦	верка распре-	¦	            	¦	установки шкафов и       
	¦	капитальном   	¦

	¦	    	¦	делительных  	¦	            	¦	качество их покраски,    
	¦	ремонте       	¦

	¦	    	¦	телефонных   	¦	            	¦	наличие запоров, качество
	¦	дополнительно 	¦

	¦	    	¦	шкафов,      	¦	            	¦	заливки шкафных досок;   
	¦	проверяется   	¦

	¦	    	¦	оконечных    	¦	            	¦	крепление и состояние    
	¦	правильность  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	устройств    	¦	            	¦	боксов, защитных полос,  
	¦	выполнения    	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	рамок соединительных     
	¦	кроссировок   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	линий, кабельных ящиков, 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	плинтов, клеммных винтов;
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие нумерации        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.8.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	Проверяется работа и     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	содержания   	¦	            	¦	монтаж компрессорно-     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	кабеля под   	¦	            	¦	сигнальных установок с   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	постоянным   	¦	            	¦	включенными кабелями, про-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	избыточным   	¦	            	¦	изводится внешний осмотр 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	давлением    	¦	            	¦	всех газонепроницаемых   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	муфт. Анализируются      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	представленные акты      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проверки герметичности   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабелей и сопоставляются
	с	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	показаниями ротаметров   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	распределительных
	стативов	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	4.9.	¦	Осмотр НУП и 	¦	100%        	¦	Проверяется: правильность
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	НРП          	¦	            	¦	установки НУП,           
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	коммутационной коробки на
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	железобетонных
	приставках;	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	защита наружной части    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабелей, подводимых к    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	коммутационной коробке;  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	разделка и включение жил 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабеля в коробке;
	качество	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	установки НРП ВОЛС       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.  	¦	Абонентские  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	пункты       	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	5.1.	¦	Внешний      	¦	25%         	¦	Проверяются: прокладка и 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	осмотр и     	¦	            	¦	крепление однопарного про-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	проверка     	¦	            	¦	вода от распределительной
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	коробки до телефонного ап-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	парата; защита проводки
	от	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	механических повреждений;
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	взаимное расположение    
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	однопарного провода с про-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	водами проводного вещания
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	и электроосвещения;      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	исправность защитных     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	устройств и заземления
	при	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	воздушных вводах в 	дома; 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	правильность соединения  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	воздушных проводов с     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	изолированными проводами;
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие втулок, воронок в
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	местах прохождения провод-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ки через стены и пр.;    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	правильность крепления   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	подрозетников, диодных   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	приставок и их состояние 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.  	¦	Подземные ка-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	бельные линии	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	проводного   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	вещания (ПВ) 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	и распредели-	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	тельные сети 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ПВ в зданиях 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.1.	¦	Ознакомление 	¦	100%        	¦	Производится ознакомление
	¦	              	¦

	¦	    	¦	с проектной  	¦	            	¦	с рабочими чертежами     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	документацией	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.2.	¦	Проверка ис- 	¦	То же       	¦	Проверяются
	представленные	¦	              	¦

	¦	    	¦	полнительной 	¦	            	¦	подрядчиком скорректиро- 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	документации 	¦	            	¦	ванные рабочие чертежи,  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	акты на скрытые работы и 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	протоколы электрических  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	измерений на полноту и   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	качество их исполнения   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.3.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	По данным актов на скрытые	¦	По
	решению    	¦

	¦	    	¦	глубины      	¦	            	¦	работы                    	¦	комиссии
	могут	¦

	¦	    	¦	прокладки    	¦	            	¦	                          	¦	быть
	сделаны  	¦

	¦	    	¦	кабелей      	¦	            	¦	                          	¦	на трассе
	1 - 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                          	¦	2
	раскопки    	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	траншеи       	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.4.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	То же                    
	¦	При           	¦

	¦	    	¦	пересечений  	¦	            	¦	                         
	¦	необходимости 	¦

	¦	    	¦	кабельной    	¦	            	¦	                          	¦	по
	решению    	¦

	¦	    	¦	линии ПВ с   	¦	            	¦	                         
	¦	комиссии      	¦

	¦	    	¦	подземными   	¦	            	¦	                          	¦	могут
	быть    	¦

	¦	    	¦	коммуникация-	¦	            	¦	                         
	¦	произведены   	¦

	¦	    	¦	ми, а также с	¦	            	¦	                          	¦	1 -
	2         	¦

	¦	    	¦	автомобильны-	¦	            	¦	                         
	¦	раскопки      	¦

	¦	    	¦	ми и железны-	¦	            	¦	                         
	¦	пересечений   	¦

	¦	    	¦	ми дорогами  	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.5.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	Проверяются визуально    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	пересечений  	¦	            	¦	расстояния от линии ПВ до
	¦	              	¦

	¦	    	¦	подземных    	¦	            	¦	ближайшей опоры ЛЭП      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	линий ПВ с   	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	линиями      	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	электропере- 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	дач (ЛЭП) до 	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	и выше 1000 В	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.6.	¦	Проверка     	¦	-"-         	¦	Проверяется: глубина про- 	¦	По
	решению    	¦

	¦	    	¦	трассы       	¦	            	¦	кладки по актам на скрытые	¦	комиссии
	про- 	¦

	¦	    	¦	прокладки    	¦	            	¦	работы; состояние муфты   	¦	изводятся
	1 - 	¦

	¦	    	¦	кабеля ПВ    	¦	            	¦	(сростка) кабеля в        	¦	2
	раскопки    	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	котловане, выкладка
	запаса	¦	траншеи.      	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	кабеля; наличие и правиль-
	¦	Проверяется   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ность установки замерных  	¦	по актам
	на   	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	столбиков и привязки ка-  	¦	скрытые
	рабо- 	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	бельной линии в городских 	¦	ты, по
	решению	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	условиях; состояние муфт 
	¦	комиссии      	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	(сростков) кабелей МРМ,  
	¦	производятся  	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	РМЗЭП, ПРППМ в котловане, 	¦	1 - 2
	раскопки	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	наличие запасов кабелей  
	¦	котлована     	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.7.	¦	Проверка     	¦	100%        	¦	Проверяется: оборудование
	¦	              	¦

	¦	    	¦	переходов с  	¦	            	¦	кабельной опоры, в том   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	подземной    	¦	            	¦	числе монтаж кабельного  
	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	линии на     	¦	            	¦	ящика или переходной     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	воздушную    	¦	            	¦	воронки, защита кабеля на
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	опоре, молниеотвод       
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.8.	¦	Проверка     	¦	То же       	¦	Проверяется: устройство  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	вводов ПВ в  	¦	            	¦	вводов
	радиотрансляционной	¦	              	¦

	¦	    	¦	здания       	¦	            	¦	линии с опоры ВЛС в зда- 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ние, включение в абонент-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ское защитное устройство 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	(АЗУ) и включение в      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ограничительную коробку; 
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	правильность устройства  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ввода через кирпичную,   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	железобетонную стены     
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	                         
	¦	              	¦

	¦	6.9.	¦	Проверка     	¦	            	¦	Проверяется: соблюдение  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	монтажа      	¦	            	¦	нормативных расстояний   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	распредели-  	¦	            	¦	между проводками ПВ и    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	тельной сети 	¦	            	¦	телефонными; устройство  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	ПВ в зданиях 	¦	            	¦	скрытой проводки (по
	актам	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	на скрытые работы и визу-
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ально доступные осмотру  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	элементы проводки);
	защита	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проводов в местах        
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	возможного повреждения;  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	устройство лестничной    
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	проводки; монтаж проводов
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	ПВ в совмещенных шкафах  
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	или в монтажных нишах;   
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	установка разветвительных
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	коробок и розеток и      
	¦	              	¦

	¦	    	¦	             	¦	            	¦	подключение к ним
	проводов	¦	              	¦

	L----+-------------+------------+--------------------------+---------
	------

	--------------------------------

	<*> В графе 3 указано минимальное число проверок. При обнаружении дефектов число
	проверок увеличивается до выявления степени дефектности выполненных работ.

	Б. Состав и объем приемосдаточных электрических измерений

	Для приемочной комиссии основными документами, характеризующими состояние линейно-
	кабельных сооружений, являются протоколы электрических измерений, подписанные
	представителями заказчика (эксплуатационной организации), находящиеся в составе исполнительной
	документации.

	В необходимых случаях приемочная комиссия может проводить лишь в выборочном порядке
	электроизмерения, указанные в таблице.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T---------------T------------------------------------------------
	-----¬

	¦	 N 	¦	    Объект     	¦	  Измеряемые и контролируемые параметры
	(проверки)   	¦

	¦	п/п	¦	   измерений   	+-----------------------------------T------------
	-----+

	¦	   	¦	               	¦	         постоянным током          	¦	переменным
	током 	¦

	+---+---------------+-----------------------------------+------------
	-----+

	¦	 1 	¦	       2       	¦	                 3                 	¦	       
	4        	¦

	+---+---------------+-----------------------------------+------------
	-----+

	¦	1. 	¦	Участок        	¦	Электрическое сопротивление       
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	смонтированной 	¦	изоляции между каждой жилой и
	всеми	¦	                 	¦

	¦	   	¦	линии длиной   	¦	другими жилами, соединенными с    
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	0,8 - 1,0 км   	¦	металлической оболочкой (экраном);
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	электрическое сопротивление       
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	изоляции между металлической      
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	оболочкой (экраном) и землей      
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	(броней); проверка целости жил и  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	экранов; парность жил             
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	2. 	¦	Цепи смонтиро- 	¦	Электрическое сопротивление       
	¦	Переходное       	¦

	¦	   	¦	ванного кабеля,	¦	изоляции жил; электрическое        	¦	затухание
	на     	¦

	¦	   	¦	предназначенные	¦	сопротивление изоляции между       	¦	ближнем

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	конце    	¦

	¦	   	¦	для системы    	¦	металлической оболочкой (экраном) 
	¦	(при             	¦

	¦	   	¦	ИКМ, после их  	¦	и землей (броней); электрическое  
	¦	однокабельной    	¦

	¦	   	¦	включения в НРП	¦	сопротивление шлейфа жил; рабочая 
	¦	системе),        	¦

	¦	   	¦	(на регенераци-	¦	емкость пар; проверка правильности
	¦	собственное      	¦

	¦	   	¦	онном участке) 	¦	включения в оконечные устройства   	¦	затухание
	цепей  	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	3. 	¦	Смонтированные 	¦	Электрическое сопротивление       
	¦	Переходное       	¦

	¦	   	¦	участки        	¦	изоляции жил; испытание            	¦	затухание
	на     	¦

	¦	   	¦	низкочастотных 	¦	электрической прочности изоляции   	¦	ближнем
	конце,   	¦

	¦	   	¦	симметричных   	¦	жил (при дистанционном питании);  
	¦	защищенность     	¦

	¦	   	¦	кабелей        	¦	электрическое сопротивление        	¦	цепей на
	дальнем 	¦

	¦	   	¦	               	¦	изоляции шланга (при его наличии);
	¦	конце            	¦

	¦	   	¦	               	¦	проверка целости жил и экранов    
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	4. 	¦	Смонтированные 	¦	То же; омическая асимметрия и      	¦	Защищенность
	на  	¦

	¦	   	¦	участки        	¦	электрическое сопротивление шлейфа 	¦	дальнем
	конце    	¦

	¦	   	¦	высокочастотных	¦	жил (только на соединительных     
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	симметричных   	¦	линиях ГТС и СТС)                 
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	кабелей        	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                 	¦

	¦	5. 	¦	Волоконно-опти-	¦	                                   	¦	Затухание
	оптиче-	¦

	¦	   	¦	ческие кабели  	¦	                                   	¦	ских волокон
	ка- 	¦

	¦	   	¦	связи (ВОЛС)   	¦	                                   	¦	беля на
	регенера-	¦

	¦	   	¦	ГТС и СТС      	¦	                                   	¦	ционных
	участках 	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	6. 	¦	Смонтированные 	¦	Электрическое сопротивление       
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	линии СТС и ПВ 	¦	изоляции между жилами и между     
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	из однопарных  	¦	каждой жилой и землей             
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	кабелей типа   	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	ПРППМ, МРМ и   	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	РМПЗЭП         	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	               	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	7. 	¦	Смонтированные 	¦	То же и испытание электрической   
	¦	Входное          	¦

	¦	   	¦	фидерные линии 	¦	прочности изоляции жил            
	¦	сопротивление    	¦

	¦	   	¦	ПВ из однопар- 	¦	                                  
	¦	                 	¦

	¦	   	¦	ных кабелей    	¦	                                  
	¦	                 	¦

	L---+---------------+-----------------------------------+------------
	------

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИЕМКИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ,
	РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СТОЛБОВЫХ
	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
	А. Состав и объем проверок

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T-------------------------T-----------T--------------------------
	-----¬

	¦	 N 	¦	 Наименование проверок,  	¦	   Число   	¦	 Содержание и методы
	проверок  	¦

	¦	п/п	¦	  проводимых комиссией   	¦	 проверок 
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	 или объем
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	 испытаний
	¦	                               	¦

	+---+-------------------------+-----------+--------------------------
	-----+

	¦	 1 	¦	            2            	¦	     3     	¦	              
	4               	¦

	+---+-------------------------+-----------+--------------------------
	-----+

	¦	1. 	¦	Ознакомление с проектной 	¦	100%       	¦	Производится ознакомление
	с    	¦

	¦	   	¦	и исполнительной         	¦	           	¦	рабочими чертежами и
	сметами.  	¦

	¦	   	¦	документацией            	¦	           	¦	Делаются отдельные пометки
	для 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	проверки выполненных в
	натуре  	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	работ. Проверяется
	исполнитель-	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	ная документация на
	комплект-  	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	ность, полноту содержания
	и    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	качество исполнения.
	Особое    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	внимание уделяется
	анализу     	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	данных электрических
	измерений 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	на соответствие с
	действующими 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	нормами и на соответствие
	типа 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	линии
	метеорологическим        	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	условиям
	местности             	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	2. 	¦	Проверка соответствия    	¦	Выборочно  	¦	Проверка производится
	в        	¦

	¦	   	¦	исполнительной           	¦	           	¦	основном во время
	осмотра      	¦

	¦	   	¦	документации фактическому	¦	           	¦	сдаваемых линейных
	сооружений  	¦

	¦	   	¦	выполнению работ         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	3. 	¦	Соответствие размеров    	¦	Выборочно  	¦	Производится измерение
	высоты  	¦

	¦	   	¦	опор и подпор по высоте и	¦	до 5%      	¦	надземной части опоры, в
	случае	¦

	¦	   	¦	диаметру в основании     	¦	           	¦	возникновения
	необходимости    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	допускается раскопка
	опоры.    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	Диаметр опор и
	подпор          	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	измеряется у поверхности
	земли 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	4. 	¦	Соответствие проекту типа	¦	Выборочно, 	¦	Сравнивается с
	проектом        	¦

	¦	   	¦	примененных приставок    	¦	не менее
	5%	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	приставок 
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	5. 	¦	Правильность установки   	¦	На всем    	¦	Вертикальность установки
	опор  	¦

	¦	   	¦	опор в отношении         	¦	протяжении 	¦	определяется визуально,
	в      	¦

	¦	   	¦	вертикальности их по     	¦	           	¦	случае
	необходимости           	¦

	¦	   	¦	линии и по проводам      	¦	           	¦	применяется
	отвес              	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	6. 	¦	Глубина закопки:         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	а) промежуточных опор    	¦	Не менее 5%	¦	Глубина закопки
	определяется   	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	измерением подземной
	части     	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	раскопанной
	опоры              	¦

	¦	   	¦	б) сложных опор          	¦	Выборочно, 	¦	Допускается отклонение от
	норм 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	по         	¦	+/- 5
	см                       	¦

	¦	   	¦	                         	¦	усмотрению
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	комиссии  
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	в) подпор, приставок,    	¦	То же     
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	якорей, лежней           	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	молниеотводов            	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	7. 	¦	Качество антисептирования	¦	-"-        	¦	Качество антисептирования
	опре-	¦

	¦	   	¦	древесины опор           	¦	           	¦	деляется с помощью
	пустотелого 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	бура или стамески по
	указанию  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	"Инструкции по
	пропитке        	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	деревянных опор,
	подпор,       	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	приставок и траверс
	воздушных  	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	линий связи и
	радиофикации"    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	(М., "Связь",
	1961)            	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	8. 	¦	Соблюдение норм вылета   	¦	10%        	¦	Расстояние между
	опорами       	¦

	¦	   	¦	углов, равномерности длин	¦	           	¦	измеряется мерной цепью
	или    	¦

	¦	   	¦	пролетов и нивелировки   	¦	           	¦	рулеткой (допускаются
	отдельные	¦

	¦	   	¦	линий по верху опор      	¦	           	¦	погрешности в расстояниях
	между	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	опорами +/- 2 м).
	Полученные   	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	данные сравниваются
	с          	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	паспортными                    	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	9. 	¦	Правильность сборки      	¦	100%       	¦	Правильность сборки
	сложных    	¦

	¦	   	¦	сложных опор             	¦	           	¦	опор определяется
	наружным     	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	осмотром                       	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	10.	¦	Наличие и ясность        	¦	На всем    	¦	Наружный
	осмотр                	¦

	¦	   	¦	нумерации опор, а также  	¦	протяжении
	¦	                               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	предупредительных знаков 	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	о наличии в цепи         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	дистанционного питания   	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	11.	¦	Правильность сборки и    	¦	До 10% опор	¦	Определяется путем
	наружного   	¦

	¦	   	¦	установки опор в         	¦	в основани-	¦	осмотра и отдельных
	замеров с  	¦

	¦	   	¦	железобетонных и         	¦	ях         	¦	раскопкой (можно
	совместить с  	¦

	¦	   	¦	деревянных основаниях    	¦	           	¦	проверкой глубины
	закопки)     	¦

	¦	   	¦	(расстояние комля опор от	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	поверхности грунта,      	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	крепление оснований с    	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	опорой, наличие вкладыша 	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	между приставками)       	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	12.	¦	Наличие и качество защит-	¦	По         	¦	Подземная часть
	откапывается.  	¦

	¦	   	¦	ного покрытия закапывае- 	¦	усмотрению 	¦	Защитный слой проверяется
	при  	¦

	¦	   	¦	мой части железобетонных 	¦	комиссии,  	¦	наружном осмотре с
	применением 	¦

	¦	   	¦	опор и приставок,        	¦	но не менее	¦	режущих
	инструментов           	¦

	¦	   	¦	устанавливаемых в районах	¦	5%, преду-
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	с агрессивными грунтами  	¦	смотренных
	¦	                               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	или вблизи электрических 	¦	проектом  
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	железных дорог           	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	13.	¦	Проверка защиты линий от 	¦	50%        	¦	Производится наружный
	осмотр   	¦

	¦	   	¦	ударов молнии            	¦	           	¦	всех сооружений по
	защите.     	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	Наличие и
	исправность          	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	молниеотводов,
	искровых        	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	промежутков, каскадной
	защиты и	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	заземлений. Выборочно
	измеряют 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	электрическими
	приборами       	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	14.	¦	Прочность крепления      	¦	10%        	¦	Проверяется при
	наружном       	¦

	¦	   	¦	траверс, подкосов,       	¦	           	¦	осмотре и опробовании
	прочности	¦

	¦	   	¦	штырей, крюков и т.п.    	¦	           	¦	крепления
	вручную              	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	15.	¦	Соответствие крюков,     	¦	То же      	¦	Проверка по п. п. 14, 15 и
	16  	¦

	¦	   	¦	траверс, изоляторов      	¦	           	¦	производится одновременно
	при  	¦

	¦	   	¦	диаметру проводов, типу, 	¦	           	¦	подъеме на
	опоры               	¦

	¦	   	¦	классу линии, прочность и	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	правильность насадки изо-	¦	          
	¦	                               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	ляторов на крюки и штыри 	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	16.	¦	Крепление проводов:      	¦	-"-        	¦	Определение качества
	крепления 	¦

	¦	   	¦	диаметр, длина и материал	¦	           	¦	проводов производится
	при      	¦

	¦	   	¦	перевязочной проволоки и 	¦	           	¦	наружном
	осмотре               	¦

	¦	   	¦	качество вязки проводов  	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	17.	¦	Качество сварки стальных 	¦	10%        	¦	Определение качества
	сварки и  	¦

	¦	   	¦	проводов, покрытие       	¦	           	¦	соединения
	проводов            	¦

	¦	   	¦	защитным слоем (суриком  	¦	           	¦	производится при
	наружном      	¦

	¦	   	¦	или битумом) мест сварки,	¦	          
	¦	осмотре                        	¦

	¦	   	¦	правильность соединения  	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	проводов из цветного     	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	металла при помощи трубок	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	18.	¦	Правильность устройств   	¦	На всем    	¦	Проверяется
	соответствие       	¦

	¦	   	¦	скрещиваний цепей,       	¦	протяжении 	¦	выполнения
	запроектированной   	¦

	¦	   	¦	проверка длин элементов  	¦	           	¦	схемы скрещивания цепей
	и      	¦

	¦	   	¦	скрещиваний, проверка    	¦	           	¦	правильность
	исполнения        	¦

	¦	   	¦	схемы скрещивания.       	¦	           	¦	скрещиваний. Длины
	элементов   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	Сравнение фактического   	¦	           	¦	проверяются выборочно в
	объеме 	¦

	¦	   	¦	выполнения схемы с       	¦	           	¦	до
	5%                          	¦

	¦	   	¦	запроектированной        	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	19.	¦	Проверка регулировки     	¦	10%        	¦	Стрелы провеса проверяются
	с   	¦

	¦	   	¦	проводов и соответствия  	¦	           	¦	помощью реек и
	сравниваются с  	¦

	¦	   	¦	стрел провеса табличным  	¦	           	¦	данными
	норм                   	¦

	¦	   	¦	данным                   	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	20.	¦	Правильность и качество  	¦	100%       	¦	Правильность и
	качество        	¦

	¦	   	¦	оборудования контрольных 	¦	           	¦	оборудования контрольных
	опор  	¦

	¦	   	¦	опор                     	¦	           	¦	определяется при
	наружном      	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	осмотре в соответствии с
	суще- 	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	ствующими правилами.
	Заземления	¦

	¦	   	¦	                         	¦	           	¦	откапываются
	выборочно         	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	21.	¦	Соблюдение габаритов     	¦	20%        	¦	Габариты проверяются
	при       	¦

	¦	   	¦	проводов по отношению к  	¦	           	¦	наружном осмотре линии и
	в     	¦

	¦	   	¦	земле, зданиям, деревьям,	¦	           	¦	случае необходимости
	путем     	¦

	¦	   	¦	железнодорожному полотну,	¦	           	¦	промеров. Полученные
	данные    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	линиям других ведомств и 	¦	           	¦	сравниваются с проектными
	и с  	¦

	¦	   	¦	т.д.                     	¦	           	¦	данными установленных
	правил   	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	22.	¦	Правильность устройства  	¦	100%       	¦	Проверяется
	выполнение         	¦

	¦	   	¦	пересечений линий связи с	¦	пересечений	¦	пересечений в соответствии
	с   	¦

	¦	   	¦	проводами контактной сети	¦	           	¦	проектом и
	существующими       	¦

	¦	   	¦	электрической железной   	¦	           	¦	правилами и нормами.
	Габариты  	¦

	¦	   	¦	дороги, контактными трам-	¦	           	¦	проверяются с
	помощью          	¦

	¦	   	¦	вайными и троллейбусными 	¦	          
	¦	высотомера                     	¦

	¦	   	¦	проводами и ВЛ           	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	23.	¦	Правильность устройства  	¦	100%       	¦	Устройство ввода
	проверяется   	¦

	¦	   	¦	ввода в здания усилитель-	¦	           	¦	осмотром в соответствии
	с      	¦

	¦	   	¦	ных станций, правильность	¦	           	¦	проектом. Защитные
	устройства  	¦

	¦	   	¦	установки и исправность  	¦	           	¦	испытываются
	измерительными    	¦

	¦	   	¦	согласовывающих          	¦	          
	¦	приборами                      	¦

	¦	   	¦	устройств, ЗК, ДК,       	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	защитных устройств на    	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	кабельных опорах         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	24.	¦	Правильность устройства в	¦	100%       	¦	Перед приемкой
	мачтового       	¦

	¦	   	¦	соответствии с проектом и	¦	переходов  	¦	перехода изучается проект
	на   	¦

	¦	   	¦	качество выполнения работ	¦	           	¦	его устройство.
	Осматривается в	¦

	¦	   	¦	мачтового перехода:      	¦	           	¦	натуре переход, в
	случае       	¦

	¦	   	¦	состояние и правильность 	¦	           	¦	необходимости
	производят       	¦

	¦	   	¦	установки по вертикали   	¦	           	¦	отдельные замеры его
	элементов 	¦

	¦	   	¦	мачт и подмачтовиков,    	¦	           	¦	и делают заключение
	о          	¦

	¦	   	¦	регулировка оттяжек,     	¦	           	¦	соответствии сооружения
	проекту	¦

	¦	   	¦	состояние хомутов,       	¦	           	¦	и существующим
	правилам        	¦

	¦	   	¦	исправность роликов,     	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	прочность молниеотводов, 	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	правильность соединения  	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	канатиков с проводами    	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	   	¦	                         	¦	          
	¦	                               	¦

	¦	25.	¦	Укрепление линии в соот- 	¦	По         	¦	Проверяется
	наличие            	¦

	¦	   	¦	ветствии с местными мете-	¦	усмотрению 	¦	противогололедных
	и            	¦

	¦	   	¦	орологическими условиями 	¦	комиссии   	¦	противоветровых
	опор           	¦

	L---+-------------------------+-----------+--------------------------
	------

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИЕМКИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ,
	РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СТОЕЧНЫХ
	ЛИНИЙ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	А. Состав и объем проверок

	----T------------T------------------T--------------------------------
	-----¬

	¦	 N 	¦	Наименование	¦	Число проверок или	¦	    Содержание и методы
	проверок     	¦

	¦	п/п	¦	  проверок  	¦	 объем испытаний 
	¦	                                     	¦

	+---+------------+------------------+--------------------------------
	-----+

	¦	 1 	¦	     2      	¦	        3         	¦	                 
	4                  	¦

	+---+------------+------------------+--------------------------------
	-----+

	¦	1. 	¦	Внешний     	¦	100%              	¦	Проверка производится по актам
	на    	¦

	¦	   	¦	осмотр      	¦	                  	¦	скрытые работы, при
	необходимости    	¦

	¦	   	¦	стоечных    	¦	                  	¦	проверкой установки стоек на
	крышах  	¦

	¦	   	¦	опор        	¦	                  	¦	зданий (до 5%).
	Проверяется:         	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	крепление стоек к стропилам
	и        	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	крепление их на плоских
	крышах,      	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	заделка деталей для крепления
	оттяжек	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	в крыше, заделка отверстий в
	крыше,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	правильность крепления
	оттяжек,      	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	возможность доступа к стойкам
	и      	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	правильность установки
	люков         	¦

	¦	   	¦	            	¦	                 
	¦	                                     	¦

	¦	2. 	¦	Проверка    	¦	Выборочно до 5% и 	¦	Проверяется: регулировка
	проводов;   	¦

	¦	   	¦	качества    	¦	100% пересечений  	¦	соответствие стрел провесов

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	норматив-	¦

	¦	   	¦	подвески    	¦	                  	¦	ным данным; соблюдение
	габаритов     	¦

	¦	   	¦	проводов    	¦	                  	¦	проводов по отношению к
	земле,       	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	зданиям, деревьям, дорогам,
	линиям   	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	других ведомств; качество
	крепления  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	проводов к изоляторам;
	соответствие  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	перевязочной проволоки и
	правильность	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	вязки; качество сварки
	стальных      	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	проводов, соответствие
	требованиям   	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	технических правил вводов
	проводов в 	¦

	¦	   	¦	            	¦	                  	¦	станции и абонентские
	пункты         	¦

	L---+------------+------------------+--------------------------------
	------

	Б. Состав и объем приемосдаточных электрических измерений

	Для приемочной комиссии основными документами, характеризующими состояние столбовых и
	стоечных линий связи и проводного вещания, являются протоколы электрических измерений,
	подписанные представителем заказчика (эксплуатационной организации), находящиеся в составе
	исполнительной документации.

	В необходимых случаях приемочная комиссия может проводить лишь в выборочном порядке
	электроизмерения, указанные в таблице.

	----T-------------T--------------------------------------------------
	-----¬

	¦	 N 	¦	   Объект    	¦	   Измеряемые и контролируемые параметры
	(проверки)    	¦

	¦	п/п	¦	  измерений  	+----------------------------------T---------------
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	             	¦	         постоянным током         	¦	  переменным
	током  	¦

	+---+-------------+----------------------------------+---------------
	-----+

	¦	 1 	¦	      2      	¦	                3                 	¦	        
	4          	¦

	+---+-------------+----------------------------------+---------------
	-----+

	¦	   	¦	             	¦	         Воздушные линии         
	¦	                    	¦

	¦	   	¦	             	¦	                                 
	¦	                    	¦

	¦	1. 	¦	Воздушная    	¦	Электрическое сопротивление шлейфа	¦	Собственное
	затуха- 	¦

	¦	   	¦	линия        	¦	проводов цепи, омическая          	¦	ние цепей;
	волновое 	¦

	¦	   	¦	междугородной	¦	асимметрия проводов,
	электрическое	¦	сопротивление       	¦

	¦	   	¦	телефонной   	¦	сопротивление изоляции проводов   	¦	цепей;
	переходное   	¦

	¦	   	¦	связи        	¦	(измеряется каждый провод по      	¦	затухание
	между     	¦

	¦	   	¦	             	¦	отношению к земле)                	¦	цепями на
	ближнем   	¦

	¦	   	¦	             	¦	                                  	¦	конце,
	защищенность 	¦

	¦	   	¦	             	¦	                                  	¦	на дальнем
	конце    	¦

	¦	   	¦	             	¦	                                 
	¦	                    	¦

	¦	2. 	¦	Воздушная    	¦	То же (измерения шлейфа проводов 
	¦	                    	¦

	¦	   	¦	линия ГТС и  	¦	воздушной цепи производятся на   
	¦	                    	¦

	¦	   	¦	СТС          	¦	линиях длиной более 3 км)        
	¦	                    	¦

	L---+-------------+----------------------------------+---------------
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 1

	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ "ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ,
	РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ" ВСН-600-81 МИНСВЯЗИ СССР
	"Приемка в эксплуатацию

	5.10. Приемка объектов связи в эксплуатацию должна осуществляться с соблюдением
	требований главы СНиП по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий,
	зданий и сооружений в порядке, установленном руководствами и программами приемки отдельных
	видов сооружений, оборудования и систем, согласованными с соответствующими отраслевыми
	управлениями Министерства связи СССР.

	5.11. Приемке в эксплуатацию государственными комиссиями подлежат объекты связи, на
	оборудовании которых начат выпуск продукции (оказание услуг), организованы каналы связи,
	осуществлена передача программ вещания, газетных полос и др.

	В случаях, когда проектом строительства или реконструкции объектов связи предусматривается
	переключение действующих связей и телефонов на вводимый в эксплуатацию объект
	(оборудование), переключение разрешается только после утверждения акта приемки объекта (или
	пускового комплекса) в эксплуатацию. При этом в акте государственной приемочной комиссии
	должен быть установлен срок переключения.

	5.12. Приемка в эксплуатацию объекта связи или пускового комплекса, на котором применена
	вновь осваиваемая технология, производится независимо от соответствия достигнутых параметров
	нормативным, при условии выполнения всех работ, предусмотренных проектом."

	Приложение 2

	(обязательное)

	                                    АКТ

	                       РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ

	              ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	           ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	г. _______________                             "__" _______________
	19__ г.

	    Рабочая комиссия, назначенная
	_________________________________________

	___________________________________________________________________________

	            (наименование организации-заказчика (застройщика),

	                       назначившей рабочую комиссию)

	решением от "__" ______________ 19__ г. N
	_________________________________

	в составе:

	    председателя - представителя заказчика (застройщика)

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    членов комиссии - представителей:

	    генерального подрядчика
	_______________________________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    субподрядных (монтажных) организаций
	__________________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    эксплуатационной организации
	__________________________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    генерального проектировщика
	___________________________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    органов государственного санитарного надзора
	__________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    органов государственного пожарного надзора
	____________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    Государственной   инспекции   по   охране   атмосферного  
	воздуха  при

	Государственном  комитете  СССР  по  гидрометеорологии и контролю
	природной

	среды (по объектам производственного назначения)
	__________________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов
	__________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной
	организации ____

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    других заинтересованных органов надзора и организации

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_________________

	__________________________________________________________________________,

	                    (фамилия, имя, отчество, должность)

	    руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

	    УСТАНОВИЛА:

	    1. Генеральным подрядчиком
	____________________________________________

	                                        (наименование организации

	___________________________________________________________________________

	                     и ее ведомственная подчиненность)

	предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством
	___________

	__________________________________________________________________________,

	                     (наименование здания, сооружения)

	входящего в состав
	_______________________________________________________.

	                                    (наименование объекта)

	    2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
	выполнившим __

	__________________________________________________________________________,

	                               (виды работ)

	и его субподрядными организациями
	_________________________________________

	__________________________________________________________________________,

	        (наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

	выполнившими
	_____________________________________________________________.

	                                     (виды работ)

	    3.   Проектно-сметная   документация   на   строительство  
	разработана

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	проектными организациями
	__________________________________________________

	__________________________________________________________________________.

	        (наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

	    4. Строительство осуществлялось по проекту
	____________________________

	                                                     (номер проекта,

	__________________________________________________________________________.

	                    номер серии (по типовым проектам))

	    5. Проектно-сметная документация утверждена
	___________________________

	___________________________________________________________________________

	    (наименование органа, утвердившего документацию на объект в
	целом)

	___________________________________________________________________________

	"__" ______________ 19__ г.                           N
	___________________

	    6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало работ ______________________; окончание работ
	_____________________.

	                 (месяц и год)                           (месяц и
	год)

	    7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

	__________________________________________________________________________.

	       (перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87

	                       или номер приложения к акту)

	    Указанные  документы  являются  обязательным  приложением  к
	настоящему

	акту.

	    8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

	__________________________________________________________________________.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	         (мощность, производительность, производственная площадь,

	                     протяженность, вместимость и т.п.)

	    9.  Технологические  и  архитектурно-строительные  решения  по 
	зданию,

	сооружению характеризуются следующими данными:

	___________________________________________________________________________

	       (краткие технические характеристики по планировке, этажности,

	__________________________________________________________________________.

	              основным материалам и конструкциям, инженерному

	                     и технологическому оборудованию)

	    10.  Оборудование  установлено  согласно  актам  о  его  приемке 
	после

	индивидуального  испытания  и  комплексного опробования рабочими
	комиссиями

	(перечень актов приведен в приложении ________________ к настоящему
	акту) в

	количестве:

	    по проекту ____________ единиц;

	    фактически ____________ единиц.

	    11.   Мероприятия  по  охране  труда,  обеспечению 
	взрывобезопасности,

	пожаробезопасности,  охране  окружающей  природной среды и
	антисейсмические

	мероприятия, предусмотренные проектом
	____________________________________.

	                                             (сведения о выполнении)

	    Характеристика мероприятий приведена в приложении __________ к
	акту.

	    12.  Выявленные  дефекты  и  недоделки  должны  быть устранены в
	сроки,

	указанные в приложении _______________ к акту.

	    13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	документации:

	    всего  ______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ
	______

	тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ______ тыс. руб.

	                         Решение рабочей комиссии

	___________________________________________________________________________

	                     (наименование здания, сооружения)

	СЧИТАТЬ  ПРИНЯТЫМ  от  генерального  подрядчика  и готовым для
	предъявления

	Государственной приемочной комиссии.

	Председатель рабочей комиссии              
	_______________________________

	                                                       (подпись)

	Члены рабочей комиссии:                    
	_______________________________

	_______________________________

	                                                       (подпись)

	Сдали                                       Приняли

	представители генерального                  представители заказчика

	и субподрядных организаций:                 (застройщика):

	___________________                         ___________________

	     (подписи)                                   (подписи)

	Приложение 3

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	(обязательное)

	                                                     УТВЕРЖДЕН

	__________________________________

	__________________________________

	                                          (дата и номер решения
	(приказа,

	                                           постановления и др.),
	фамилия,

	                                          имя, отчество и должность
	лица,

	                                           подписавшего решение
	(приказ,

	                                               постановление и др.))

	                                    АКТ

	               ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ

	            В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	"__" _____________ 19__ г.           
	_____________________________________

	                                            (местонахождение объекта)

	    Государственная  приемочная  комиссия,  назначенная решением
	(приказом,

	постановлением и др.) от "__" ________ 19__ г. N
	__________________________

	__________________________________________________________________________,

	               (наименование органа, назначившего комиссию)

	в составе:

	    председателя

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    членов комиссии - представителей:

	    заказчика (застройщика)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    эксплуатационной организации

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    генерального подрядчика

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    генерального проектировщика

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    органов Государственного санитарного надзора

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    органов Государственного пожарного надзора

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    Государственной   инспекции   по   охране   атмосферного  
	воздуха  при

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Государственном  комитете  СССР  по  гидрометеорологии и контролю
	природной

	среды (по объектам производственного назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по
	объектам

	производственного  назначения)  или  органов госархстройконтроля,
	районного

	архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    технической  инспекции  труда  соответствующего ЦК или совета
	профсоюза

	(по объектам производственного назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    профсоюзной  организации  заказчика  (застройщика) или
	эксплуатационной

	организации  (по  объектам  производственного  назначения), или
	профсоюзной

	организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета
	профсоюзов

	(по объектам жилищно-гражданского назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    органов  по регулированию использования и охране вод системы
	Минводхоза

	СССР (по объектам производственного назначения)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	    других  заинтересованных органов и  организаций  (согласно  п. п.
	4.13,

	4.14 СНиП 3.01.04-87)

	__________________________________         
	______________________________,

	     (фамилия, имя, отчество)                         (должность)

	руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

	    УСТАНОВИЛА:

	    1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

	предъявлен к приемке в эксплуатацию
	_______________________________________

	___________________________________________________________________________

	             (наименование объекта и вид строительства: новое,

	          расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

	по адресу:
	________________________________________________________________

	               (область, район, населенный пункт, микрорайон,
	квартал,

	                             улица, номер 	дома,	 корпуса)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    2.  Строительство   осуществлено   на   основании   решения  
	(приказа,

	постановления и др.)

	от "__" ___________ 19__ г.                        N
	______________________

	___________________________________________________________________________

	                 (наименование органа, вынесшего решение)

	и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных 
	работ

	(для объектов жилищно-гражданского назначения)

	от "__" ___________ 19__ г.                        N
	______________________

	___________________________________________________________________________

	                (наименование органа, выдавшего разрешение)

	    3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

	__________________________________________________________________________,

	       (наименование организации и его ведомственная подчиненность)

	выполнившим
	______________________________________________________________,

	                                     (виды работ)

	и субподрядными организациями
	_____________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организаций и их ведомственная подчиненность;

	    виды работ, выполненные каждой организацией (при числе
	организаций

	      свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту))

	    4.   Проектно-сметная   документация   на   строительство  
	разработана

	генеральным проектировщиком

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_______________________________________________

	___________________________________________________________________________

	        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

	__________________________________________________________________________,

	выполнившим
	______________________________________________________________,

	                   (наименование частей или разделов документации)

	и субподрядными организациями
	_____________________________________________

	___________________________________________________________________________

	         (наименования организаций, их ведомственная подчиненность

	     и выполненные части и разделы документации (при числе
	организаций

	      свыше трех перечень их указывается в приложении ______ к акту))

	    5. Исходные данные для проектирования выданы
	__________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	          (наименования научно-исследовательских и изыскательских

	      организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных

	            данных (при числе организаций свыше трех перечень

	               их указывается в приложении _______ к акту))

	    6.  Строительство осуществлялось по проекту (типовому,
	индивидуальному,

	повторно применяемому)
	____________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	            (номер проекта, номер серии (по типовым проектам);

	       для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского

	         назначения указывается наименование органа, разрешившего

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                        применение такого проекта)

	    7. Проектно-сметная документация утверждена
	___________________________

	___________________________________________________________________________

	           (наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

	            документацию на объект, очередь, пусковой комплекс)

	"__" ___________ 19__ г.                           N
	______________________

	    8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало работ ______________________; окончание работ
	______________________

	                 (месяц и год)                           (месяц и
	год)

	при продолжительности строительства, мес.:

	по норме или по ПОС ____________________; фактически
	______________________

	    9.   Государственной   приемочной   комиссии   представлена  
	следующая

	документация:
	_____________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	      (перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04-87)

	    Указанные  документы  являются  обязательным  приложением  к
	настоящему

	акту.

	    10.  Предъявленный  к  приемке  в  эксплуатацию  объект имеет
	следующие

	основные показатели мощности, производительности, производственной
	площади,

	протяженности,   вместимости,  объема,  пропускной  способности, 
	провозной

	способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам
	(кроме

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	жилых  домов)  в  единицах  измерения  соответственно целевой
	продукции или

	основным видам услуг):

	Мощность,    	Единица 	По проекту     	Фактически     
	производительность	измерения	общая 	в том числе	общая 	в том числе
	и т.д.     	(с учетом	пускового	(с учетом	пускового
	ранее 	комплекса	ранее 	комплекса
	принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	    Выпуск  продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в
	объеме,

	соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
	период ____

	___________________________________________________________________________

	            (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

	    Предъявленный  к  приемке  в  эксплуатацию  жилой  дом  имеет
	следующие

	показатели:

	--------------------------------T-----------------T-----------T------
	-----¬

	¦	          Показатели           	¦	Единица измерения	¦	По проекту
	¦	Фактически 	¦

	+-------------------------------+-----------------+-----------+------
	-----+

	¦	Общая площадь                  	¦	кв. м            	¦	          
	¦	           	¦

	¦	Число этажей                   	¦	этаж             	¦	          
	¦	           	¦

	¦	Общий строительный объем       	¦	куб. м           	¦	          
	¦	           	¦

	¦	В том числе подземной части    	¦	-"-              	¦	          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	           	¦

	¦	Площадь встроенных, встроенно- 	¦	кв. м            	¦	          
	¦	           	¦

	¦	пристроенных и пристроенных    	¦	                 	¦	          
	¦	           	¦

	¦	помещений                      	¦	                 	¦	          
	¦	           	¦

	L-------------------------------+-----------------+-----------+------
	------

	---------------------------T-----------------------T-----------------
	-----¬

	¦	        Показатели        	¦	      По проекту       	¦	     
	Фактически      	¦

	¦	                          	+--------T--------------+-------T---------
	-----+

	¦	                          	¦	 число  	¦	   площадь    	¦	 число 	¦	  
	площадь    	¦

	¦	                          	¦	квартир 	¦	квартир, кв. м	¦	квартир	¦	квартир,
	кв. м	¦

	¦	                          	¦	        	+------T-------+	       	+------T--
	-----+

	¦	                          	¦	        	¦	общая 	¦	 жилая 	¦	       	¦	общая 	¦
	жилая 	¦

	+--------------------------+--------+------+-------+-------+------+--
	-----+

	¦	Всего квартир             	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	¦	В том числе:              	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	¦	  однокомнатных           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	¦	  двухкомнатных           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	¦	  трехкомнатных           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	¦	  четырехкомнатных и более	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     
	¦	       	¦

	L--------------------------+--------+------+-------+-------+------+--
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    11.  Технологические  и  архитектурно-строительные  решения  по
	объекту

	характеризуются следующими данными:
	_______________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	            (краткие технические характеристики по особенностям

	       его размещения, по планировке, этажности, основным материалам

	       и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

	    12.  На  объекте  установлено  предусмотренное  проектом
	оборудование в

	количестве  согласно  актам о его приемке после индивидуального
	испытания и

	комплексного  опробования  (перечень  указанных актов приведен в
	приложении

	_____ к настоящему акту).

	    13.   Мероприятия  по  охране  труда,  обеспечению 
	взрывобезопасности,

	пожаробезопасности,  охране  окружающей  природной среды и
	антисейсмические

	мероприятия, предусмотренные проектом
	_____________________________________

	                                             (сведения о выполнении)

	    Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

	    14.  Внешние  наружные коммуникации холодного и горячего
	водоснабжения,

	канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и 
	связи

	обеспечивают   нормальную   эксплуатацию   объекта   и  приняты 
	городскими

	эксплуатационными     организациями.     Перечень     справок    
	городских

	эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями,
	устранены.

	    16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных
	дорог

	к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а
	также

	отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

	Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения 

	    17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной
	документации:

	    всего  _______  тыс.  руб.,  в  том  числе: строительно-монтажных
	работ

	______ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _______ тыс.
	руб.

	    18.  Сметная  стоимость  основных  фондов,  принимаемых в
	эксплуатацию,

	______ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
	______

	тыс. руб., стоимость оборудования, инвентаря и инструмента ______
	тыс. руб.

	    19.   Экономический   эффект   от   внедрения  мероприятий 
	подрядчика,

	удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте,
	______ тыс.

	руб.

	    20.  На  основании  осмотра  объекта  и  ознакомления с
	соответствующей

	документацией даны оценки прогрессивности решений:

	    технологических
	_______________________________________________________

	                                (по жилым домам не заполняется)

	___________________________________________________________________________

	__________________________________________________________________________,

	    архитектурно-строительных    (включая    объемно-планировочные  
	и   по

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	применению материалов и конструкций)

	___________________________________________________________________________

	__________________________________________________________________________.

	    Решение Государственной приемочной комиссии

	Предъявленный к приемке
	___________________________________________________

	                                      (наименование объекта)

	ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

	Председатель Государственной

	приемочной комиссии                        
	_______________________________

	                                                       (подпись)

	Члены Государственной

	приемочной комиссии                        
	_______________________________

	_______________________________

	                                                       (подписи)

	Приложение 4

	                                  СПРАВКА

	            ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ

	               ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ГОТОВНОСТИ ИХ К ПРИЕМКЕ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	"__" ________________ 19__ г.                       г.
	____________________

	    Составлена
	____________________________________________________________

	                          (должности и ф.и.о. лиц, производивших

	___________________________________________________________________________

	                           освидетельствование)

	в том, что ими в период _________ проведено освидетельствование
	законченных

	капитальным ремонтом следующих линейных сооружений:

	    1.

	    2.

	    3.

	    4.

	    5.

	    В  результате освидетельствования установлено, что указанные
	сооружения

	могут  быть  готовы  к  приемке  после  устранения  следующих 
	недоделок  и

	дефектов:

	    1.

	    2.

	    3.

	    4.

	    5.

	    Подписи

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 5

	                                                            &n bsp;
	УТВЕРЖДАЮ

	_________________

	(должность)

	_________________

	                                                            &n bsp;
	(фамилия)

	                                    АКТ

	                 ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ

	         ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

	Гор. ___________________________________ "__" ___________ 19__ г.

	    Приемочная комиссия, назначенная
	______________________________________

	__________________________________________________________________________,

	             (наименование организации, назначившей комиссию)

	в составе:

	председателя
	______________________________________________________________

	членов комиссии
	___________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	произвела приемку работ по капитальному ремонту линейных сооружений
	_______

	___________________________________________________________________________

	                    (наименование линейных сооружений)

	и установила:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    1. Работы выполнены
	___________________________________________________

	                          (наименование организации, выполнившей
	работы,

	___________________________________________________________________________

	                       фамилия производителя работ)

	___________________________________________________________________________

	    2. Объем выполненных работ

	N	Наименование      	Единица	Физические объемы работ
	п/п	конструктивных     	измерения	по проекту	фактически
	элементов работ     

	Оценка выполненных работ
	__________________________________________________

	Сметная стоимость выполненных работ __________________ тыс. руб.

	Фактически израсходовано _____________________________ тыс. руб.

	Линейные сооружения
	_______________________________________________________

	Принимаются в эксплуатацию
	________________________________________________

	                                      (наименование организации)

	Приложения к акту:

	    1. Исполнительная документация.

	    2. Справка  о  готовности  капитально  отремонтированных 
	сооружений  к

	       приемке.

	Председатель комиссии _________________________________

	Члены комиссии        _________________________________

	                      _________________________________

	                      _________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.