Утверждены

	Постановлением

	Государственного комитета

	Совета Министров СССР

	по делам 	строительства

	от 25 апреля 1977 г. N 49

	по согласованию

	с Госпланом СССР

	Взамен

	Временных нормативов потребности

	в строительных машинах,

	утвержденных Госстроем СССР

	29 февраля 1972 года

	Срок введения в действие

	с 1 января 1978 года

	НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ
	СН 494-77

	Нормы потребности в строительных машинах издаются взамен Временных нормативов
	потребности в строительных машинах, утвержденных Госстроем СССР 29 февраля 1972 г.

	Нормы разработаны Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным
	институтом организации, механизации и технической помощи 	строительству	 (ЦНИИОМТП
	Госстроя СССР).

	При разработке норм учтено достигнутое по сравнению с 1972 г. улучшение использования
	строительных машин, а также изменение структуры способов механизации и величин физических
	объемов работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящие нормы предназначены для расчета потребности строительных министерств и
	ведомств в основных машинах для 	сооружения	 новых объектов, относящихся к соответствующей
	отрасли народного хозяйства.

	1.2. Нормы, приведенные в табл. 1 - 6, установлены на 1 млн. руб. строительно-монтажных
	работ, выполняемых собственными силами министерств и ведомств, в ценах, введенных с 1 января
	1969 г. Нормами учтена также потребность в машинах производственных предприятий, находящихся
	на строительном балансе.

	Примечание. Потребность в машинах производственных предприятий, находящихся на
	промышленном балансе, определяется отдельным расчетом.

	1.3. Нормы определены исходя из усредненных показателей 1975 г. использования машин,
	структуры способов механизации и физических объемов работ на 1 млн. руб. строительно-
	монтажных работ.

	1.4. Потребность в строительных машинах П при выполнении строительно-монтажных работ
	для отдельной отрасли народного хозяйства или промышленности определяется умножением объема
	строительно-монтажных работ на соответствующую норму потребности, приведенную в табл. 1 - 6:

	                           П = О Н,                            (1)

	    где:

	    О - объем     строительно-монтажных     работ,     выполняемый

	собственными силами, млн. руб.;

	    Н - норма  потребности данного  вида   машин  на  1  млн. руб.

	строительно-монтажных работ, единицы главного параметра или штуки.

	    1.5.  Потребность  в  отдельных видах строительных машин П при

	осуществлении  строительства  для  нескольких  отраслей  народного

	хозяйства или промышленности определяется расчетом по формуле:

	                                SUM Н У

	                          П = О -------,                       (2)

	                                  100

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	где У - удельный вес строительно-монтажных работ данной отрасли в общем объеме работ, %.

	1.6. При изменении физических объемов работ, приходящихся на 1 млн. руб. строительно-
	монтажных работ, структуры способов механизации и годовой выработки машин по сравнению с
	1975 г. потребность в машинах, рассчитанная по формуле (1), может быть скорректирована.

	    Уточненная  потребность  П   в  этом  случае  определяется  по

	                              к

	формуле:

	                               П К  К

	                                  о  с

	                          П  = -------,                        (3)

	                           к     К

	                                  в

	    где:

	    К  - коэффициент,  учитывающий  изменение  физического  объема

	     о

	работ на 1 млн.  руб.  строительно-монтажных  работ,  определяемый

	делением объема работ на 1  млн.  руб.  планируемого  (расчетного)

	года на объем работ 1975 г.;

	    К  - коэффициент,  учитывающий  изменение   структуры способов

	     с

	механизации, определяемый  делением  удельного  веса,  %,  данного

	способа работ  в общем объеме работ планируемого (расчетного) года

	на соответствующий показатель 1975 г.;

	    К  - коэффициент,  учитывающий  изменение  годовой   выработки

	     в

	машин,  определяемый   делением   выработки   машин   планируемого

	(расчетного) года на фактическую выработку машин 1975 г.

	1.7. При необходимости потребное количество отдельных видов землеройных машин, а также
	стреловых и башенных кранов, рассчитанное по нормам, может заменяться эквивалентным
	количеством (по производительности) машин других видов, выполняющих аналогичные работы.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ

	2.1. Пример расчета потребности в машинах при осуществлении строительства для нескольких
	отраслей народного хозяйства.

	Необходимо определить потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5
	куб. м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации,
	осуществляющей строительство для нескольких отраслей народного хозяйства.

	Объем строительно-монтажных работ, выполняемый строительной организацией
	собственными силами, - 345 млн. руб.

	Удельный вес объемов работ, выполняемых для отдельных отраслей в общем объеме
	строительно-монтажных работ, %:

	Промышленное строительство                                    59

	В том числе:

	  нефтеперерабатывающая промышленность                        2

	  угольная промышленность                                     9,5

	  черная металлургия                                          19

	  цветная металлургия                                         9,5

	  промышленность строительных материалов и стройиндустрии     4,5

	  легкая и прочие отрасли промышленности                      14,5

	Транспортное строительство (железные дороги)                  3,5

	Жилищное и культурно-бытовое строительство (в городах         36

	с населением до 500 тыс. жителей)

	Энергетическое строительство (тепловые электростанции)        1,5.

	В соответствии с формулой (2) общая потребность в одноковшовых экскаваторах, куб. м емкости
	ковша, составит:

	        345 x (0,83 x 2 + 0,71 x 9,5 + 1,31 x 19 + 1,24 x 9,5 +

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    П = -------------------------------------------------------

	                                 100

	    + 0,98 x 4,5 + 0,66 x 14,5 + 1,04 x 3,5 + 0,38 x 36 + 0,45 x 1,5)

	    -----------------------------------------------------------------
	=

	                                  100

	    = 265,82 куб. м.

	2.2. Пример корректировки потребности в машинах при изменении физических объемов работ,
	приходящихся на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ, структуры способов механизации и
	годовой выработки машин по сравнению с 1975 г.

	Необходимо скорректировать потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до
	2,5 куб. м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации,
	выполняющей в планируемом году строительно-монтажные работы для отрасли черной металлургии
	в объеме 120 млн. руб., при следующих исходных данных:

	----T----------------------T-----------T-------T-----------T---------
	---¬

	¦	 N 	¦	      Показатель      	¦	  Единица  	¦	1975
	г.	¦	Планируемый	¦	Коэффициент 	¦

	¦	п/п	¦	                      	¦	 измерения 	¦	       	¦	    год    	¦
	изменения  	¦

	+---+----------------------+-----------+-------+-----------+---------
	---+

	¦	1  	¦	Объем земляных работ  	¦	тыс. куб. м	¦	180    	¦	185       
	¦	185         	¦

	¦	   	¦	на 1 млн. руб. строи- 	¦	           	¦	       	¦	           	¦	--- =
	1,028 	¦

	¦	   	¦	тельно-монтажных работ	¦	           	¦	       	¦	          
	¦	180         	¦

	¦	   	¦	                      	¦	           	¦	       	¦	          
	¦	            	¦

	¦	2  	¦	Удельный вес земляных 	¦	%          	¦	40     	¦	41,5      
	¦	41,5        	¦

	¦	   	¦	работ, выполняемых    	¦	           	¦	       	¦	           	¦	---- =

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1,038	¦

	¦	   	¦	экскаваторами, в общем	¦	           	¦	       	¦	           	¦
	40         	¦

	¦	   	¦	объеме земляных работ 	¦	           	¦	       	¦	          
	¦	            	¦

	¦	   	¦	                      	¦	           	¦	       	¦	          
	¦	            	¦

	¦	3  	¦	Годовая выработка экс-	¦	тыс. куб. м	¦	130    	¦	136       
	¦	136         	¦

	¦	   	¦	каваторов на 1 куб. м 	¦	           	¦	       	¦	           	¦	--- =
	1,046 	¦

	¦	   	¦	емкости ковша         	¦	           	¦	       	¦	          
	¦	130         	¦

	L---+----------------------+-----------+-------+-----------+---------
	----

	Потребность в экскаваторах одноковшовых по нормам в соответствии с формулой (1)
	составляет:

	П = 120 x 1,31 = 157,2 куб. м,

	где 1,31 - норма потребности в одноковшовых экскаваторах для строительства предприятий
	черной металлургии, приведенная в табл. 1.

	Уточненная потребность в экскаваторах одноковшовых с учетом изменения исходных данных в
	соответствии с формулой (3) составит:

	               1,028 x 1,038

	    П  = 157,2 ------------- = 160,37 куб. м.

	     к             1,046

	3. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ НА 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
	РАБОТ

	Таблица 1

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	¦	 N 	¦	      Машины       	¦	  Единица  	¦	Нефте- 	¦	Уголь-	¦	Торфя-
	¦	Черная	¦	Цвет- 	¦	Хими- 	¦	Маши- 	¦	Лесоза-	¦	Целлюлоз-	¦	Промыш- 	¦	Легкая  	¦

	¦	п/п	¦	                   	¦	 измерения 	¦	перера-	¦	ная   	¦	ная   	¦	метал-
	¦	ная   	¦	ческая	¦	но-   	¦	готови-	¦	но-бумаж-	¦	ленность	¦	промыш- 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	батыва-	¦	про-  	¦	про- 
	¦	лургия	¦	метал-	¦	про-  	¦	строе-	¦	тельная	¦	ная и де-	¦	строи-  	¦	ленность	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	ющая   	¦	мыш-  	¦	мыш-  	¦	     
	¦	лургия	¦	мыш-  	¦	ние   	¦	промыш-	¦	ревообра-	¦	тельных 	¦	и прочие	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	промыш-	¦	лен-  	¦	лен-  	¦	     
	¦	      	¦	лен-  	¦	      	¦	лен-   	¦	батываю- 	¦	материа-	¦	отрасли 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	лен-   	¦	ность 	¦	ность 	¦	     
	¦	      	¦	ность 	¦	      	¦	ность  	¦	щая про- 	¦	лов и   	¦	промыш- 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	ность  	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	мышлен-  	¦	стройин-	¦	ленности	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	ность    	¦	дустрии 	¦	        	¦

	+---+-------------------+-----------+-------+------+------+------+---
	---+------+------+-------+---------+- -------+--------+

	¦	1  	¦	Экскаваторы одно-  	¦	куб. м     	¦	0,83   	¦	0,71  	¦	3,38  	¦	1,31 
	¦	1,24  	¦	1,63  	¦	0,85  	¦	1,26   	¦	1        	¦	0,98    	¦	0,66    	¦

	¦	   	¦	ковшовые с ковшом  	¦	емкости    	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	емкостью до 2,5    	¦	ковша      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	куб. м, включая    	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	тракторы с навесным	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	экскаваторным обо- 	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	рудованием         	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	2  	¦	Экскаваторы много- 	¦	шт.        	¦	0,11   	¦	0,22  	¦	-     	¦	0,14 
	¦	0,14  	¦	0,09  	¦	0,06  	¦	0,12   	¦	0,09     	¦	0,08    	¦	0,07    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	ковшовые           	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	3  	¦	Скреперы           	¦	куб. м     	¦	1,6    	¦	2,17  	¦	3,44  	¦	2,32 
	¦	1,72  	¦	2,14  	¦	2,24  	¦	3,19   	¦	1        	¦	1,2     	¦	1,65    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	емкости    	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ковша      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	4  	¦	Бульдозеры         	¦	шт.        	¦	2,76   	¦	1,83  	¦	3,07  	¦	1,85 
	¦	1,64  	¦	1,66  	¦	1,49  	¦	5,03   	¦	2,41     	¦	1,28    	¦	1,25    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	условной   	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	мощности   	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	100 л.с.   	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	5  	¦	Автогрейдеры       	¦	шт.        	¦	0,29   	¦	0,26  	¦	0,27  	¦	0,29 
	¦	0,24  	¦	0,24  	¦	0,19  	¦	0,96   	¦	0,27     	¦	0,14    	¦	0,24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	6  	¦	Сваебойное оборудо-	¦	-"-        	¦	0,33   	¦	0,12  	¦	-     	¦	0,32 
	¦	0,19  	¦	0,18  	¦	0,33  	¦	0,3    	¦	0,13     	¦	0,16    	¦	0,12    	¦

	¦	   	¦	вание              	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	7  	¦	Бурильные и буриль-	¦	-"-        	¦	0,23   	¦	0,08  	¦	-     	¦	0,32 
	¦	0,23  	¦	0,29  	¦	0,33  	¦	0,22   	¦	0,04     	¦	0,12    	¦	0,18    	¦

	¦	   	¦	но-крановые машины 	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	8  	¦	Краны башенные     	¦	т грузо-   	¦	4,1    	¦	2,06  	¦	2,46  	¦	6,2  
	¦	5,24  	¦	5,24  	¦	4,93  	¦	1,27   	¦	5,33     	¦	6,8     	¦	7,24    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	подъемности	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	9  	¦	Краны гусеничные   	¦	То же      	¦	4,16   	¦	2,8   	¦	4,1   	¦	9,65 
	¦	8,65  	¦	10,15 	¦	10,82 	¦	-      	¦	2,54     	¦	8,65    	¦	6,75    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	10 	¦	Краны пневмоколес- 	¦	-"-        	¦	5,21   	¦	1,93  	¦	3,67  	¦	7,46 
	¦	4,87  	¦	6,12  	¦	6,37  	¦	1,08   	¦	13,25    	¦	5,43    	¦	7,31    	¦

	¦	   	¦	ные                	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	11 	¦	Краны автомобильные	¦	-"-        	¦	7,02   	¦	5,92  	¦	3,93  	¦	7,89 
	¦	9,55  	¦	8,12  	¦	7,32  	¦	7,81   	¦	2,83     	¦	5,76    	¦	8,24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	12 	¦	Краны железнодорож-	¦	-"-        	¦	-      	¦	0,51  	¦	-     	¦	0,68 
	¦	0,65  	¦	0,72  	¦	0,17  	¦	-      	¦	-        	¦	0,27    	¦	0,64    	¦

	¦	   	¦	ные                	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	13 	¦	Краны тракторные   	¦	-"-        	¦	0,03   	¦	0,16  	¦	      	¦	0,54 
	¦	0,1   	¦	0,1   	¦	0,11  	¦	0,98   	¦	0,24     	¦	0,25    	¦	0,53    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	14 	¦	Трубоукладчики     	¦	-"-        	¦	7,17   	¦	1,31  	¦	-     	¦	5,95 
	¦	4,17  	¦	5,14  	¦	4,75  	¦	-      	¦	1,43     	¦	5,4     	¦	5,86    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	15 	¦	Подъемники строи-  	¦	-"-        	¦	0,22   	¦	0,03  	¦	-     	¦	0,33 
	¦	0,23  	¦	0,22  	¦	0,27  	¦	-      	¦	0,29     	¦	0,25    	¦	0,22    	¦

	¦	   	¦	тельные            	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	16 	¦	Погрузчики одноков-	¦	т грузо-   	¦	0,36   	¦	0,57  	¦	-     	¦	3,17 
	¦	1,7   	¦	1,7   	¦	1,54  	¦	-      	¦	2,38     	¦	1,62    	¦	1,36    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	шовые              	¦	подъемности	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	17 	¦	Автопогрузчики     	¦	шт.        	¦	0,23   	¦	0,21  	¦	1,47  	¦	0,17 
	¦	0,03  	¦	0,2   	¦	0,21  	¦	-      	¦	0,32     	¦	0,17    	¦	0,24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	18 	¦	Компрессоры        	¦	куб. м/мин.	¦	8,28   	¦	5,25  	¦	-     	¦	7,94 
	¦	11,14 	¦	7,14  	¦	5,7   	¦	1,66   	¦	5,34     	¦	13,33   	¦	3,8     	¦

	¦	   	¦	передвижные        	¦	производи- 	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	тельности  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	                   	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	19 	¦	Электростанции     	¦	кВт        	¦	7,81   	¦	8,2   	¦	-     	¦	0,49 
	¦	10,42 	¦	5,84  	¦	4,39  	¦	82,59  	¦	1,79     	¦	15,69   	¦	6       	¦

	¦	   	¦	передвижные мощнос-	¦	мощности   	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	тью 30 кВт и выше  	¦	           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	Таблица 2

	ЖИЛИЩНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	----T-----------------------T-----------T-------T--------T-------¬

	¦	 N 	¦	        Машины         	¦	  Единица  	¦	В сель-	¦	В горо- 	¦	В круп-	¦

	¦	п/п	¦	                       	¦	 измерения 	¦	ской   	¦	дах, ра-	¦	ных го-	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	мест-  	¦	бочих   	¦	родах с	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	ности  	¦	поселках	¦	населе-	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	город-  	¦	нием   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	ского   	¦	свыше  	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	типа с  	¦	500    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	населе- 	¦	тыс.   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	нием до 	¦	жителей	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	500 тыс.	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	жителей 	¦	       	¦

	+---+-----------------------+-----------+-------+--------+-------+

	¦	1  	¦	Экскаваторы одноковшо- 	¦	куб. м     	¦	0,43   	¦	0,38    	¦	0,39   	¦

	¦	   	¦	вые с ковшом емкостью  	¦	емкости    	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	до 2,5 куб. м, включая 	¦	ковша      	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	тракторы с навесным    	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	экскаваторным оборудо- 	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	ванием                 	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	2  	¦	Экскаваторы многоковшо-	¦	шт.        	¦	0,02   	¦	0,04    	¦	0,04   	¦

	¦	   	¦	вые                    	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	3  	¦	Скреперы               	¦	куб. м     	¦	0,133  	¦	0,075   	¦	-      	¦

	¦	   	¦	                       	¦	емкости    	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	ковша      	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	4  	¦	Бульдозеры             	¦	шт.        	¦	2,3    	¦	1,3     	¦	1,02   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	условной   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	мощности   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	100 л.с.   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	5  	¦	Автогрейдеры           	¦	шт.        	¦	0,49   	¦	0,15    	¦	0,08   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	6  	¦	Сваебойное оборудование	¦	-"-        	¦	0,182  	¦	0,024   	¦	0,024  	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	7  	¦	Бурильные и бурильно-  	¦	-"-        	¦	0,16   	¦	0,12    	¦	0,08   	¦

	¦	   	¦	крановые машины        	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	8  	¦	Краны башенные         	¦	т грузо-   	¦	6,4    	¦	7,5     	¦	8,45   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	подъемности	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	9  	¦	Краны гусеничные       	¦	то же      	¦	2,6    	¦	2,35    	¦	3      	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	10 	¦	Краны пневмоколесные   	¦	-"-        	¦	2,2    	¦	5,71    	¦	3,75   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	11 	¦	Краны автомобильные    	¦	-"-        	¦	14,02  	¦	7,64    	¦	4      	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	12 	¦	Краны тракторные       	¦	-"-        	¦	0,2    	¦	-       	¦	0,08   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	13 	¦	Трубоукладчики         	¦	-"-        	¦	0,13   	¦	0,26    	¦	1,25   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	14 	¦	Подъемники строительные	¦	-"-        	¦	0,69   	¦	0,39    	¦	0,47   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	15 	¦	Погрузчики одноковшовые	¦	-"-        	¦	1,013  	¦	0,49    	¦	0,38   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	16 	¦	Автопогрузчики         	¦	шт.        	¦	0,174  	¦	0,12    	¦	0,25   	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	17 	¦	Компрессоры передвижные	¦	куб. м/мин.	¦	3,96   	¦	4,84    	¦	4,7    	¦

	¦	   	¦	                       	¦	производи- 	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	тельности  	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	18 	¦	Электростанции пере-   	¦	кВт        	¦	8,97   	¦	8,47    	¦	9      	¦

	¦	   	¦	движные мощностью 30   	¦	мощности   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	кВт и выше             	¦	           	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	L---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------

	Таблица 3

	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T------------------T---------T------T--------T--------T------¬

	¦	 N 	¦	      Машины      	¦	 Единица 	¦	Гидро-	¦	Тепловые	¦	Атомные 	¦	Линии 	¦

	¦	п/п	¦	                  	¦	измерения	¦	элек- 	¦	электро-	¦	электро-	¦	элек- 	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	тро-  	¦	станции 	¦	станции 	¦	тропе-	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	стан- 	¦	        	¦	        	¦	редачи	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	ции   	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	+---+------------------+---------+------+--------+--------+------+

	¦	1  	¦	Экскаваторы одно- 	¦	куб. м   	¦	0,968 	¦	0,42    	¦	1,023   	¦	0,41  	¦

	¦	   	¦	ковшовые с ковшом 	¦	емкости  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	емкостью до 2,5   	¦	ковша    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	куб. м, включая   	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	тракторы с навес- 	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	ным экскаваторным 	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	оборудованием     	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	2  	¦	Экскаваторы       	¦	шт.      	¦	0,045 	¦	0,022   	¦	0,067   	¦	0,002 	¦

	¦	   	¦	многоковшовые     	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	3  	¦	Скреперы          	¦	куб. м   	¦	1,93  	¦	0,65    	¦	1,48    	¦	0,21  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	емкости  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	ковша    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	4  	¦	Бульдозеры        	¦	шт.      	¦	1,8   	¦	1,04    	¦	1,55    	¦	1,42  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	условной 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	мощности 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	100 л.с. 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	5  	¦	Автогрейдеры      	¦	шт.      	¦	0,129 	¦	0,058   	¦	0,126   	¦	-     	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	6  	¦	Сваебойное        	¦	-"-      	¦	0,196 	¦	0,15    	¦	0,15    	¦	0,22  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	оборудование      	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	7  	¦	Бурильные и       	¦	-"-      	¦	2,2   	¦	0,15    	¦	0,15    	¦	2,53  	¦

	¦	   	¦	бурильно-крановые 	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	машины            	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	8  	¦	Краны башенные    	¦	т грузо- 	¦	6,75  	¦	3,22    	¦	12,08   	¦	-     	¦

	¦	   	¦	                  	¦	подъем-  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	ности    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	9  	¦	Краны гусеничные  	¦	то же    	¦	8     	¦	7,98    	¦	15,19   	¦	0,42  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	10 	¦	Краны пневмоколес-	¦	-"-      	¦	3,35  	¦	1,97    	¦	 4,5    	¦	0,18  	¦

	¦	   	¦	ные               	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	11 	¦	Краны автомобиль- 	¦	-"-      	¦	6,96  	¦	5,1     	¦	10,5    	¦	24,14 	¦

	¦	   	¦	ные               	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	12 	¦	Краны железнодо-  	¦	-"-      	¦	0,9   	¦	1,49    	¦	1,5     	¦	0,32  	¦

	¦	   	¦	рожные            	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	13 	¦	Краны тракторные  	¦	-"-      	¦	1,39  	¦	1,22    	¦	1,22    	¦	8,63  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	14 	¦	Трубоукладчики    	¦	-"-      	¦	1,66  	¦	0,77    	¦	1,07    	¦	0,44  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	15 	¦	Подъемники строи- 	¦	-"-      	¦	0,26  	¦	0,38    	¦	0,723   	¦	0,023 	¦

	¦	   	¦	тельные           	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	16 	¦	Погрузчики одно-  	¦	-"-      	¦	1,13  	¦	0,32    	¦	0,5     	¦	0,035 	¦

	¦	   	¦	ковшовые          	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	¦	   	¦	                  	¦	         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	17 	¦	Автопогрузчики    	¦	шт.      	¦	0,23  	¦	0,17    	¦	0,25    	¦	0,14  	¦

	L---+------------------+---------+------+--------+--------+-------

	Таблица 4

	ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	----T--------------T-------T------T------T-----T-------T--------T----
	--¬

	¦	 N 	¦	    Машины    	¦	Единица	¦	Желез-	¦	Гидро-	¦	Мосты	¦	Тоннели	¦	Автомо-
	¦	Элект-	¦

	¦	п/п	¦	              	¦	измере-	¦	ные   	¦	техни-	¦	     	¦	и мет- 	¦	бильные
	¦	ромон-	¦

	¦	   	¦	              	¦	ния    	¦	дороги	¦	ческие	¦	     	¦	рополи-	¦	дороги 
	¦	тажные	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	соору-	¦	     	¦	тены  
	¦	союзного	¦	работы	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	жения 	¦	     	¦	      
	¦	значения	¦	      	¦

	+---+--------------+-------+------+------+-----+-------+--------+----
	--+

	¦	1  	¦	Экскаваторы   	¦	куб. м 	¦	1,03  	¦	0,61  	¦	0,41 	¦	0,3    	¦	0,67   
	¦	0,09  	¦

	¦	   	¦	одноковшовые с	¦	емкости	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	ковшом емкос- 	¦	ковша  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	тью до 2,5    	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	куб. м, вклю- 	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	чая тракторы с	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	навесным экс- 	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	каваторным    	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	оборудованием 	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	2  	¦	Экскаваторы   	¦	шт.    	¦	0,11  	¦	0,068 	¦	-    	¦	0,007  	¦	0,034  
	¦	0,87  	¦

	¦	   	¦	многоковшовые 	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	3  	¦	Скреперы      	¦	куб. м 	¦	2,14  	¦	0,18  	¦	-    	¦	-      	¦	7,88    	¦	-
	     	¦

	¦	   	¦	              	¦	емкости	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	ковша  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	4  	¦	Бульдозеры    	¦	шт.    	¦	1,85  	¦	1,8   	¦	1,26 	¦	0,57   	¦	2,5    
	¦	0,78  	¦

	¦	   	¦	              	¦	услов- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	ной    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	мощнос-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	ти 100 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	л.с.   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	5  	¦	Автогрейдеры  	¦	шт.    	¦	0,34  	¦	0,11  	¦	0,09 	¦	0,04   	¦	1,45    	¦	-
	     	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	6  	¦	Краны башенные	¦	т      	¦	4,56  	¦	3,43  	¦	0,72 	¦	1,46   	¦	-       	¦	-
	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	              	¦	грузо- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	подъем-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	ности  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	7  	¦	Краны гусенич-	¦	то же  	¦	1,82  	¦	5,78  	¦	18,76	¦	1,67   	¦	0,67    	¦	-
	     	¦

	¦	   	¦	ные           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	8  	¦	Краны пневмо- 	¦	-"-    	¦	3,72  	¦	4,84  	¦	17,47	¦	3,37   	¦	5,08    	¦	-
	     	¦

	¦	   	¦	колесные      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	9  	¦	Краны автомо- 	¦	-"-    	¦	13    	¦	6,73  	¦	17,29	¦	5,27   	¦	6,39   
	¦	8,77  	¦

	¦	   	¦	бильные       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	10 	¦	Краны железно-	¦	-"-    	¦	7,51  	¦	0,96  	¦	13,15	¦	0,57   	¦	-      
	¦	2,61  	¦

	¦	   	¦	дорожные      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	11 	¦	Краны трактор-	¦	-"-    	¦	1,66  	¦	1,76  	¦	2,84 	¦	0,8    	¦	0,87   
	¦	1,95  	¦

	¦	   	¦	ные           	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	12 	¦	Погрузчики    	¦	-"-    	¦	0,348 	¦	0,156 	¦	0,174	¦	0,069  	¦	-       	¦	-
	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	одноковшовые  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	   	¦	              	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       
	¦	      	¦

	¦	13 	¦	Автопогрузчики	¦	шт.    	¦	0,38  	¦	0,15  	¦	0,33 	¦	0,45   	¦	0,13   
	¦	0,29  	¦

	L---+--------------+-------+------+------+-----+-------+--------+----
	---

	Примечание. Нормы даны без учета потребности в машинах для строительства БАМа.

	Таблица 5

	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
	СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ

	----T-----------------------T-----------T---------T--------T-----¬

	¦	 N 	¦	        Машины         	¦	  Единица  	¦	Нефтяная 	¦	Сельское	¦	Связь	¦

	¦	п/п	¦	                       	¦	 измерения 	¦	и газовая	¦	хозяйст-	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	промыш-  	¦	во      	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	ленность 	¦	        	¦	     	¦

	+---+-----------------------+-----------+---------+--------+-----+

	¦	1  	¦	Экскаваторы одноковшо- 	¦	куб. м     	¦	0,62     	¦	1,12    	¦	0,33 	¦

	¦	   	¦	вые с ковшом емкостью  	¦	емкости    	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	до 2,5 куб. м, включая 	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	тракторы с навесным    	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	экскаваторным оборудо- 	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	ванием                 	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	2  	¦	Экскаваторы многоков-  	¦	шт.        	¦	0,3      	¦	0,11    	¦	0,87 	¦

	¦	   	¦	шовые                  	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	3  	¦	Скреперы               	¦	куб. м     	¦	0,77     	¦	0,45    	¦	  -  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                       	¦	емкости    	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	ковша      	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	4  	¦	Бульдозеры             	¦	шт.        	¦	2,23     	¦	2,3     	¦	1,37 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	условной   	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	мощности   	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	100 л.с.   	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	5  	¦	Автогрейдеры           	¦	шт.        	¦	0,13     	¦	0,38    	¦	0,03 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	6  	¦	Сваебойное оборудование	¦	-"-        	¦	0,09     	¦	0,18    	¦	  -  	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	7  	¦	Бурильные и бурильно-  	¦	-"-        	¦	0,53     	¦	0,45    	¦	1,64 	¦

	¦	   	¦	крановые машины        	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	8  	¦	Краны башенные         	¦	т грузо-   	¦	1,25     	¦	0,45    	¦	1,2  	¦

	¦	   	¦	                       	¦	подъемности	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	9  	¦	Краны гусеничные       	¦	то же      	¦	3,49     	¦	2,66    	¦	0,21 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	10 	¦	Краны пневмоколесные   	¦	-"-        	¦	3,38     	¦	3,33    	¦	0,32 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	11 	¦	Краны автомобильные    	¦	-"-        	¦	10,28    	¦	18,798  	¦	12,27	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	12 	¦	Краны железнодорожные  	¦	-"-        	¦	0,15     	¦	0,06    	¦	-    	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	13 	¦	Краны тракторные       	¦	-"-        	¦	0,19     	¦	0,3     	¦	0,85 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	14 	¦	Трубоукладчики         	¦	-"-        	¦	53       	¦	0,5     	¦	0,02 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	15 	¦	Подъемники строительные	¦	-"-        	¦	-        	¦	1,43    	¦	0,04 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	16 	¦	Погрузчики одноковшовые	¦	-"-        	¦	0,3      	¦	0,56    	¦	0,03 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	17 	¦	Автопогрузчики         	¦	шт.        	¦	0,15     	¦	0,31    	¦	0,34 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	18 	¦	Компрессоры передвижные	¦	куб. м/мин.	¦	4        	¦	6,52    	¦	15,07	¦

	¦	   	¦	                       	¦	производи- 	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	тельности  	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	19 	¦	Электростанции пере-   	¦	кВт        	¦	54       	¦	78,05   	¦	21,97	¦

	¦	   	¦	движные мощностью 30   	¦	мощности   	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	¦	   	¦	кВт и выше             	¦	           	¦	         	¦	        	¦	     	¦

	L---+-----------------------+-----------+---------+--------+------

	Таблица 6

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
	МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР)

	----T--------------------------------T----------------T----------¬

	¦	 N 	¦	             Машины             	¦	    Единица     	¦	Количество	¦

	¦	п/п	¦	                                	¦	   измерения    	¦	          	¦

	+---+--------------------------------+----------------+----------+

	¦	1  	¦	Краны башенные                  	¦	т               	¦	2,69      	¦

	¦	   	¦	                                	¦	грузоподъемности	¦	          	¦

	¦	   	¦	                                	¦	                	¦	          	¦

	¦	2  	¦	Краны гусеничные                	¦	то же           	¦	23,56     	¦

	¦	   	¦	                                	¦	                	¦	          	¦

	¦	3  	¦	Краны пневмоколесные            	¦	-"-             	¦	6,39      	¦

	¦	   	¦	                                	¦	                	¦	          	¦

	¦	4  	¦	Краны автомобильные             	¦	-"-             	¦	10,18     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                                	¦	                	¦	          	¦

	¦	5  	¦	Краны железнодорожные           	¦	-"-             	¦	0,285     	¦

	L---+--------------------------------+----------------+-----------

	Примечание. Нормы рассчитаны на объемы работ без учета капитального ремонта.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.