ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
	СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июля 1975 г. N 621
	О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА УСТЬ - ИЛИМСКОГО
	ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДА УСТЬ - ИЛИМСКА

	Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что 	строительство	 Усть -
	Илимского лесопромышленного комплекса, имеющего важное значение в деле реализации
	мероприятий по развитию социалистической экономической интеграции, Министерством
	энергетики и электрификации СССР, Министерством целлюлозно - бумажной промышленности и
	Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР осуществляется
	неудовлетворительно.

	Установленное Постановлением Совета Министров СССР от 8 октября 1973 г. N 739 на 1974
	год задание по 	строительству	 объектов указанного комплекса не выполнено.

	В целях обеспечения строительства Усть - Илимского лесопромышленного комплекса и города
	Усть - Илимска Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

	1. Обязать Министерство целлюлозно - бумажной промышленности, Министерство лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерство энергетики и электрификации
	СССР, Министерство транспортного строительства и Министерство монтажных и специальных
	строительных работ СССР обеспечить в 1975 - 1982 годах ввод в действие производственных
	мощностей на объектах Усть - Илимского лесопромышленного комплекса (включая предприятия
	лесосырьевой базы) в сроки согласно Приложению N 1 вместо сроков, предусмотренных
	Постановлением Совета Министров СССР от 8 октября 1973 г. N 739.

	2. Возложить на Министерство целлюлозно - бумажной промышленности функции заказчика по
	проектированию	 и строительству объектов Усть - Илимского лесопромышленного комплекса
	согласно Приложению N 2 вместо Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР и Главного управления микробиологической промышленности при Совете Министров СССР,
	как это было предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР от 8 октября 1973 г. N 739.

	В связи с этим:

	возложить на Союзглавхимкомплект при Госснабе СССР комплектование указанных объектов
	Усть - Илимского лесопромышленного комплекса в порядке, установленном пунктом 21
	Постановления Совета Министров СССР от 8 октября 1973 г. N 739;

	Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Главному
	управлению микробиологической промышленности при Совете Министров СССР выполнять
	проектно - изыскательские работы по этим объектам в сроки, обеспечивающие строительство и ввод
	их в действие в соответствии с настоящим Постановлением;

	Госплану СССР совместно с Госснабом СССР, Министерством целлюлозно - бумажной
	промышленности, Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и
	Главным управлением микробиологической промышленности при Совете Министров СССР внести
	необходимые изменения в показатели плана на 1975 год.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3. В частичное изменение Постановления Совета Министров СССР от 8 октября 1973 г. N 739
	Госплану СССР, Министерству целлюлозно - бумажной промышленности и Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР предусматривать в проектах годовых
	народнохозяйственных планов на 1976 - 1982 годы выделение отдельной строкой в порядке,
	предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 28 июня 1972 г. N 496-160,
	капитальных вложений на строительство Усть - Илимского лесопромышленного комплекса (включая
	предприятия лесосырьевой базы), города Усть - Илимска и производственных баз строительства
	согласно Приложению N 3.

	4. В связи с изменениями, предусмотренными пунктами 1, 2 и 3 настоящего Постановления,
	Госплану СССР с участием Госстроя СССР, Министерства целлюлозно - бумажной
	промышленности, Министерства энергетики и электрификации СССР, Совета Министров РСФСР и
	других заинтересованных министерств и ведомств СССР рассмотреть вопрос об уточнении заданий
	по строительству города Усть - Илимска, установленных Постановлением Совета Министров СССР
	от 18 октября 1974 г. N 821, и предложения по этому вопросу в месячный срок представить в Совет
	Министров СССР.

	5. Госплану СССР, Госснабу СССР, министерствам и ведомствам предусматривать начиная с
	1976 года в проектах планов и в планах распределения промышленной продукции (в зависимости от
	номенклатуры распределяемой продукции) выделение отдельной строкой Министерству целлюлозно
	- бумажной промышленности и Союзглавхимкомплекту при Госснабе СССР как фондодержателю
	оборудования, изделий и материалов для комплектования объектов Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска исходя из данных технической
	документации на строительство указанных объектов.

	6. Министерству химического и нефтяного машиностроения, Министерству энергетического
	машиностроения, Министерству тяжелого и транспортного машиностроения, Министерству
	строительного, дорожного и коммунального машиностроения, Министерству внутренних дел СССР,
	Министерству судостроительной промышленности, Министерству электротехнической
	промышленности, Министерству приборостроения, средств автоматизации и систем управления,
	Министерству энергетики и электрификации СССР и Министерству угольной промышленности
	СССР изготовить и поставить в 1976 - 1979 годах по заказам Союзглавхимкомплекта при Госснабе
	СССР Усть - Илимскому целлюлозному заводу именниковое, специальное, нетиповое оборудование
	в количестве и в сроки согласно Приложению N 4.

	7. Обязать Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности
	обеспечить в 1976 - 1979 годах изготовление и поставку Министерству целлюлозно - бумажной
	промышленности деревообрабатывающего оборудования для комплектования Усть - Илимского
	лесопильно - деревообрабатывающего комбината и именникового оборудования для Усть -
	Илимского целлюлозного завода в объемах согласно Приложению N 5.

	8. Министерству химического и нефтяного машиностроения обеспечить в 1977 году
	изготовление и поставку Министерству целлюлозно - бумажной промышленности опытной партии
	сборных металлических сушильных камер, рассчитанных на вмещение штабелей повышенной
	высоты, мощностью 75 тыс. куб. метров условных пиломатериалов в год в количестве 6 штук.

	9. Обязать Министерство целлюлозно - бумажной промышленности, Министерство лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР
	и Главное управление микробиологической промышленности при Совете Министров СССР:

	а) завершить разработку и соответственно утверждение технических проектов на строительство
	объектов Усть - Илимского лесопромышленного комплекса в следующие сроки: производственной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	базы Братскгэсстроя - в июле 1975 г., предприятий лесосырьевой базы - в III квартале 1975 г.,
	гидролизно - дрожжевого завода - в IV квартале 1975 г., лесопильно - деревообрабатывающего
	комбината и биржи приемки и раскряжевки хлыстов - в I квартале 1976 г.;

	б) разработать пусковые комплексы работ по лесопильно - деревообрабатывающему комбинату
	и бирже приемки и раскряжевки хлыстов в I квартале 1976 г., а по другим предприятиям Усть -
	Илимского лесопромышленного комплекса (включая предприятия лесосырьевой базы) - в III квартале
	1975 г.

	10. Министерству морского флота и Министерству речного флота РСФСР обеспечить в 1975 -
	1977 годах перевозку соответственно по Северному морскому пути, рекам Енисею и Ангаре
	негабаритного импортного оборудования для объектов Усть - Илимского лесопромышленного
	комплекса.

	Министерству цветной металлургии СССР обеспечить перегрузку указанного оборудования в
	порту Дудинка с морских судов на речные суда, а Министерству речного флота РСФСР выполнить
	необходимые работы по дооборудованию двух речных судов для перевозки этого оборудования.

	Министерству энергетики и электрификации СССР обеспечить увеличенные попуски воды
	через створ Усть - Илимской ГЭС на период перевозки указанного оборудования по реке Ангаре.

	11. Министерству связи СССР:

	выделить на условиях аренды в 1976 году, после окончания строительства радиорелейной
	линии Тайшет - Братск, по одному телефонному каналу Братск - Москва и Братск - Иркутск
	Братскгэсстрою Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерству целлюлозно -
	бумажной промышленности и Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР;

	осуществить по договору с Братскгэсстроем Министерства энергетики и электрификации СССР
	выполнение работ по организации каналов связи и установке в Братскгэсстрое аппарата для
	включения его в телеграфную сеть системы "Телекс";

	выполнить в 1976 - 1977 годах в городе Усть - Илимске по договору с Братскгэсстроем
	Министерства энергетики и электрификации СССР проектные и монтажные работы по организации
	системы связи "Алтай".

	Министерству промышленности средств связи обеспечить изготовление и поставку в 1976 -
	1977 годах Братскгэсстрою Министерства энергетики и электрификации СССР комплектного
	оборудования для системы связи "Алтай".

	12. Возложить функции заказчика по строительству ТЭЦ для обеспечения теплом и
	электроэнергией объектов Усть - Илимского лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска
	на Министерство энергетики и электрификации СССР.

	Министерству целлюлозно - бумажной промышленности и Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР передавать в установленном порядке Министерству
	энергетики и электрификации СССР капитальные вложения для строительства ТЭЦ (в соответствии
	с календарным графиком строительства) в объемах по определению Госстроя СССР.

	13. Поручить Госплану СССР и Министерству внешней торговли с участием Министерства
	целлюлозно - бумажной промышленности и других заинтересованных министерств и ведомств
	провести переговоры с правительствами Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной
	Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Социалистической Республики Румынии об уточнении условий участия указанных стран о
	строительстве Усть - Илимского целлюлозного завода, предусмотренных Генеральным соглашением
	о сотрудничестве в строительстве этого завода, а также о переносе срока начала поставок Советским
	Союзом в указанные страны целлюлозы с 1979 на 1980 - 1981 годы и предложения по этому вопросу
	в 3-месячный срок представить в Совет Министров СССР.

	14. Обязать Министерство внешней торговли и Министерство энергетики и электрификации
	СССР уточнить с участием Госплана СССР, Министерства целлюлозно - бумажной
	промышленности и Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР объем
	поставок из стран - членов СЭВ строительных конструкций и материалов, предназначенных для
	строительства Усть - Илимского целлюлозного завода, а также связанных с ним объектов, и в 3-
	месячный срок завершить переговоры и подписать контракты с соответствующими организациями
	стран - членов СЭВ.

	15. Госплану СССР предусмотреть в проектах соответствующих годовых планов:

	выделение в 1976 году Братскгэсстрою Министерства энергетики и электрификации СССР
	оборудования для обеспечения создаваемой автоматизированной системы управления
	строительством Усть - Илимского лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска согласно
	Приложению N 6;

	обеспечение потребности в молодых специалистах с высшим образованием организации,
	осуществляющих 	проектирование,	 строительство и эксплуатацию объектов Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска, на 1976 - 1977 годы согласно Приложению
	N 7.

	16. Министерству энергетики и электрификации СССР осуществить в 1975 - 1976 годах
	строительство в городе Усть - Илимске по проектной документации, разработанной Госснабом
	СССР, складского комплекса для Управления материально - технического снабжения Восточно -
	Сибирского района.

	Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерству
	целлюлозно - бумажной промышленности по согласованию с Госснабом СССР предусмотреть в
	сводных сметно - финансовых расчетах на строительство Усть - Илимского лесопромышленного
	комплекса капитальные вложения, необходимые для строительства указанного складского комплекса.

	17. Госснабу СССР:

	установить с 1 января 1976 г. для организаций Министерства энергетики и электрификации
	СССР и Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, осуществляющих
	строительство Усть - Илимского лесопромышленного комплекса, порядок централизованного
	снабжения запасными частями для автомобилей (включая БелАЗ-540), тракторов, экскаваторов и
	энергетического оборудования с учетом создания необходимого обменного фонда запасных частей;

	выделить дополнительно в 1975 году Министерству целлюлозно - бумажной промышленности
	и Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР для организаций,
	осуществляющих проектирование Усть - Илимского лесопромышленного комплекса, оборудование и
	приборы согласно Приложению N 8.

	18. Совету Министров РСФСР обеспечить:

	строительство в 1977 - 1979 годах в городе Усть - Илимске нефтебазы емкостью 15 - 20 тыс. куб.
	метров для обеспечения горюче - смазочными материалами предприятий Усть - Илимского

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	лесопромышленного комплекса.

	Министерству энергетики и электрификации СССР выполнить работы по строительству
	указанной нефтебазы;

	выделение ежегодно в первоочередном порядке Министерству энергетики и электрификации
	СССР и Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР для строительства
	предприятий Усть - Илимского лесопромышленного комплекса (включая предприятия лесосырьевой
	базы) щебня, песка, гравия, кирпича и других местных строительных материалов по заявкам этих
	министерств в необходимых объемах.

	19. Разрешить, в виде исключения, Министерству энергетики и электрификации СССР
	организовать в 1975 - 1976 годах для строительства предприятий лесосырьевой базы Усть -
	Илимского лесопромышленного комплекса 5 передвижных механизированных колонн на условиях,
	предусмотренных Постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1963 г. N 629, с оснащением
	колонн материальными ресурсами за счет фондов этого Министерства.

	20. Установить для Братскгэсстроя Министерства энергетики и электрификации СССР, а также
	для дирекций строящихся предприятий Усть - Илимского лесопромышленного комплекса и города
	Усть - Илимска Министерства целлюлозно - бумажной промышленности и Министерства лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР нормативы переходящих запасов металлопроката,
	труб, металлоконструкций, сборного железобетона и кабельной продукции на 60 дней.

	21. Учитывая важное народнохозяйственное значение и сложность производственных условий
	строительства и эксплуатации предприятий Усть - Илимского лесопромышленного комплекса,
	гидроэлектростанции и объектов города Усть - Илимска, установить начиная с 1 августа 1975 г.
	районный коэффициент 1,6 к заработной плате работников, занятых на изыскательских и проектных
	работах, строительстве, монтаже, работах по наладке и эксплуатации основных и подсобно -
	вспомогательных производств указанных предприятий и объектов, материально - техническим
	обеспечением, а также на транспорте, в хозяйствах и организациях, обслуживающих строительство и
	обеспечивающих эксплуатацию предприятий этого комплекса (включая предприятия лесосырьевой
	базы), Усть - Илимской гидроэлектростанции и объектов города Усть - Илимска.

	Госплану СССР увеличить на 1975 год фонды заработной платы соответствующим
	министерствам (ведомствам) в связи с установлением указанного коэффициента.

	Министерству целлюлозно - бумажной промышленности, Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерству энергетики и электрификации
	СССР по согласованию с Госстроем СССР включить в сводные сметно - финансовые расчеты на
	строительство соответствующих объектов Усть - Илимского лесопромышленного комплекса затраты,
	связанные с установлением районного коэффициента 1,6 к заработной плате.

	22. Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной
	платы отнести строительство Усть - Илимского лесопромышленного комплекса (включая
	предприятия лесосырьевой базы) и города Усть - Илимска к особому поясу по обеспечению
	работников теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью.

	23. С целью своевременного создания для строителей Усть - Илимского лесопромышленного
	комплекса необходимых производственных и бытовых условий Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерству легкой промышленности СССР
	дополнительно изготовить, а Министерству торговли СССР поставить Братскгэсстрою
	Министерства энергетики и электрификации СССР в 1975 году мебели на сумму 400 тыс. рублей,
	5000 овчинных полушубков, 5000 меховых шапок - ушанок, 5000 пар меховых унтов и 2500 пар

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	меховых носков.

	24. Обязать Министерство торговли СССР выделять для поощрения лучших
	производственников, занятых на строительстве и эксплуатации Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и объектов города Усть - Илимска, ежегодно по 2 тыс. легковых
	автомобилей для продажи через розничную сеть за счет сверхпланового производства легковых
	автомобилей, направляемых для продажи населению.

	25. Разрешить Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству целлюлозно -
	бумажной промышленности и Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР командировать на строительство объектов Усть - Илимского лесопромышленного комплекса и
	города Усть - Илимска квалифицированных рабочих третьего разряда и выше и инженерно -
	технических работников в 1975 году в количестве до 1200 человек и в 1976 - 1980 годах в количестве
	до 2000 человек ежегодно на условиях, установленных Постановлением Совета Министров СССР от
	20 апреля 1959 г. N 423.

	Дополнительные затраты, связанные с командированием указанных работников, включить в
	сводные сметы на строительство объектов этого комплекса и города Усть - Илимска.

	26. Установить, что материально - техническое обеспечение строительства жилых 	домов,
	объектов культурно - бытового и коммунального назначения, торговли и общественного питания,
	здравоохранения, просвещения и других объектов для обслуживания населения в городе Усть -
	Илимске производится до конца строительства этих объектов в порядке, предусмотренном пунктом 6
	Постановления Совета Министров СССР от 28 июня 1972 г. N 496-160.

	27. Ленгорисполкому обеспечить строительство:

	в 1976 - 1978 годах жилых 	домов	 общей площадью 10 тыс. кв. метров (из них общей площадью
	2 тыс. кв. метров для работников проектного института "Ленпромстройпроект" Госстроя СССР и
	общей площадью 8 тыс. кв. метров для работников проектного института "Гипробум" Министерства
	целлюлозно - бумажной промышленности), в том числе в 1976 году жилых домов общей площадью
	3500 кв. метров, в 1977 году - 3500 кв. метров и в 1978 году - 3000 кв. метров;

	в 1976 - 1977 годах общежития на 300 мест для работников проектного института
	"Гипролестранс" Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Министерству целлюлозно - бумажной промышленности и Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР передать Ленгорисполкому для этих целей
	соответствующие капитальные вложения за счет капитальных вложений, выделяемых указанным
	министерствам на строительство объектов производственного назначения.

	28. Возложить на заместителя Министра энергетики и электрификации СССР т. Александрова
	персональную ответственность за осуществление строительства Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска в установленные сроки.

	29. Поручить Министерству транспортного строительства и Министерству энергетики и
	электрификации СССР рассмотреть вопрос о временном привлечении строительных организаций
	Министерства транспортного строительства, подлежащих направлению на 	сооружение	 Байкало -
	Амурской железнодорожной магистрали, к строительству Усть - Илимского лесопромышленного
	комплекса и города Усть - Илимска и о результатах доложить Совету Министров СССР в месячный
	срок.

	30. Министерству обороны СССР предоставить возможность Министерству энергетики и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	электрификации СССР провести в 1975 - 1976 годах организованный набор рабочих из числа лиц,
	увольняемых в запас из Вооруженных Сил СССР, для строительства Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска.

	31. Для оперативного решения вопросов, связанных со строительством Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска, разрешить организовать в городе Москве
	представительство Братскгэсстроя численностью до 15 человек и представительство дирекции
	предприятий Усть - Илимского лесопромышленного комплекса, подведомственных Министерству
	лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, численностью до 5 человек, а также
	увеличить на 5 человек представительство дирекции Усть - Илимского целлюлозного завода, без
	увеличения численности и расходов на содержание аппарата управления предприятий и
	организаций Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерства целлюлозно - бумажной
	промышленности, расположенных в городе Москве.

	32. Министерству целлюлозно - бумажной промышленности и Министерству лесной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР рассмотреть вопрос о создании на базе Усть -
	Илимского лесопромышленного комплекса производственного объединения по комплексной
	переработке древесного сырья, заготовляемого в лесосырьевой базе этого комплекса.

	33. Разрешить, в виде исключения, Министерству целлюлозно - бумажной промышленности
	осуществить в городе Москве в 1976 - 1978 годах строительство силами строительных организаций
	Министерства инженерного корпуса проектного института "Мосгипробум" общей площадью до 5
	тыс. кв. метров, без увеличения численности работников института.

	34. Редакциям центральных газет, Государственному комитету Совета Министров СССР по
	телевидению и радиовещанию широко освещать ход строительства Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска и итоги социалистического соревнования
	коллективов стройки, а также всемерно популяризировать передовые методы труда лучших
	строителей и монтажников.

	35. Секретно.

	* * *

	ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают строительство Усть - Илимского
	лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска важнейшей всенародной стройкой и
	обязывают ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии, Советы Министров
	союзных и автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы установить контроль за
	своевременным исполнением заказов для этой стройки и оказывать систематическое содействие в
	направлении кадров, поставке оборудования и материалов, обеспечении своевременного и
	качественного выполнения проектных, строительных и монтажных работ для строительства Усть -
	Илимского лесопромышленного комплекса и города Усть - Илимска.

	Секретарь

	Центрального Комитета КПСС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Л.БРЕЖНЕВ

	Председатель

	Совета Министров СССР

	А.КОСЫГИН

	Приложение N 1

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ЗАДАНИЕ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ В 1975 - 1982 ГОДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
	МОЩНОСТЕЙ НА ОБЪЕКТАХ УСТЬ - ИЛИМСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
	КОМПЛЕКСА (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ)

	-----------------T----T-------T--------------------------------------
	----------------T-------¬

	¦	                	¦	Еди-	¦	1975 - 	¦	                    В том
	числе                       	¦	Минис- 	¦

	¦	                	¦	ни- 	¦	1982   	+----T-----T------T-------T-------T----
	---T------T-----+	терст- 	¦

	¦	                	¦	ца  	¦	годы - 	¦	1975	¦	1976 	¦	 1977 	¦	 1978  	¦	 1979  	¦
	1980  	¦	 1981 	¦	1982 	¦	во,    	¦

	¦	                	¦	из- 	¦	всего  	¦	год 	¦	год  	¦	 год  	¦	 год   	¦	 год   	¦
	год   	¦	 год  	¦	год  	¦	осу-   	¦

	¦	                	¦	ме- 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	щест-  	¦

	¦	                	¦	ре- 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	вляющее	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                	¦	ния 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	строи- 	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	тельст-	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	во     	¦

	+----------------+----+-------+----+-----+------+-------+-------+----
	---+------+-----+-------+

	¦	   Минбумпром   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Усть - Илимский 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	целлюлозный за- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	вод             	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	целлюлоза (по   	¦	тыс.	¦	 623,9 	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	 -"-   	¦	 282   	¦
	341,9 	¦	      	¦	     	¦	Мин-   	¦

	¦	варке)          	¦	тонн	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      
	¦	(первое	¦	(первое	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	полу- 
	¦	полу-  	¦	      	¦	     	¦	СССР и 	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	годие)
	¦	годие) 	¦	      	¦	     	¦	Мин-   	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	транс- 	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	строй  	¦

	¦	целлюлоза беле- 	¦	-"- 	¦	  50,4 	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 250   	¦
	250   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	  -"-  	¦

	¦	ная (товарная)  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      
	¦	(первое	¦	(первое	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	полу- 
	¦	полу-  	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	годие)
	¦	годие) 	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	целлюлоза небе- 	¦	-"- 	¦	   5,4 	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 
	50,4 	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	  -"-  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	леная (товарная)	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	(первое	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	полу-  	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	годие) 	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Усть - Илимский 	¦	тыс.	¦	1200   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 600   	¦
	600   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	лесопильно - де-	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	ревообрабатываю-	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	щий комбинат    	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	пиломатериалы   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	древесностружеч-	¦	-"- 	¦	 250   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	250   	¦	 -"- 	¦	  -"-  	¦

	¦	ные плиты       	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	технологическая 	¦	-"- 	¦	1005   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 500   	¦
	505   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	  -"-  	¦

	¦	щепа            	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Биржа приемки и 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	раскряжевки     	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	хлыстов         	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	технологическая 	¦	тыс.	¦	  70   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	  70   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	щепа            	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	                	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	раскряжевка     	¦	-"- 	¦	4400   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	1100   	¦	1100  
	¦	2200   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	  -"-  	¦

	¦	хлыстов         	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Усть - Илимский 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	гидролизно -    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	дрожжевой завод 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	дрожжи кормовые 	¦	тыс.	¦	  38   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 38  	¦	Мин-   	¦

	¦	                	¦	тонн	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	фурфурол        	¦	-"- 	¦	  12   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 12  	¦	  -"-  	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Минлеспром СССР 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Лесозаготови-   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	тельные предпри-	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	ятия            	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	вывозка древеси-	¦	млн.	¦	   6,05	¦	0,15	¦	 0,35	¦	  0,55	¦	   0,45	¦	   1,2 	¦	  
	1,95	¦	  0,8 	¦	  0,6	¦	       	¦

	¦	ны - всего      	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	в том числе:    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Эдучанский, Ба- 	¦	-"- 	¦	   4,7 	¦	-"- 	¦	 0,2 	¦	  0,4 	¦	   0,3 	¦	   1,05	¦	  
	1,8 	¦	  0,55	¦	  0,4	¦	Мин-   	¦

	¦	дарминский, Ка- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	паевский, Ка-   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	тинский, Карап- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	чанский, Тушам- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	ский леспромхо- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	зы, Игирминский 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	опытно - промыш-	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	ленный леспром- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	хоз Центрального	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	научно - иссле- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	довательского и 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	проектно - кон- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	структорского   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	института меха- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	низации и энер- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	гетики лесной   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	промышленности  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	(ЦНИИМЭ)        	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Ждановский, Ту- 	¦	млн.	¦	   1,35	¦	0,15	¦	 0,15	¦	  0,15	¦	   0,15	¦	   0,15	¦	  
	0,15	¦	  0,25	¦	  0,2	¦	Минлес-	¦

	¦	бинский, Средний	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	пром   	¦

	¦	леспромхозы     	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	перевалка древе-	¦	тыс.	¦	 700   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	350   	¦	350  	¦	Мин-   	¦

	¦	сины            	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	                	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	пиломатериалы - 	¦	-"- 	¦	 350   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	140   	¦	  80   	¦	 130   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	       	¦

	¦	всего           	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	в том числе:    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Игирминский     	¦	-"- 	¦	  80   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  80   	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	опытно - про-   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	мышленный лес-  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	промхоз ЦНИИМЭ  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Ждановский и    	¦	-"- 	¦	 270   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	140   	¦	  -"-  	¦	 130   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Минлес-	¦

	¦	Тубинский лес-  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	пром   	¦

	¦	промхозы        	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	шпалы - всего   	¦	тыс.	¦	 750   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	420   	¦	 330   	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	       	¦

	¦	                	¦	штук	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	в том числе:    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Игиримский      	¦	-"- 	¦	 330   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	 330   	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	опытно - промыш-	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	ленный леспром- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	хоз ЦНИИМЭ      	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Ждановский      	¦	-"- 	¦	 420   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	420   	¦	  -"-  	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Минлес-	¦

	¦	леспромхоз      	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	пром   	¦

	¦	                	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	технологическая 	¦	тыс.	¦	 270   	¦	-"- 	¦	22   	¦	 93   	¦	  70   	¦	  85   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	       	¦

	¦	щепа - всего    	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	в том числе:    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Игирминский     	¦	-"- 	¦	  70   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  70   	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	опытно - про-   	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	мышленный лес-  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	промхоз ЦНИИМЭ  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Ждановский и    	¦	тыс.	¦	 200   	¦	-"- 	¦	22   	¦	 93   	¦	  -"-  	¦	  85   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Минлес-	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Тубинский лес-  	¦	куб.	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	пром   	¦

	¦	промхозы        	¦	мет-	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	                	¦	ров 	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	добыча живицы - 	¦	тыс.	¦	   3,5 	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	   1   	¦	   0,8 	¦	   
	1,7	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	       	¦

	¦	всего           	¦	тонн	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	в том числе:    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Бадарминский,   	¦	-"- 	¦	   2,5 	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	  -"-  	¦	   0,8 	¦	   
	1,7	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Мин-   	¦

	¦	Тушамский, Ка-  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	энерго 	¦

	¦	рапчанский, Ка- 	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	¦	паевский, Катин-	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	ский леспромхозы	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	Ждановский и    	¦	-"- 	¦	   1   	¦	-"- 	¦	 -"- 	¦	 -"-  	¦	   1   	¦	 -"-   	¦	 -"-
	   	¦	 -"-  	¦	 -"- 	¦	Минлес-	¦

	¦	Тубинский лес-  	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	пром   	¦

	¦	промхозы        	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	       	¦	      	¦	     	¦	СССР   	¦

	L----------------+----+-------+----+-----+------+-------+-------+----
	---+------+-----+--------

	Примечание. Задания по вводу в действие производственных мощностей по отдельным
	леспромхозам распределяются Минлеспромом СССР по согласованию с Госпланом СССР и
	Минэнерго СССР без изменения общих годовых заданий по вводу в действие мощностей,
	установленных на 1975 - 1982 годы настоящим Приложением.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 2

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УСТЬ - ИЛИМСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
	ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТОРЫХ
	ВОЗЛАГАЮТСЯ НА МИНБУМПРОМ

	Лесопильно - деревообрабатывающий комбинат

	Гидролизно - дрожжевой завод

	Биржа приемки и раскряжевки хлыстов

	Ремонтно - механический завод

	Объединенное автохозяйство

	Приложение N 3

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫДЕЛЕНИЮ В 1976 - 1982
	ГОДАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО УСТЬ - ИЛИМСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
	КОМПЛЕКСА (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ), ГОРОДА УСТЬ -
	ИЛИМСКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                                       (млн. руб.)

	------------------------T------T-------------------------------------
	--¬

	¦	                       	¦	1976 -	¦	              В том
	числе              	¦

	¦	                       	¦	1982  	+-----T-----T-----T-----T-----T----T--
	--+

	¦	                       	¦	годы -	¦	1976 	¦	1977 	¦	1978 	¦	1979 	¦	1980
	¦	1981	¦	1982	¦

	¦	                       	¦	всего 	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦	год
	¦	год 	¦

	+-----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--
	--+

	¦	       Минбумпром      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	                       	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Усть - Илимский целлю- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	лозный завод           	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	794,9 	¦	103,2	¦	160,8	¦	224  	¦	215  	¦	 91,9	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	490,3 	¦	 67,8	¦	112,2	¦	125,5	¦	121,4	¦	 63,4	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	Усть - Илимский лесо-  	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	пильно - деревообраба- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	тывающий комбинат      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	жений - всего          	¦	241,6 	¦	  9,2	¦	 22  	¦	 34,6	¦	 53  	¦	101,5	¦	21,3	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	139,5 	¦	  5,3	¦	 12,7	¦	 20  	¦	 30,6	¦	 58,6	¦	12,3	¦	 -
	  	¦

	¦	Усть - Илимский гидро- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	лизно - дрожжевой завод	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	145,3 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦
	29,9	¦	56,6	¦	58,8	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	 92,6 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 21  	¦	36 
	¦	35,6	¦

	¦	Биржа приемки и раскря-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жевки хлыстов          	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	146,3 	¦	 15,1	¦	 19,7	¦	 30,2	¦	 34,1	¦	 47,2	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	 97   	¦	 10  	¦	 13,1	¦	 20  	¦	 22,6	¦	 31,3	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	Усть - Илимский ремонт-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	но - механический завод	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	 11,8 	¦	  1,8	¦	  5,3	¦	  4,7	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	  9,5 	¦	  1,5	¦	  4,3	¦	  3,7	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	Объединенное автохозяй-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ство                   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	 12,8 	¦	  2,4	¦	  5  	¦	  5,4	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	  8   	¦	  1,5	¦	  3,1	¦	  3,4	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	Производственная база  	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Братскгэсстроя и его   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	субподрядных организа- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ций                    	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	 29,3 	¦	 25,5	¦	  3,8	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	бот                    	¦	 23   	¦	 20  	¦	  3  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	из них на строительство	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объектов непроизводст- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	венного назначения     	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	 12,8 	¦	 12,8	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	 11   	¦	 11  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦	 -
	  	¦

	¦	                       	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	    Минлеспром СССР    	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	                       	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Объекты Усть - Илимско-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	го лесопромышленного   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	комплекса              	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	объем капитальных вло- 	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жений - всего          	¦	434,8 	¦	 69,4	¦	 71,6	¦	 74  	¦	 72,4	¦
	69,7	¦	46,7	¦	31  	¦

	¦	в том числе объем стро-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	ительно - монтажных ра-	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   
	¦	    	¦

	¦	бот                    	¦	338,7 	¦	 51,7	¦	 55  	¦	 59,2	¦	 58,1	¦	 52,7	¦	37 
	¦	25  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	L-----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--
	---

	Примечания. 1. Госплану СССР, Минлеспрому СССР и Главмикробиопрому предусматривать в
	проектах годовых народнохозяйственных планов на 1976 - 1982 годы централизованную передачу
	Минбумпрому капитальных вложений на строительство Усть - Илимского лесопильно -
	деревообрабатывающего комбината, Усть - Илимского гидролизно - дрожжевого завода, биржи
	приемки и раскряжевки хлыстов, объединенного автохозяйства и Усть - Илимского ремонтно -
	механического завода в объемах согласно настоящему Приложению.

	2. Объемы капитальных вложений, подлежащих выделению на строительство
	производственной базы Братскгэсстроя и его субподрядных организаций, должны быть уточнены
	Госпланом СССР после утверждения технического проекта на строительство этой базы.

	3. В общих объемах капитальных вложений по Минбумпрому и Минлеспрому СССР
	предусмотрены затраты на строительство объектов непроизводственного назначения в городе Усть -
	Илимске в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 18 октября 1974 г. N 821.

	4. Усть - Илимский ремонтно - механический завод и объединенное автохозяйство после
	завершения их строительства передаются для эксплуатации Минлеспрому СССР.

	Приложение N 4

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ЗАДАНИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ В 1976 - 1979 ГОДАХ УСТЬ - ИЛИМСКОМУ
	ЦЕЛЛЮЛОЗНОМУ ЗАВОДУ ИМЕННИКОВОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО, НЕТИПОВОГО
	ОБОРУДОВАНИЯ

	---------------------------T------T------T-----------------------¬

	¦	Наименование оборудования 	¦	Едини-	¦	1976 -	¦	     Срок поставки     	¦

	¦	                          	¦	ца из-	¦	1979  	+-----T-----T-----T-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                          	¦	мере- 	¦	годы -	¦	1976 	¦	1977 	¦	1978 	¦	1979 	¦

	¦	                          	¦	ния   	¦	всего 	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦

	+--------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+

	¦	         Минхиммаш        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Машины сушильные произво- 	¦	комп- 	¦	  2   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	дительностью 725 т в сутки	¦	лектов	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	товарной целлюлозы обрез- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ной шириной 6400 мм       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Установки бурорыхлительные	¦	штук  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	в северном исполнении для 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	рыхления смерзшейся щепы  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	производительностью 5 - 6 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	вагонов в час             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Корорубка роторная ножевая	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	с вертикальным валом про- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	изводительностью 20 - 25 т	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	в час абсолютно сухой ко- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ры; мощность электродвига-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	теля 200 кВт, скорость    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	1500 об./мин.             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Конвейер скребковый для   	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	разгрузки куч щепы произ- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	водительностью до 600 куб.	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	м в час, длина конвейера  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	15 м                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Разгрузчики шнековые само-	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ходные для коры и щепы    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	производительностью 250 - 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	520 насыпных куб. м в час 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электролизеры хлораторные 	¦	 -"-  	¦	120   	¦	10<*>	¦	 50  	¦	60   	¦	  -  	¦

	¦	на 50 ка                  	¦	      	¦	      	¦	(IV  	¦	<**> 	¦	(пер-	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	квар 	¦	     	¦	вое  	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	тал) 	¦	     	¦	полу-	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	го-  	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	дие) 	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Химическое оборудование из	¦	 -"-  	¦	160   	¦	 22  	¦	 66  	¦	 72  	¦	  -  	¦

	¦	биметалла - всего         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	в том числе:              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	корпуса баков диаметром:  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	22,5 м                    	¦	 -"-  	¦	 12   	¦	  2  	¦	  4  	¦	  6  	¦	  -  	¦

	¦	13,5 м                    	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	12 м                      	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	11 м                      	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  1  	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	корпуса бассейнов диамет- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ром:                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 м                      	¦	штук  	¦	 13   	¦	  2  	¦	  4  	¦	  7  	¦	  -  	¦

	¦	9 м                       	¦	 -"-  	¦	  3   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	8 м                       	¦	 -"-  	¦	 19   	¦	  4  	¦	  6  	¦	  9  	¦	  -  	¦

	¦	7 м                       	¦	 -"-  	¦	  9   	¦	  2  	¦	  3  	¦	  4  	¦	  -  	¦

	¦	корпуса отбельных башен и 	¦	 -"-  	¦	 32   	¦	  8  	¦	 12  	¦	 12  	¦	  -  	¦

	¦	баков диаметром 5 - 6 м   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	прочее химическое оборудо-	¦	 -"-  	¦	 64   	¦	  -  	¦	 32  	¦	 32  	¦	  -  	¦

	¦	вание                     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Химическое оборудование из	¦	 -"-  	¦	 14   	¦	  7  	¦	  7  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	титанового проката - всего	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	в том числе:              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	корпуса отбельных башен   	¦	 -"-  	¦	  6   	¦	  3  	¦	  3  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	диаметром 6 м, высотой 39 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	м                         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	корпуса баков диаметром   	¦	 -"-  	¦	  6   	¦	  3  	¦	  3  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	5 м, высотой 5 м          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	корпуса бассейнов диамет- 	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	ром 8 м, высотой 6 м      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	прочее химическое оборудо-	¦	тыс.  	¦	30000 	¦	1200 	¦	4800 	¦	10000	¦	14000	¦

	¦	вание                     	¦	рублей	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Установки кислородные     	¦	комп- 	¦	  5   	¦	  1  	¦	  -  	¦	  3  	¦	  1  	¦

	¦	К-0,4 (включая компрессор 	¦	лектов	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	4М10-40/70) производитель-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 450 куб. м в час   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	газообразного кислорода,  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	чистотой 99,7%, давлением 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	165 кг/кв. см             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	       Минэнергомаш       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Котлы паровые             	¦	штук  	¦	  6   	¦	  2  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	БКЗ-420-140-ПТ-1          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	производительностью 420 т 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	пара в час, давление 140  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ата                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Котлы по сжиганию коры    	¦	 -"-  	¦	  5   	¦	  1  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	КМ-75-40 производитель-   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 75 т пара в час,   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	давление 40 ата           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбина паровая           	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	ПТ-60-130/13              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	мощностью 60 тыс. кВт,    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	давление 130 ата          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбина паровая           	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	1    	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	Р-50-130/13               	¦	      	¦	      	¦	     	¦	(III 	¦	     	¦	     	¦

	¦	мощностью 50 тыс. кВт,    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	квар-	¦	     	¦	     	¦

	¦	давление 130 ата          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	тал) 	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбина паровая           	¦	штук  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	Т-100/120-130/3           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	мощностью 110 тыс. кВт,   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	давление 130 ата          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Бункера с "живым" дном    	¦	 -"-  	¦	  5   	¦	  -  	¦	  3  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Компрессоры К-250-61-2    	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  1  	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	производительностью 250   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	куб. м/мин., давление 9   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ата, электродвигатель     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	СТД-1600-2 мощностью 1600 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кВт, скорость 3000 об. /  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	мин.                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        Минтяжмаш         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Краны мостовые электричес-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кие грузоподъемностью:    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	30/5 тс, пролет 16,5 м,   	¦	штук  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 39 м       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	15 тс, пролет 34 м, высота	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 27 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 тс, пролет 22,5 м, вы- 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	сота подъема 45 м         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	15 тс, пролет 10,5 м, вы- 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	сота подъема 100 м        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	30 + 30 тс, пролет 27 м,  	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 24 м       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	20,5 тс, пролет 34 м, вы- 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	сота подъема 34 м         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Краны мостовые электричес-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кие во взрывобезопасном   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	исполнении грузоподъем-   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью:                   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 тс, пролет 16,5 м, вы- 	¦	штук  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	сота подъема 8,5 м        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 тс, пролет 22,5 м, вы- 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	сота подъема 16 м         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	20/5 тс, пролет 22,5 м,   	¦	 -"-  	¦	  3   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 12/14 м    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	20/5 тс, пролет 10,5 м,   	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 12/14 м    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	30/5 тс, пролет 16,5 м,   	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 8,5 м      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	30/5 тс, пролет 28,5 м,   	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	высота подъема 8,5 м      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	30 + 30 тс, пролет 28 м,  	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  3  	¦	  1  	¦

	¦	высота подъема 14 м       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Краны подвесные электри-  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ческие грузоподъемностью: 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	5 тс, пролет 4,5 м, высота	¦	штук  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 18 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	5 тс, пролет 6 м, высота  	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  2  	¦	  2  	¦

	¦	подъема 12 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	5 тс, пролет 9 м, высота  	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 36 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 тс, пролет 8 м, высота 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 24 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	10 тс, пролет 5 м, высота 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 36 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Кран мостовой электричес- 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	кий грейферный в северном 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	исполнении грузоподъем-   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 10 тс, пролет 28,5 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	м, высота подъема 12 м    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Кран козловой двухконсоль-	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	ный электрический, само-  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	монтирующийся в северном  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	исполнении грузоподъем-   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 10 тс, пролет 20 м,	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	высота подъема 10 м       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Краны подвесные электри-  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ческие в северном исполне-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	нии грузоподъемностью:    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	2 тс, пролет 9 м, высота  	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	подъема 30 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	5 тс, пролет 9 м, высота  	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	подъема 12 м              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Тали электрические грузо- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	подъемностью:             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	5 тс, высота подъема 12 м 	¦	 -"-  	¦	  8   	¦	  -  	¦	  4  	¦	  2  	¦	  2  	¦

	¦	5 тс, высота подъема 18 м 	¦	 -"-  	¦	  4   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	5 тс, высота подъема 24 м 	¦	 -"-  	¦	  3   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	10 тс, высота подъема 24 м	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Конвейеры специальные для 	¦	 -"-  	¦	 10   	¦	  -  	¦	5 (II	¦	5 (II	¦	  -  	¦

	¦	транспортировки балансовой	¦	      	¦	      	¦	     	¦	квар-	¦	ква- 	¦	     	¦

	¦	древесины шириной 800 -   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	тал) 	¦	ртал)	¦	     	¦

	¦	1000 мм, общая длина кон- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	вейеров 2500 м            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Конвейеры ленточные шири- 	¦	штук  	¦	 14   	¦	  -  	¦	7 (II	¦	7 (II	¦	  -  	¦

	¦	ной 1200 - 1400 мм с плуж-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	квар-	¦	квар-	¦	     	¦

	¦	ковыми сбрасывателями, об-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	тал) 	¦	тал) 	¦	     	¦

	¦	щая длина конвейеров 2000 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	м                         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Конвейеры скребковые для  	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	извести производитель-    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 45 т в час         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Элеваторы для вертикально-	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	го транспортирования обож-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	женной извести производи- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	тельностью до 60 т в час  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Платформы специализирован-	¦	 -"-  	¦	100   	¦	  -  	¦	  -  	¦	 50  	¦	50 (I	¦

	¦	ные для перевозки круглого	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	квар-	¦

	¦	леса по железной дороге   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	тал) 	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Минстройдормаш      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Печи вращающиеся известе- 	¦	штук  	¦	  3   	¦	  -  	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	регенсационные диаметром  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	3,6 м, длиной 110 м       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Кран башенный типа КБ-100 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	в северном исполнении гру-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	зоподъемностью 5 тс, вылет	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	стрелы 20 - 10 м          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Погрузчики - питатели для 	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	короткомерной древесины   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	         МВД СССР         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Золоуловители батарейные с	¦	комп- 	¦	  6   	¦	  3  	¦	  3  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	элементами диаметром      	¦	лектов	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	500 мм                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        Минсудпром        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбины паровые Р-12-35/5 	¦	штук  	¦	  2   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	мощностью 12000 кВт, дав- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	лением 35 ата,            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	МРТУ-5-432-0293-74        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбина паровая Р-12-35/5 	¦	 -"-  	¦	  1   	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	Р2 = 10 ата мощностью     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	8400 кВт, давлением 35 ата	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбины паровые ПР-6-35/5 	¦	 -"-  	¦	  2   	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	мощностью 6000 кВт, дав-  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	лением 35 ата,            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	МРТУ-5-0001-71            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Минэлектротехпром     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Трансформаторы типа       	¦	штук  	¦	  3   	¦	  2  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	ТРДНЦ-80000/110           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Крупноблочные щитовые уст-	¦	 -"-  	¦	850   	¦	100  	¦	400  	¦	350  	¦	  -  	¦

	¦	ройства ЩСУ, ЩУ           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	(II  	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	квар-	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	тал) 	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Комплектные распредели-   	¦	 -"-  	¦	1000  	¦	100  	¦	450  	¦	450  	¦	  -  	¦

	¦	тельные устройства мощ-   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ностью 6 и 10 кВт         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электродвигатели синхрон- 	¦	 -"-  	¦	   5  	¦	  -  	¦	  3  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	ные в закрытом исполнении,	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	с замкнутой системой вен- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	тиляции, со встроенным    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	воздухоохладителем, с ти- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ристорным возбудительным  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	устройством, мощностью    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1600 кВт, напряжением 10  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кв, скоростью 375 об./мин.	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электродвигатели асинхрон-	¦	 -"-  	¦	   4  	¦	  -  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	ные в закрытом исполнении,	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	с прямым пуском от полного	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	напряжения сети, мощностью	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	1700 кВт, напряжением 10  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кв, скоростью 1500 об. /  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	мин.                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбогенераторы ТВФ-63-2  	¦	 -"-  	¦	   2  	¦	  -  	¦	1 (II	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	мощностью 62 тыс. квт, на-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	квар-	¦	     	¦	     	¦

	¦	пряжением 10,5 кв         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	тал) 	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбогенератор ТВФ-120-2  	¦	 -"-  	¦	   1  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	мощностью 100 тыс. квт,   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	напряжением 10,5 кв       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Турбогенераторы Т-12-2    	¦	 -"-  	¦	   3  	¦	  1  	¦	  2  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	мощностью 12 тыс. квт,    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	напряжением 10,5 кв       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электродвигатели асинхрон-	¦	 -"-  	¦	   2  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦

	¦	ные в закрытом обдуваемом 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	исполнении, с короткозамк-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	нутым ротором, с прямым   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	пуском от полного напряже-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ния сети, мощностью 1350  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	квт, напряжением 10 кв,   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	скоростью 1000 об/мин.    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электропечи сушильные ка- 	¦	 -"-  	¦	   3  	¦	  -  	¦	  1  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	мерные с выкатной тележкой	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	во взрывобезопасном испол-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	нении                     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        Минприбор         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Датчики давления, расхода 	¦	штук  	¦	1200  	¦	  -  	¦	600  	¦	600  	¦	  -  	¦

	¦	с электрическим выходом на	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	0-5 ма (казанский завод   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	"Теплоконтроль")          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Аппаратура для автомати-  	¦	 -"-  	¦	1000  	¦	  -  	¦	500  	¦	500  	¦	  -  	¦

	¦	ческого регулирования     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	центральной части электри-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ческой аналоговой ветви   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ГСП (Московский завод теп-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ловой автоматики)         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Минэнерго СССР      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Вагоноопрокидыватели типа 	¦	штук  	¦	   2  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦

	¦	ВРС-125                   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Нестандартизированное и   	¦	тыс.  	¦	   8  	¦	  4  	¦	  2  	¦	  2  	¦	  -  	¦

	¦	котельно - вспомогательное	¦	тонн  	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	оборудование              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Минуглепром СССР     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Питатели для щепы тарель- 	¦	штук  	¦	   6  	¦	  -  	¦	  3  	¦	  3  	¦	  -  	¦

	¦	чатые диаметром 6 м (по   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кооперации с Минтяжмашем  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	по крупногабаритным дета- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	лям)                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	L--------------------------+------+------+-----+-----+-----+------

	--------------------------------

	<*> Опытная партия с завершением испытаний в III квартале 1977 г.

	<**> Изготовление и поставка после проведения испытаний опытной партии.

	Примечания. 1. Объемы и сроки изготовления оборудования, а также комплектующих изделий к
	нему, предусмотренные настоящим Приложением, уточняются Госпланом СССР и Госснабом СССР
	по министерствам - изготовителям при составлении годовых планов, но при условии обеспечения
	ввода в действие производственных мощностей Усть - Илимского целлюлозного завода в
	установленные сроки.

	2. Краны и другое оборудование во взрывобезопасном и северном исполнении должны
	поставляться по согласованным техническим условиям с Минтяжмашем, Минэлектротехпромом и
	Минбумпромом.

	Приложение N 5

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ЗАДАНИЕ МИНСТАНКОПРОМУ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ В 1976 - 1979 ГОДАХ
	МИНБУМПРОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
	КОМПЛЕКТОВАНИЯ УСТЬ - ИЛИМСКОГО ЛЕСОПИЛЬНО -
	ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА И ИМЕННИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	УСТЬ - ИЛИМСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ЗАВОДА

	                                                            (штук)

	------------------------------------------T----------------------¬

	¦	        Наименование оборудования        	¦	    Срок поставки     	¦

	¦	                                         	+-----T-----T-----T----+

	¦	                                         	¦	1976 	¦	1977 	¦	1978 	¦	1979	¦

	¦	                                         	¦	год  	¦	год  	¦	год  	¦	год 	¦

	+-----------------------------------------+-----+-----+-----+----+

	¦	Разворотные устройства для бревен        	¦	  1  	¦	  7  	¦	  6  	¦	  6 	¦

	¦	Фрезерно - пильные линии                 	¦	  -  	¦	  1  	¦	  1  	¦	  2 	¦

	¦	Фрезерно - обрезные линии                	¦	  1  	¦	 10  	¦	 10  	¦	 11 	¦

	¦	Установки для сортировки и пакетирования 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	сырых пиломатериалов                     	¦	  -  	¦	  1  	¦	  3  	¦	  4 	¦

	¦	Пакетоукладчики для центральных досок    	¦	  1  	¦	  6  	¦	  6  	¦	  7 	¦

	¦	Установки для сортировки и пакетирования 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	сухих пиломатериалов                     	¦	  -  	¦	  1  	¦	  5  	¦	  6 	¦

	¦	Лоботокарный станок типа 1А 692Б, диаметр	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	2000 мм, РМЦ-1800 мм                     	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦

	¦	Машина листогибочная четырехвалковая 367П	¦	  1  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -  	¦

	L-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----

	Приложение N 6

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВЫДЕЛЕНИЮ В 1976 ГОДУ
	БРАТСКГЭССТРОЮ МИНЭНЕРГО СССР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАВАЕМОЙ
	АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ УСТЬ -
	ИЛИМСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДА УСТЬ - ИЛИМСКА

	----------------------------------------------------T------------¬

	¦	             Наименование оборудования             	¦	 Количество 	¦

	¦	                                                   	¦	   (штук)   	¦

	+---------------------------------------------------+------------+

	¦	ЭВМ  ЕС-1030                                       	¦	      1     	¦

	¦	ЭВМ 6000                                           	¦	      2     	¦

	¦	ЭВМ М5000                                          	¦	      3     	¦

	¦	Аппаратура для передачи данных "Аккорд-1200ПП"     	¦	      4     	¦

	¦	Устройства сопряжения АСПУ                         	¦	      4     	¦

	¦	Телеграфные аппараты Т-63                          	¦	     80     	¦

	¦	Электронные фактурные автоматы "Зоемтрон-383"      	¦	     40     	¦

	¦	Электронные фактурные  автоматы "Зоемтрон-385"     	¦	      6     	¦

	¦	Фактурно - бухгалтерские машины "Искра-2301"       	¦	     40     	¦

	¦	Офсетные печатные машины "Ромайор-325"             	¦	      2     	¦

	¦	Электрографические аппараты ротационного типа "Ком-	¦	            	¦

	¦	фило-2А"                                           	¦	      4     	¦

	¦	Электрографические аппараты ротационного типа "Ксе-	¦	            	¦

	¦	рокс-194"                                          	¦	      4     	¦

	¦	Копировальный станок И-Вх-750                      	¦	      1     	¦

	¦	Малые счетно - клавишные машины МИНИРЕКС-73        	¦	    500     	¦

	¦	Автоматические телеграфные станции АТА-К-20        	¦	      2     	¦

	¦	Ротационные листорезные станки ЛР-IА               	¦	      2     	¦

	¦	Горизонтальный репродукционный аппарат ФГУ-2М      	¦	      1     	¦

	¦	Электрографические ротационные аппараты "Вега - Но-	¦	            	¦

	¦	ва"                                                	¦	     10     	¦

	¦	Электрографические ротационные аппараты РЭМ-600    	¦	      4     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Перфораторы ленточные ПЛ-150                       	¦	     20     	¦

	¦	Устройства механизма ввода с перфолент FS1501 с    	¦	            	¦

	¦	подмоткой ленты                                    	¦	     20     	¦

	¦	Лентопротяжные механизмы У-445                     	¦	      4     	¦

	¦	Накопители ферритовые У-454                        	¦	      4     	¦

	¦	Устройства механизма ввода с перфокарт У-216       	¦	      3     	¦

	¦	Вводы с перфокарт УВВК-601                         	¦	      3     	¦

	¦	Накопители на магнитном барабане НБ-11             	¦	     10     	¦

	¦	Устройство управления накопителем на магнитных ба- 	¦	            	¦

	¦	рабанах У-417                                      	¦	      1     	¦

	¦	Устройства коммутационные У-370 (УК-1)             	¦	      2     	¦

	¦	Устройство сопряжения У-420                        	¦	      1     	¦

	L---------------------------------------------------+-------------

	Приложение N 7

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров  СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ЗАДАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ С
	ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
	СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ УСТЬ - ИЛИМСКОГО
	ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДА УСТЬ - ИЛИМСКА, НА 1976 - 1977
	ГОДЫ

	                                                         (человек)

	-----------------------------------T-----------------------------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Номер и наименование специальности	¦	        Организации          	¦

	¦	                                  	+---------T---------T---------+

	¦	                                  	¦	Минэнерго	¦	Минбум-  	¦	Минлес-  	¦

	¦	                                  	¦	  СССР   	¦	прома    	¦	прома    	¦

	¦	                                  	¦	         	¦	         	¦	СССР     	¦

	¦	                                  	+----T----+----T----+----T----+

	¦	                                  	¦	1976	¦	1977	¦	1976	¦	1977	¦	1976	¦	1977	¦

	¦	                                  	¦	год 	¦	год 	¦	год 	¦	год 	¦	год 	¦	год 	¦

	+----------------------------------+----+----+----+----+----+----+

	¦	Всего специалистов                	¦	150 	¦	150 	¦	 73 	¦	 73 	¦	 76 	¦	 79 	¦

	¦	в том числе по специальностям:    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	0107 - Гидрогеология и инженерная 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	геология                          	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  2 	¦	  2 	¦	  3 	¦

	¦	0302 - Электрические системы и се-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ти                                	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  2 	¦	  3 	¦	  3 	¦

	¦	0303 - Электроснабжение промышлен-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ных предприятий и сельского хо-   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	зяйства                           	¦	 8  	¦	 8  	¦	  9 	¦	  4 	¦	  6 	¦	  7 	¦

	¦	0305 - Тепловые электрические     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	станции                           	¦	 -  	¦	 -  	¦	  4 	¦	  2 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0306 - Технология воды и топлива  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	на тепловых электростанциях       	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  2 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0308 - Промышленная теплоэнергети-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ка                                	¦	 -  	¦	 -  	¦	 17 	¦	 14 	¦	  2 	¦	  1 	¦

	¦	0501 - Технология машиностроения, 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	металлорежущие станки и инструмен-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ты                                	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  4 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0510 - Подъемно - транспортные ма-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	шины и оборудование               	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  2 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0516 - Машины и аппараты химичес- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ких производств                   	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  8 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0519 - Машины и механизмы лесной и	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	деревообрабатывающей промышленнос-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ти                                	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  2 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0520 - Парогенераторостроение     	¦	 -  	¦	 -  	¦	  1 	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0521 - Турбиностроение            	¦	 -  	¦	 -  	¦	  1 	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0529 - Холодильные и компрессорные	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	машины и установки                	¦	 -  	¦	 -  	¦	  3 	¦	  2 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0614 - Светотехника и источники   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	света                             	¦	 6  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	0628 - Электропривод и автоматиза-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ция промышленных установок        	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  6 	¦	  1 	¦	  1 	¦

	¦	0649 - Автоматизация теплоэнерге- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	тических процессов                	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  1 	¦	  1 	¦

	¦	0702 - Автоматическая электросвязь	¦	 6  	¦	 6  	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	1201 - Архитектура                	¦	 6  	¦	 6  	¦	  2 	¦	  1 	¦	  4 	¦	  5 	¦

	¦	1202 - Промышленное и гражданское 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	строительство                     	¦	80  	¦	86  	¦	  5 	¦	  5 	¦	 25 	¦	 25 	¦

	¦	1206 - Городское строительство    	¦	 6  	¦	 6  	¦	  5 	¦	  5 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	1208 - Теплогазоснабжение и венти-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ляция                             	¦	12  	¦	12  	¦	  1 	¦	  5 	¦	  4 	¦	  4 	¦

	¦	1209 - Водоснабжение и канализация	¦	12  	¦	12  	¦	  3 	¦	  2 	¦	  6 	¦	  7 	¦

	¦	1210 - Строительство железных до- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	рог, путь и путевое хозяйство     	¦	 4  	¦	 4  	¦	  2 	¦	  - 	¦	  2 	¦	  2 	¦

	¦	1211 - Автомобильные дороги       	¦	10  	¦	10  	¦	  3 	¦	  - 	¦	  8 	¦	  8 	¦

	¦	1212 - Мосты и тоннели            	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  1 	¦	  1 	¦

	¦	1217 - Очистка природных и сточных	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	вод                               	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  2 	¦	  2 	¦

	¦	1604 - Эксплуатация железных дорог	¦	 -  	¦	 -  	¦	  2 	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	1614 - Механизация портовых пере- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	грузочных работ                   	¦	 -  	¦	 -  	¦	  1 	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	¦	1615 - Промышленный транспорт     	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  2 	¦	  2 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1721 - Экономика и организация    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	строительства                     	¦	 -  	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	  7 	¦	  7 	¦

	¦	1609 - Автомобили и автомобильное 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	хозяйство                         	¦	 -  	¦	 -  	¦	  1 	¦	  1 	¦	  - 	¦	  - 	¦

	L----------------------------------+----+----+----+----+----+-----

	Приложение N 8

	к Постановлению ЦК КПСС

	и Совета Министров СССР

	от 16 июля 1975 г. N 621

	ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В 1975
	ГОДУ МИНБУМПРОМУ И МИНЛЕСПРОМУ СССР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТЬ - ИЛИМСКОГО
	ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

	                                                            (штук)

	---------------------------------------T-------T-----------------¬

	¦	 Наименование оборудования и приборов 	¦	 Всего 	¦	   В том числе   	¦

	¦	                                      	¦	       	+--------T--------+

	¦	                                      	¦	       	¦	Минбум- 	¦	Минлес- 	¦

	¦	                                      	¦	       	¦	прому   	¦	прому   	¦

	¦	                                      	¦	       	¦	        	¦	СССР    	¦

	+--------------------------------------+-------+--------+--------+

	¦	Чертежные станки СЧД-200 с координат- 	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	ным чертежным прибором ПЧК-49-01      	¦	  200  	¦	  100   	¦	  100   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Приборы для черчения тушью "Рапидог-  	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	раф"                                  	¦	  500  	¦	  300   	¦	  200   	¦

	¦	Светокопировальные аппараты, копируе- 	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	мая ширина бумаги 1000 мм             	¦	    4  	¦	    1   	¦	    3   	¦

	¦	Станции административной связи ТЕМП-40	¦	    4  	¦	    2   	¦	    2   	¦

	¦	Выпрямительные устройства ВТ-61/5     	¦	    2  	¦	    2   	¦	    -   	¦

	¦	Установки оперативной телефонной связи	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	для одного руководителя на 20 номеров 	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	ПСКОВ-1                               	¦	    3  	¦	    3   	¦	    -   	¦

	¦	Громкоговорящие переговорные устройс- 	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	тва ПУ-1                              	¦	   20  	¦	   20   	¦	    -   	¦

	L--------------------------------------+-------+--------+---------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.