ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА N
	130
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СССР N 63
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 1975 года
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	- ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ С СУБПОДРЯДНЫМИ
	ОРГАНИЗАЦИЯМИ

	Государственный комитет Совета Министров СССР по делам 	строительства	 и
	Государственный плановый комитет Совета Министров СССР постановляют:

	утвердить и ввести в действие изменения Положения о взаимоотношениях организаций -
	генеральных подрядчиков с субподрядными организациями, утвержденного Постановлением
	Госстроя СССР и Госплана СССР от 31 июля 1970 г. N 94/81, согласно Приложению.

	Председатель Госстроя СССР

	И.НОВИКОВ

	Председатель Госплана СССР

	Н.БАЙБАКОВ

	Приложение

	к Постановлению

	Госстроя СССР и Госплана СССР

	от 31 июля 1975 г. N 130/63

	ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
	ОРГАНИЗАЦИЙ - ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ С СУБПОДРЯДНЫМИ
	ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР И

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ГОСПЛАНА СССР ОТ 31 ИЮЛЯ 1970 Г. N 94/81

	1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

	"В случае производственной необходимости стороны вправе в пределах общей стоимости
	монтажных и иных специальных строительных работ по договору субподряда или дополнительному
	соглашению к нему изменить объем выполняемых субподрядчиком работ по объектам,
	предусмотренным этим договором субподряда или дополнительным соглашением".

	2. В абзаце втором пункта 8 слова "представлять субподрядчикам фронт работ" заменить
	словами "обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для
	производства субподрядчиками последующих монтажных и иных специальных строительных работ".

	3. Пункт 9:

	а) в абзаце третьем после слова "этапов" включить слова "или комплексов";

	б) дополнить абзацем следующего содержания:

	"обеспечить готовность выполняемых им монтажных и иных специальных строительных работ
	для производства последующих работ генподрядчиком или другим субподрядчиком".

	4. Пункт 12:

	а) в абзаце третьем слово "КЖД" заменить словом "КЖ";

	б) в абзаце четвертом после слов "выдает субподрядчику" включить слова "в сроки,
	согласованные сторонами".

	5. Пункт 13:

	а) в абзаце втором слово "объемов" заменить словами "справку о сметной стоимости";

	б) абзац третий изложить в следующей редакции:

	"выписку из внутрипостроечного титульного списка объектов, на которых предусматривается
	выполнение работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости этих работ, выполняемых
	субподрядчиком в первом году";

	в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

	"календарный план производства работ по объектам, по которым предусматривается
	выполнение работ субподрядчиком";

	г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

	"график поставки бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих
	выполнению субподрядчиком в первом году".

	6. Пункт 14:

	а) абзац второй изложить в следующей редакции:

	"выписку из внутрипостроечного титульного списка объектов, на которых предусматривается

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	выполнение работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости этих работ, выполняемых
	субподрядчиком в планируемом году";

	б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

	"календарный план производства работ по объектам, по которым предусматривается
	выполнение работ субподрядчиком";

	в) абзац пятый изложить в следующей редакции:

	"график поставки бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих
	выполнению субподрядчиком в планируемом году".

	7. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

	"Наряды на поставку бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих
	выполнению субподрядчиком в планируемом году, передаются генподрядчиком субподрядчику в
	сроки, установленные Положением о поставках продукции производственно-технического
	назначения. Реализация указанных нарядов производится субподрядчиком, осуществляющим монтаж
	этих конструкций".

	8. Пункт 20:

	а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

	"Поставляемые заказчиком оборудование, подлежащее монтажу, и материалы передаются
	субподрядчику генподрядчиком или по его указанию заказчиком по актам на приобъектных складах
	комплектно, в полной исправности и в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору
	субподряда.

	Крупногабаритное оборудование поставляется укрупненными узлами в соответствии с
	техническими условиями на его изготовление. В тех случаях, когда это оборудование поставляется
	отдельными частями, обеспечение сборки его в укрупненные узлы входит в обязанность
	генподрядчика (заказчика)";

	б) после абзаца второго включить абзац следующего содержания:

	"В отдельных случаях по соглашению сторон может быть установлен иной порядок передачи
	оборудования и материалов".

	9. После абзаца первого пункта 33 включить абзац следующего содержания:

	"По объектам 	строительства,	 расположенным на обособленной строительной площадке, где
	работы выполняются только субподрядчиком, подводка временных инженерных сетей
	осуществляется последним за отдельную плату".

	10. Пункт 37:

	а) абзац первый изложить в следующей редакции:

	"Генподрядчик обязан к началу работ субподрядчика в сроки, предусмотренные договором,
	обеспечить согласно требованиям соответствующих глав III части СНиП строительную готовность
	объекта, конструкций или отдельных видов работ и выполнить другие возложенные на него
	обязанности, необходимые для создания условий для производства последующих монтажных и иных
	специальных строительных работ, выполняемых субподрядчиком. Субподрядчик обязан обеспечить

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	готовность выполняемых им монтажных и иных специальных строительных работ в сроки,
	предусмотренные договором, и создать зависящие от него условия для производства последующих
	работ, выполняемых генподрядчиком или другим субподрядчиком";

	б) абзац второй признать утратившим силу.

	11. Пункт 38:

	а) абзац десятый после слова "конструкций" дополнить словами "а также железнодорожных
	путей под краны на железнодорожном ходу";

	б) абзац 12 изложить в следующей редакции:

	"устройство в случаях, предусмотренных проектом, специальных эстакад (за исключением
	металлических) для монтажа тяжеловесного оборудования весом свыше 10 тонн";

	в) абзацы 16 и 17 признать утратившими силу;

	г) дополнить абзацем следующего содержания:

	"устройство лесов и подмостей при 	сооружении	 лифтовых установок".

	12. Пункт 39:

	а) в абзаце втором после слова "рытье" включить слова "и засыпку";

	б) абзац 12 дополнить словами: "кроме работ по 	сооружению	 лесов для монтажа лифтов";

	в) абзац 14 изложить в следующей редакции:

	"окраску внешней поверхности наружных трубопроводов, монтируемых субподрядчиком,
	включая окраску наружных трубопроводов под тепловую изоляцию, а также окраску внешней
	поверхности тепловой изоляции трубопроводов";

	г) абзац 19 признать утратившим силу;

	д) дополнить абзацем следующего содержания:

	"заделку примыканий к строительным конструкциям (за исключением штукатурки и устройства
	отливов) металлических переплетов и витражей при монтаже этих конструкций и стеновых панелей
	субподрядчиком".

	13. Абзацы первый и второй пункта 43 изложить в следующей редакции:

	"Генподрядчик обязан не менее чем за 10 дней до начала работ субподрядчика передать ему:

	необходимую для производства монтажных и иных специальных строительных работ
	техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства и на
	закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы. Состав и объем
	геодезической разбивочной основы устанавливаются в соответствии со строительными нормами и
	правилами".

	14. В пункте 44 после слова "спецификации" включить слова "завода-изготовителя".

	15. Пункт 52:

	а) в абзаце первом после слова "этапы" включить слова "или комплексы";

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) в абзаце втором после слова "этапу" включить слова "или комплексу".

	16. Пункт 55 изложить в следующей редакции:

	"55. Генподрядчик обязан акцептовать счета субподрядчика за выполненные им монтажные и
	иные специальные строительные работы не позднее 72 часов после получения счета учреждением
	банка, финансирующим генподрядчика.

	При разногласиях между генподрядчиком и субподрядчиком по расчетам генподрядчик обязан
	акцептовать счет в бесспорной части.

	Генподрядчиком и субподрядчиком по согласованию с банком может быть установлен порядок
	оплаты счетов за выполненные работы с последующим акцептом.

	Отказ от акцепта платежных документов за выполненные монтажные и иные специальные
	строительные работы, предоставленные услуги и переданные материалы возможен лишь в случаях,
	установленных Стройбанком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Госстроем СССР".

	17. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

	"60. За задержку генподрядчиком передачи субподрядчику документации, необходимой для
	составления договора субподряда или дополнительного соглашения к договору, в объеме и в сроки,
	указанные в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, за задержку субподрядчиком представления
	генподрядчику проекта договора субподряда или дополнительного соглашения к договору, за
	задержку направления генподрядчиком субподрядчику подписанного договора субподряда или
	дополнительного соглашения к договору в сроки, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящего
	Положения, за задержку генподрядчиком передачи субподрядчику рабочих чертежей и смет в объеме
	и в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Положения, виновная сторона уплачивает другой
	стороне штраф в размере 50 рублей за каждый день просрочки".

	18. Подпункт "г" пункта 61 изложить в следующей редакции:

	"г) за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 37, абзацем вторым пункта 43,
	пунктом 44 и абзацем первым пункта 45 настоящего Положения, - неустойку в размере 100 рублей за
	каждый день просрочки".

	19. Пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:

	"за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 37, - неустойку в размере 100 рублей за
	каждый день просрочки".

	20. Дополнить Положение пунктом 70 следующего содержания:

	"70. К договору субподряда и дополнительному соглашению к договору субподряда
	соответственно прилагается документация, предусмотренная в пунктах 13 и 14 настоящего
	Положения, а также особые условия к договору, календарный план производства субподрядных работ
	по этапам, комплексам и видам с указанием сметной их стоимости и сроков начала и окончания
	работ и график готовности строительных, монтажных и иных специальных строительных работ".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.