СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 1974 г. N 203
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ О ДОГОВОРАХ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВО

	Совет Министров СССР постановляет:

	1. Утвердить прилагаемые изменения Правил о договорах подряда на капитальное
	строительство,	 утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. N
	973 (СП СССР, 1970, N 2, ст. 11).

	2. Предоставить право Госстрою СССР издавать совместно с Госпланом СССР, Стройбанком
	СССР и Госбанком СССР обязательные для министерств и ведомств, исполкомов Советов депутатов
	трудящихся, предприятий, организаций и учреждений указания и разъяснения о порядке применения
	Правил о договорах подряда на капитальное 	строительство.

	3. Установить, что по решению исполкомов Советов депутатов трудящихся на
	подведомственных им объектах допускается, в порядке исключения, заключение заказчиком
	договоров подряда на строительство крупных производственных, жилых и культурно-бытовых
	комплексов и других объектов с двумя и более строительными организациями - генеральными
	подрядчиками.

	Председатель

	Совета Министров СССР

	А.КОСЫГИН

	Управляющий Делами

	Совета Министров СССР

	М.СМИРТЮКОВ

	Утверждены

	Постановлением

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Совета Министров СССР

	от 22 марта 1974 г. N 203

	ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА О ДОГОВОРАХ ПОДРЯДА НА
	КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА
	МИНИСТРОВ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1969 Г. N 973

	1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

	"13. Заказчик передает генеральному подрядчику не позднее 1 сентября года, предшествующего
	планируемому:

	по вновь начинаемым стройкам:

	утвержденный в установленном порядке технический (техно-рабочий) проект со сводной
	сметой и сводкой затрат, а также комплект всех материалов и данных, предусмотренных
	инструкциями и указаниями по разработке проектов и смет, в двух экземплярах;

	сметы на 	здания	 и 	сооружения,	 виды работ и затрат, каталоги индивидуальных единичных
	расценок, ценники сметных цен на местные материалы и изделия (франко-строительная площадка) в
	трех экземплярах;

	по вновь начинаемым и по переходящим стройкам:

	рабочие чертежи с отметкой заказчика на производство работ комплектно на объект в целом
	или на этапы работ, но не менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в планируемом году,
	в трех экземплярах.

	В случае принятия министерствами (ведомствами) - заказчиками и подрядчиками решения об
	осуществлении строительства двумя и более строительными организациями генеральными
	подрядчиками заказчик обязан передать каждому генеральному подрядчику в части выполняемых им
	работ материалы технического (техно-рабочего) проекта, сметы, каталоги индивидуальных
	единичных расценок, ценники сметных цен на местные материалы и изделия (франко-строительная
	площадка) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Правил".

	2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

	"14. Для составления подрядчиком проекта генерального или годового договора подряда на
	капитальное строительство заказчик обязан в 15-дневный срок со дня утверждения государственного
	плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год передать подрядчику следующую
	документацию:

	утвержденный в установленном порядке титульный список стройки, с распределением по годам
	заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов, а также объемов
	капитальных вложений и строительно-монтажных работ;

	акт об отводе земельного участка под строительство;

	внутрипостроечный титульный список на первый год строительства;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	график передачи в первом году строительства оборудования и материалов, обеспечение
	которыми возложено на заказчика;

	акты освидетельствования прочности отдельных частей 	зданий	 и 	сооружений,	 подлежащих
	реконструкции в первом году строительства.

	В случае принятия министерствами (ведомствами) - заказчиками и подрядчиками решения об
	осуществлении строительства двумя и более строительными организациями - генеральными
	подрядчиками заказчик обязан передать в указанный срок каждому генеральному подрядчику для
	составления проекта генерального или годового договора подряда на капитальное строительство на
	выполняемый им объем работ выписки из предусмотренных настоящим пунктом Правил документов
	и копии их".

	3. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

	"В случае принятия министерствами (ведомствами) - заказчиками и подрядчиками решения об
	осуществлении строительства двумя и более строительными организациями - генеральными
	подрядчиками заказчик обязан передать в срок, указанный в пункте 14 настоящих Правил, каждому
	генеральному подрядчику для составления проекта дополнительного соглашения к генеральному
	договору подряда на капитальное строительство на второй и последующие годы строительства
	выписки из предусмотренных пунктом 14 Правил документов и копии их".

	4. Абзацы первый, второй и третий пункта 24 изложить в следующей редакции:

	"Поставляемые заказчиком оборудование, подлежащее монтажу, и материалы передаются
	подрядчику или по его указанию субподрядчику по актам на приобъектных складах комплектно, в
	полной исправности и в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору подряда на
	капитальное строительство.

	Крупногабаритное оборудование поставляется укрупненными узлами в соответствии с
	техническими условиями на его изготовление. В тех случаях, когда это оборудование поставляется
	отдельными частями, обеспечение сборки его в укрупненные узлы входит в обязанность заказчика.

	В отдельных случаях по соглашению сторон может быть установлен иной порядок передачи
	оборудования и материалов".

	5. В пункте 37:

	а) абзац второй изложить в следующей редакции:

	"на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, проезжей
	части городских дорог, эксплуатируемых участков железных дорог и автомобильных дорог или в
	полосе отвода железных дорог и автомобильных дорог, а также на вскрытие дорожных покрытий";

	б) дополнить пункт абзацами следующего содержания:

	"на снос строений и сооружений, препятствующих строительству;

	на производство строительно-монтажных работ по объектам жилищно-гражданского
	назначения".

	6. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

	"39. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее
	чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	документацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы.
	Состав и объемы геодезической разбивочной основы устанавливаются в соответствии со
	строительными нормами и правилами".

	7. В пункте 41 после слова "спецификации" включить слова: "получаемые от завода-
	изготовителя".

	8. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

	"60. За задержку заказчиком передачи подрядчику документации, необходимой для составления
	генерального и годового договоров подряда на капитальное строительство или дополнительного
	соглашения к генеральному договору, в объеме и в сроки, указанные в пунктах 14 и 15 настоящих
	Правил, за задержку подрядчиком представления заказчику проекта договора подряда на капитальное
	строительство или дополнительного соглашения к генеральному договору, за задержку направления
	заказчиком подрядчику подписанного договора или дополнительного соглашения к генеральному
	договору в сроки, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящих Правил, виновная сторона
	уплачивает другой стороне штраф в размере 50 рублей за каждый день просрочки.

	За задержку заказчиком передачи подрядчику проектно-сметной документации в объеме и в
	сроки, указанные в пункте 13 настоящих Правил, заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере
	250 рублей за каждый день просрочки.

	За задержку передачи подрядчику экземпляров рабочих чертежей и смет в объеме и в сроки,
	указанные в пункте 17 настоящих Правил, заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 50 рублей
	за каждый день просрочки".

	9. Подпункт "г" пункта 61 изложить в следующей редакции:

	"за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 37, 38, 41 и абзацем первым пункта 44
	настоящих Правил, - неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.