СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 декабря 1979 г. N 2699р

	1. Утвердить представленный Минэнерго СССР и рассмотренный Госстроем СССР и ГКНТ
	технический проект на 	строительство	 Богучанской ГЭС на р. Ангаре со следующими основными
	показателями:

	установленная мощность                            - 3000 тыс. кВт

	                                                    (9 агрегатов

	                                                    по 333 тыс. кВт
	каждый)

	среднемноголетняя выработка электроэнергии        - 17,6 млрд. кВт.ч

	сметная стоимость 	строительства

	(включая работы, связанные с установкой

	дополнительно 3 агрегатов общей мощностью

	1000 тыс. кВт) - всего                            - 1741,6 млн.
	рублей

	  в том числе:

	  объектов производственного назначения           - 1415 млн. рублей

	    из них затраты на подготовку зоны

	    водохранилища (включая затраты по отрасли

	    "Электроэнергетика" на лесосводку и

	    лесоочистку в сумме 120,2 млн. рублей,

	    восстановление сельскохозяйственного

	    производства - 147,4 млн. рублей, перенос

	    строений и переселение граждан -

	    95,9 млн. рублей)                             - 419,1 млн. рублей

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	  жилого поселка Кодинск                          - 249,1 млн. рублей

	  базы стройиндустрии Братскгэсстроя (развитие)   - 27,5 млн. рублей

	  долевое участие Минэнерго СССР в строительстве

	  железнодорожной линии ст. Карабула - створ

	  Богучанской ГЭС                                 - 50 млн. рублей.

	2. Минэнерго СССР при последующем 	проектировании	 Богучанской ГЭС учесть замечания
	Госстроя СССР, изложенные в его заключении от 29 июня 1979 г.

	3. Минлеспрому СССР, Минбумпрому и Главмикробиопрому обеспечить разработку в 1980 -
	1981 годах с участием Минэнерго СССР и утверждение в установленном порядке технико-
	экономических обоснований строительства в районе Богучанской ГЭС предприятий
	деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и микробиологической промышленности, входящих
	в состав лесопромышленного комплекса, в целях рационального использования лесных ресурсов
	Красноярского края, имея в виду привлечение на строительство указанных предприятий рабочих и
	производственных мощностей организаций Минэнерго СССР, строящих Богучанскую ГЭС.

	4. Минтрансстрою обеспечить разработку в 1980 году - первом полугодии 1981 г. по заказу
	Минэнерго СССР технико-экономического обоснования строительства железнодорожной линии пос.
	Ярки - створ Богучанской ГЭС. Госплану СССР и Госстрою СССР рассмотреть указанное технико-
	экономическое обоснование и принять соответствующее решение.

	5. Разрешить, в виде исключения, Минтрансстрою осуществлять до 1 апреля 1980 г. работы по
	строительству железнодорожной линии ст. Карабула - пос. Ярки по рабочим чертежам и сметам к
	ним на отдельные объекты и виды работ.

	Заместитель Председателя

	Совета Министров СССР

	Н.ТИХОНОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.